정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	주민생활지원과	②담당자 (연락처)	노인복지 정의철 (330-2309)
③정책사업명	평창군 공설묘지 묘역 확장사업
④선정기준	그밖에 실명제가 필요하다고 인정되는 정책	⑤사업기간	2012년 ~ 2014년
⑥주요내용	□ 사업목적 ○ 기설치 묘지 610기중 601(98%)기를 사용하여, 묘지 500기 추가 조성 ○ 부대시설(도로 232m, 전기) 및 기존시설 보완 (조경수, 휴식시설) □ 사업개요 ○ 위 치 : 평창군 방림면 방림리 산692번지내 ○ 사 업 량 : 묘지 600기(6,158㎡), 도로개설(L=232m, B=6m) ○ 총사업비 : 1,319백만원(설계비 120, 공사비 1,199) ○ 공사기간 : 2012. 12. 26. ~ 2014. 7. 1.(공기390일) □ 추진상황 ○ 실시설계 : 2012. 3. 26. ~ 10. 14. (주)경원엔지니어링 93,810천원 ○ 추진현황 : 2012. 12. 26.(착공) ~ 2014. 7. 1.(준공예정일) ○ 지역동향 : 평창군 장사시설 주변지역 주민조례 제정 ⇨ 2013. 11. 29. 제정(제2076호) ○ 공사현황 : 묘역공사 완료(500기), 도로개설 (옹벽, 구조물, 보조기층 완료) □ 향후계획 ○ 묘역확장공사 : 절개지 보호식생, L형 측구, 아스콘포장('14년 4월) ○ 봉안당 확충 : 5,000기, 660㎡ 규모 봉안당 건물신축(1,159백만원) - 실시설계완료 : 2014. 4. 12. - 착공예정일 : 2014. 6. 2.(절대공기 150일)