정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

①사업부서	안전건설과	②담당자 (연락처)	하천부서 오현웅 (330-2498)
③정책사업명	평창강 생태하천 조성사업
④선정기준	30억 이상의 예산 건설사업	⑤사업기간	2013.1~2017.12
⑥주요내용	ㅇ사업목적 □평창읍 시가지를 감싸 안고 흐르는 평창강 하천 공간을 치수 및 이수기본으로 하천의 생태,문화,환경등을 종합적으로 고려한 생태하천조성, 하천과 주민이 친화되는 명품하천으로 정비하고자 함. ㅇ사업계획 □위 치 : 평창군 평창읍 후평리 ~ 종부리 일원 □사 업 량 : 생태하천조성 L=9.3km □사업기간 : 2013. 1. ~ 2014. 12. □총사업비 : 16,900백만원 (국비 10,140, 군비 6,760) ㅇ추진상황(계획) □ 평창강 하천기본계획 수립 : 2008. 05월 (강원도) □ 생태하천조성사업 Master Plan수립 반영: ‘09. 12월 (국토해양부) □ 지방하천정비사업 종합계획 반영 : 2011. 06월(국토해양부) □ 2013년 지방하천정비사업 생태하천 신규지구 예산확정 : 2012. 10월(강원도) □ 2013년 지방하천정비사업 교부금 세사업 확정: ‘13. 02월(강원도) □ 실시설계용역 발주 및 착수 : 2013. 3. 28 □ 현장조사 및 일반현황조사에 따른 착수보고 실시 : 2013. 4. 26 □ 사업대상지 세부설계를 위한 현황측량 완료 : 2013. 6. 15 □ 용역 1차보고 실시 : 2013. 7. 3 □ 타 시군구 생태하천 조성지 및 가동보 견학실시(2회) : 2013. 7월 ~8월 □ 구간별 세부 공법 선정 : 교량, 가동보, 호안공, 식재공 등 □ 용역 중간보고 실시 : 2013. 10. 21. □ 주민설명회 실시 : 2013. 10. 30 □ 소규모환경영향 평가용역 착수 : 2013. 11. 28 □ 설계 VE 착수 : 2013.12. 2 □ 강원도 건설기술심의 : 2014. 2월중(도일정 준수) □ 실시설계용역 준공 : 2014. 3월말 □ 본격공사 추진 : 2014. 3월말~ 4월초