정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

①사업부서	문화관광과	②담당자 (연락처)	문화예술부서 황재국 (330-2714)
③정책사업명	전통민속 상설공연장 건립공사
④선정기준	30억 이상 예산 건설사업	⑤사업기간	2013년~2016년
⑥주요내용	□ 사업개요 ○ 사 업 명 : 전통민속 상설공연장 건립공사 ○ 위 치 : 평창군 용평면 장평리 380-2 ○ 사업기간 : 2013. 6월 ~ 2016. 5월 (4년) ○ 사 업 량 : 공연장[지상3층 1동 연면적 1,584㎡(480평)] - 부대시설: 장터 및 민속체험장 [지상1층 1동 790㎡(240평)] ○ 사 업 비 : 4,500백만원 (국비 1,800 + 도비 540 + 군비 2,160) □ 추진상황 ○ 2013. 06. 25일 : 공유재산관리계획 승인 (대체부지) ○ 2013. 07. 01일 ~ 2014. 04. 25일 : 사업관련용역(4건) 추진 중 - 장평(취락지구) 지구단위계획 변경 용역 - 전통민속 상설공연장 설계용역 (건축분야) - 전통민속 상설공연장 설계용역 (전기, 소방, 통신분야) - 지구단위계획 변경을 위한 환경성검토 용역 ○ 2014. 01. 07일 : 지구단위계획 변경용역 등 관련용역 일시중지 - 주민의견 수렴에 따른 계획(안) 확정 지연 등 ○ 2014. 01. 08일 : 상설공연장 대체 편입부지 감정평가 실시 ○ 2014. 02. 12일 : 편입부지 소유권이전 및 보상금 지급 □ 향후계획 ○ 2014.10월 건축공사 착공 ○ 2016.10월 공사준공, 공연장 및 작은 영화관 개관