정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

①사업부서	문화관광과	②담당자 (연락처)	문화예술부서 황재국 (330-2714)
③정책사업명	오대산 자연명상마을 조성공사
④선정기준	30억 이상 예산 건설사업	⑤사업기간	2013년~2016년
⑥주요내용	□ 사업개요 ○ 공 사 명 : 오대산 자연명상마을 조성공사 ○ 위 치 : 평창군 진부면 동산리 24번지 일원 ○ 사업기간 : 2013. 5월 ~ 2016. 12월 (4년) ○ 사 업 량 : 명상마을 조성 170,000㎡ (51,000평) - 건 축 물 : 명상센터 등 총 20동 건축 (건축연면적: 10,670㎡(3,200평)) ○ 사 업 비 : 29,525백만원 (국비 14,762 + 도비 4,429 + 군비 10,334) □ 추진상황 ○ 2012. 03월 : 오대산 자연명상마을 조성 추진계획수립 ○ 2013. 03. 25일 : 추진방향설정 관계자회의(월정사, 도시계획부서, 전문가 등) ○ 2013. 06. 10일 ~ 2014. 06. 09일 : 사업관련용역(2건) 추진 중 - 군관리계획(오대산 자연명상지구) 결정 용역 - 군관리계획결정에 따른 전략환경영향평가 용역 ○ 2013. 08. 23일 : 기본구상 용역 준공 ○ 2013. 11. 22일 : 향후 시설물운영 원가계산 용역 ○ 2013. 11. 28일 : 사업추진방향 변경관련 군정조정위원회 심의 ○ 2013. 12. 06일 : 민간자본보조 사업시행자 선정(조계종 제4교구본사 월정사) - 2013년 제3회 추가경정예산 과목정정(민간자본보조금) ○ 2014. 02. 24일 : 건축 및 기반시설 실시설계용역 착수(절대공기: 300일) ○ 2014. 03. 07일 : 부지정비공사(오대산호텔 철거) 착공(절대공기: 100일) □ 향후계획 ○ 기초토목공사 및 건축 착공 : 2014. 12월 중