정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

①사업부서

경제체육과

②담당자

(연락처)

체육시설부서 이왕재

(330-2723)

③정책사업명

대관령 전지훈련장 조성

④선정기준

30억이상 예산 건설사업

⑤사업기간

'08. 1월~'14. 7월

⑥주요내용

□ 사업개요

○ 기  간 : 2008. 1월～2014. 7월

○ 위  치 : 대관령면 횡계리 일원

○ 사업규모 : 부지 49,928㎡, 건축연면적 1,787㎡, 체육시설면적 20,000㎡

○ 시설내용 : 축구장 1면 7,140㎡(105×68m), 인조잔디구장 1면 7,140㎡

(105×68m), 트랙1식 400m(8레인), 트레이닝센터

1동 1,787㎡ 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,457백만원(국 2,500, 도 1,430, 군 14,527)

○ 지금까지 집행액 : 16,092백만원(연도별, 재원별 등)

구분	‘13년까지 예산	‘14년 예산	총예산	총지출액	(집행잔액)
계	18,400	57	18,457	16,092	2,365
국비	2,500	0	2,500	1,987	513
도비	1,430	0	1,430	1,046	384
군비	14,470	57	14,527	13,059	1,468

(단위 : 백만원)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 토목공사 준공 : 2011. 5월

○ 건축공사(트레이닝 센터 1동) 제외한 모든 공정 완료 : 공정율 85%

○ 사업부지 내 2018 동계올림픽 개폐회식장 조성 계획에        따라 이전부지(횡계리 22번지 외 2필지) 확정 : 2013. 4월

○ 설계변경 및 재착공 : 2013. 9. 16일

○ 준공(예정일) : 2014. 9. 07일

□ 향후계획

○ ‘14. 9월까지 완료할 계획임.