제 안 요 청 서

공사명 : 농산물 우수관리시설 인증취득지원(대화농협 유통센터 저온저장고) 보수 공사

2015. 04.30.

대화농업협동조합장

목      차

Ⅰ.  공사개요………………………………………… 1

1. 공사배경 및 목적

2. 공사개요

Ⅱ. 계약방법 및 입찰개요 …………………………… 2

1. 계약방법

2. 참가자격

3. 참가일정 및 구비서류

Ⅲ. 제안 요청사항  …………………………………… 3

1. 공사에 대한 계획 및 기술

2. 일반 요청사항

3. 과업 세부 내용

4. 제안서 작성지침

5. 제안서 형식 및 제출부수

6. 유의사항

Ⅳ. 제안서 평가기준 및 방법…………………………14

1. 제안서 심사

2. 제안서 평가기준 및 방법

3. 계약체결

4. 기타

Ⅴ. 서식 등 …………………………………………… 21

1. 입찰유의서

2. 공사계약일반조건

3. 서 식

Ⅰ. 공사개요

1. 공사배경 및 목적

○ 농산물산지유통센터(APC)의 일부시설 개선을 통하여 농산물우수관리(GAP)시설 인증을 취득 함으로 대화농협 농산물의 품위유지

2. 공사개요

○ 공 사 명  : 대화농협 유통센터 저온저장고 보수 공사

○ 현장위치 :  강원도 평창군 대화면 대화리826-1.2.4.7.8.827-3.1785-5

○ 공사내용 :   저온저장고 보수 공사

○ 건축면적 : 저온저장고 보수공사 694 ㎡(7동)

☞ 현장을 방문 하여 공사 대상 저온저장고를 필히 확인 하여

설계를 진행 하여 주시기 바랍니다

○ 완료조건 : 시운전 후 인수 인계

○ 추정 가격 :  300,000,000  원 (V.A.T 포함금액)

○ 사업기간 : 착공일로부터 30일

Ⅱ. 계약방법 및 입찰개요

1. 계약방법 : 제한경쟁입찰

○ 지방계약법 시행령 제43조에 의한 「협상에 의한 계약체결」

○ 행정안전부 회계예규「협상에 의한 계약체결 기준」준용

2. 참가자격

가. 입찰공고일 현재 부도, 화의, 워크아웃, 법정관리 중에 있는 업체와

정부 , 지방자치단체, 정부투자기관, 농·축협 금융기관 등으로부터

부정당업자로 규제된 업체는 입찰에 참가할 수 없음.

나. 입찰은 대표자 혹은 대표자로부터 위임받은 대리인(위임장 및 재직

증명서 제출)도 참가 할 수 있음.

다.  건설산업기본법에 의한 기계설비공사업 등록업체로서 공조냉동기계 자격증

(산업기사 이상)을 보유한 업체 로서 입찰공고일 전일부터 계약체결일까지 주된

영업소의 소재지를 계속 강원도에 둔 업체이어야 합니다(지사제외)

라. 입찰공고일 기준 최근 3년 이내에 정부 및 지방자치단체, 공공기관

(공공기관 운영에 관한 법률에서 정하는 기관)농․축협에서 발주한

저온저장고 공사실적 삼억 이상의 단일공사 준공실적을 보유한 업체

3. 참가일정 및 구비서류

가. 입찰공고 : 2015년 04월 30일

나. 현장설명

○ 별도의 현장설명은 실시하지 않으나 현장을 방문하여 대상

저온저장고에 대하여 필히 확인하고 설계를 진행 하여 주시기 바랍니다

○ 과업내용에 대한 지침은 본 제안요청서에 의하며, 기타 궁금한 사항은

대화농협 총무계로 문의 바람.

다. 참가등록 및 제안서 제출

○ 접수기간 : 2015년 05월  11일( 월 ) 17:00까지(공고문에 의함)

○ 접수장소 및 서류 : 입찰공고문 참조

※ 제안서 작성에 대한 문의 : 대화농협 총무계  (☏ 033-333-2720)

라. ○ 제안서 설명순서 및 방법

- 설명순서 : 당일 추첨에 의함

- 참가자격 : 입찰참가신청서 상의 대리인을 포함한 3인 이하의 소속 임직원(입찰참가신성서 상의 신고된 임직원만 가능하며, 대리인외의 자가 참가 시에는 대표이사를 제외한 인원은 위임장 및 재직증명서 제출 시에만 허용)에 한하여 입장가능,

- 진행방법 : 제안서 설명발표 20분 이내, 질의답변 10분 내외

(필요 시  빔프로젝트를 이용한 프리젠테이션 설명 가능)

: 발표 시 추가자료는 배포할 수 없으며, 평가위원의 개별 평가점수는 공개하지 아니함

○ 일시 : 2015년 05월 13 일 ( 수 ) 13:00

( 일시 변경 시에는 조정 하여 별도로 통보 )

○ 장소 : 대화농협 회의실

Ⅲ. 제안 요청사항

1. 공사에 대한 계획 및 기술

- 공사 품질에 대한 차별화 방안

- 기존 유통센타와 유기적인 공사 적용 계획

- 공사계획 방안

- 저온저장고 보수 공사에 대한 실시설계도

※ 제안서는 추정가격 범위내에서 모든 제안이 가능함

2. 일반 요청사항

가 . 장비 및 재료

1) 공사에 사용되는 재료는 신품이어야 하며, 설계서에 기재된 제품이거나

이와 동등품 이상으로 한다.

2) 한국 공업 규격에 제정되어 있는 것은 K.S 인증 제품을 사용한다.

3) 시공에 사용되는 재료는 사전 감독자의 검사를 필 하여야 하며 불합격

품은 즉시 현장 외부로 반출하여야 하며 재사용 할 수 없다.

나. 동력사용

본 시공에 있어 사용되는 전력, 연료 및 용수에 대하여는 시공자 부담

으로 한다.

다. 현장관리

1) 현장내에 반입된 자재, 기기, 공구류는 도급자측에서  관리해야

하며, 현장업무에 지장을 초래해서는 안 된다.  부득이한 경우는

감독자와 협의하여 지시에 따른다.

2) 안전, 환경, 위생, 화재예방, 정리정돈, 공해방지 등 현장 관리상

필요사항은 감독자의 지시나  현장의 수칙을 준수해야 한다.

라. 준공처리

준공은 준공검사 및 시설운영에 필요한 자료를 완전히 인계,인수

한 시점으로 한다.

마. 검사 및 보증

1) 각종공사의 시험검사는  감독자의 입회 하에 실시한다.

2) 본 공사의 설치 완료 후 사용자의 고의적 또는 취급

부주의에 의한 사고를 제외하고는 사업수행자 측에서 공사에 들어간

각종물품을 교환하여 정상적인 운영이 가능하도록 한다.

3. 과업 세부 내용

가. 냉동기 및 관련장비

1) 일반사항

○ 설비의 최적화와 에너지 절감을 위하여 절전형과 기계의 안전성(전동기과열방지 시스템 등)을 겸비한 검증 제품으로 제안한다.

○ 운전비 절감과 고장 시 저장상품의 손상을 최소화 할 수 있는 장비를 채택하도록 한다.

○ 콘덴서와 유닛쿨러는 압축기 능력에 맞게 충분한 전열면적 등 냉동능럭을 갖추도록 설계한다.

2) 콘덴싱유니트(실외기)

(1) 압 축 기

- 스크롤 압축기 또는 반밀폐 왕복동식(수입외산품 동등이상) 압축기, 스크류나 동등품 이상을 사용한다.(수입 완제품일 경우 시리얼넘버가 기재된 수입면장과 냉동공조협회의 각인 탁본을 첨부)

- 압축기에는 방진장치를 장착하여 소음, 진동을 방지하여야 한다.

- 윤활방식은 OIL PUMP에 의해서 윤활이 된다.

- 윤활유는 SUNISO-3GS 또는 동등 이상품을 사용한다.

- 콤프레샤의 방진은 방진스프링이나 고무로 처리되어야 하며 수평도 ±5MM 이내로 조정 설치한다.

(2) 응축기(콘덴서)

- 순도 99.5%이상의 순도를 가진 인탈산 동관을 사용하며 알루미늄 FIN 0.15T의 것을 사용한다.

- 양호하고 품질이 균일하여 사용상 유해한 결함이 없어야 한다.

- U-PIPE 및 U-BAND는 이음매 없는 동관을 사용하며 품질이 균일하여야 한다.

- CONDENSER는 SPLIT PLATE FIN TYPE 으로 COPPER TUBE 두께 0.8MM, 알미늄 FIN 두께0.15MM 와 알미늄 FIN 간격 2.1~2.5MM로 제작되어야 한다.

- 겨울철에 과냉을 방지하기 위하여 고압측 냉매의 압력에 의한 FAN MOTOR의 ON-OFF 제어가 가능하여야 한다.

(3) 기타

- 냉매의 정화 및 수분 제거를 위하여 드라이어를 설치한다.

- 육안으로 냉매의 청결상태를 분별할 수 있도록 SIGHT GLASS를 설치한다.

- 압축기 토출구에 OIL이 관내로 투입되는 현상을 최대한 방지하기 위하여 OIL SEPRATOR를 설치하여 압축기오일이 정상으로 유지토록 하여야 한다.

- ACCUMULATOR를 저압부에 설치하여 액 냉매가 압축기로 들어와 LIQUID HAMMER 현상이 일어나는 것을 방지한다.

- 수액기를 설치하여 액 냉매를 저장하며 화재나 기타 과열될 경우 안전을 위하여 가용전을  설치 한다.

- 배관 공간을 두고 설치하되 가능한 최소정비 공간을 확보하여야한다.

- 고압, 저압 및 유압의 상태를 확인할 수 있도록 게이지를 설치하여야 한다.

- 왕복동식 반밀폐형에는 고압, 저압 및 유압 스위치를 설치한다.

3) 유니트쿨러

(1) 유니트쿨러의 구성품

- 유니트쿨러는 휀 모타 및 COOLING COIL, FRAME, DRAIN PAN 으로 구성된다.

- 프로펠러휀 TYPE 유니트쿨러로 한다.

(2) FAN MOTOR- 증발기는 강제 송풍식으로 FAN MOTOR는 절연 밀폐형(내한성)으로 제작 되어야 한다.

(3) COOLING COIL

- 순도 99.5%이상의 순도를 가진 인탈산 동관을 사용하며 알루미늄 PLATE FIN 의 것을 사용한다.

- 양호하고 품질이 균일하여 사용상 유해한 결함이 없어야 한다.

- U-PIPE 및 U - BAND는 이음매 없는 동관을 사용하며 품질이 균일하여야 한다.

- FIN PITCH는  6.0MM의 것을 사용한다.

(4) 제상방식

- 전기 제상방식으로 한다.

(5)유니트쿨러의 설치

- 저온저장고 천정판넬의 상부 면에 STEEL 앵글로서 FRAME을 제작 설치하여 유니트쿨러와 볼트로서 고정 하며 FRAME은 건축물 천정 구조물에 1/4"이상의 와이어로서 행거링을 한다.

- 유니트쿨러와 천정판넬이 닿는 면에는 방진고무를 끼운 후 볼트 체결한다.

4)자동제어반 : 냉동기 장치를 제어한다.

(1) MAIN CONTROL PANEL

- 재질 : 냉연압연강판 + 분체도장

- 내부에 PLC 부착

- TOUCH PANEL 10.4" 부착

- 해당되는 실의 온도제어 및 경보, 운전상태 확인

- 장비에 동력을 공급하는 주 제어반

- 냉동기 이상 발생 경보가 울릴 때 전화로도 신호를 보내는 전화 호출장치를 설치한다.(국선전화 회선은 발주자측 공급)

(2) 로컬 콘트롤 판넬(콘덴싱유니트에 내장)

- 수량 : 콘덴싱 유니트에 각 1SET씩 내장

(3) 주유 부품

- N.F.B, MAGBETIC S/W(OCR 부착) LAMP, S/W, 진상용 콘덴셔, 보조 릴레이, P.L.C TOUCH PANEL

(4) 안전, 보호장치

- 과전류 계전기 : 이상 과전류가 흐를 때 1~4초 이내에 동작하여 모터보호

- 차단기 : 회로에 과전류 발생 시 회로차단

- 고압S/W, 유압S/W : 냉매측 고압이상 및 유압이상 시 경보발생 및 냉동기 운전 정지

나. 배관설비

1) 부품 및 기기

(1) 팽창변은 응축기와 증발기 사이에 설치하며 냉매를 교축하는 작용을 하고 배관의 과열도를 감지하여 냉매흐름을 제어하는 외부 규압형을 사용한다.

(2) 냉매 배관에는 PUMP DOWN CYCLE이 되도록 SOLENOID VALVE를 설치한다.

(3) 사용 냉매는 가급적 친환경 냉매를 사용한다.

2) 냉매배관

(1) 냉매 배관 시 용접은 산소, 아세치렌 용접으로 하되 동배관 접합부는 충분한 강도가 유지되고 누설이  없도록 은납을 사용하여야 하고 작업온도에서 완벽한 접합이 이루도록 한다.

(2) 관의 지지는 설비 일반 배관 시방의 동배관 지지간격을 유지 설치하여야 한다.

(3) 아티론 보온재(두께 30MM)를 사용하며 매직테이프로 마감을 하고 옥외 노출배관은 외부에 칼라강판 마감을 한다.

(4) 냉매배관의 내압시험은 고압부 2.9MPa 이상 저압부 배관은 1.96MPa 이상의 질소 압력에서 실시하여 누설, 변형 등이 없어야 한다.

(5) 각종 COIL, U, ELBOW 는 이음매 없는 동관 “L” TYPE을 사용하며 휘어지지 않고 품질이 균일하여야 한다.

(6) 표준 CYCLE에서 액관 및 저압관의 냉매의 흐름이 원할 하도록 배관 작업 시 곡선부를 최소로 한다.

(7) 냉매배관은 동관 “L" TYPE을 사용하고 용접부위는 BRUSHING 후 용접을 하며 용접봉은 은납을 사용하며 누설이나 부식이 없도록 용접하며 반드시 1/200~1/250이하의 구배를 주어 냉동오일의 흐름이 용이하도록 한다.

(8) 냉동설비의 재료는 냉매 또는 윤활유 등에 의한 화학작용으로 인하여 약화되지 아니한 재질로 한다.

(9) 냉동설비의 재료, 구조 및 안전장치의 규격은 당 설비의 위해방지 상 지장이 없는 안전성을 확보한다.

(10) 냉매설비는 진동에 의해 냉매가스가 누설할 우려가 있는 부분에 대하여 후렉시블관이나 방진장치 등을 설치한다.

(11) 냉매설비의 돌출부 등 충격에 의해 쉽게 파손되어 냉매가스가 누설될 우려가 있는 부분에 대하여는 적절한 보호조치를 한다.

(12) 냉매설비의 외면의 부식에 의하여 냉매가스가 누설될 우려가 있는 부분에 대하여는 부식방지를 위한 조치를 취한다.

(13) 냉매배관의 압력시험은 다음과 같다.

구 분	기밀시험 (MPa)	누설시험 (MPa)
고압부	2이상	1.6이상
저압부	1.5이상	0.8이상

3)가습기배관

(1) 가습기 배관은 동관을 사용한다.

(2) 용접은 산소, 아세틸렌 용접으로 하되, 동배관 접합부는 충분한 강도가 유지되고 누설이 없도록 은납을 사용하여야 하고, 작업온도에서 완벽한 접합이 이루어지도록 한다.

(3) 가습기 급수배관 동파방지를 위해 정온전선으로 감싸서 시공한다.

(4) 아티론 보온재를 사용하며 보온두께는 30mm이상으로 한다.

4) 드레인 배관

(1) 드레인 배관은 스텐렌스관을 사용한다.

(2) 아티론 보온재를 사용하며 보온두께는 30MM이상으로 한다.

5) 시운전 및 압력테스트

(1) 배관공사가 완료되면 다음과 같은 압력에서 누설시험을 한다.

- 고압부:2MPa, 저압부:1.5MPa (24시간 방치)이때 압력 TEST는 반드시 질소를 사용한다.

(2) 진공시험은 관내의 수분을 완전히 제거한 후 진공을 760㎜Hg까지 만들어 관내 밀폐된 상태에서 24시간 방치하여 압력상승이 5mmHg이하일 때 완료 된 것으로 한다.

(3) 냉매배관 압력 TEST는 이상의 시험을 거친 후 감독관의 승인을 득하여야 준공으로 간주한다.

다. 방열문

1)개요

(1) 방열문은 지게차가 물품을 적재한 상태에서 출입을 하는데 불편함이 없는 정도의 크기로 한다.

(2) 단열성능이 충분한 단열재 및 두께로 제작한다.

(3) 출입에 불편함이 없는 모타구동장치의 방열문을 설치한다.

(4) 방열문이 닫힌 경우 완벽하게 냉기누출이 없는 패킹구조를 갖추어야 한다.

2) 방열문의 재질 및 제작방법

(1) 방열문의 외부 표면재 재질은 STS 304 T0.8MM를 사용한다.

(2) 방열문의 후레임은 알루미늄 사용하며 휨이 없어야 한다.

(3) 방열문 내부에 충진되는 단열재는 경질폴리우레탄을 사용한다.

(4) 방열문에 사용되는 나사못 또는 피스의 사용은 내부구조물을 제외한 부분은 STAINELESS  재질의 것을 사용한다.

(5) RUBBER PACKING류는 각 부위별 용도에  적정한 규격을 사용하되 외부와 접합되는 부위는 수리 및 교체가 용이한 구조로 제작한다.

(6) 전동슬라이딩도아의 모터는 반드시 감속GEAR MOTOR를 사용하며 전자BRAKE장치가 있어야 한다.

(7) 환기도어

- 환기문의 외부재질 및 내부의 단열재는 전동슬라이딩도어와 동일한 재질로 한다.

- 사람이 지면에 서있는 상태에서 환기문을 여닫을 수 있는 도어록레버를 지면에서 1.5m 이내에 설치하며 레버와 환기문은 아연도 PIPE로서 연결한다.

- 레버에 의하여 환기문이 열리면 리미트스위치가 작동하여 환기휀이 자동으로 운전하고, 환기문을 닫으면 자동으로 정지해야 한다.

라. 에어커텐

1) 설치목적 : 방열문을 열었을 때 저온저장고 내부의 냉기가 외부로 유출되는 것을 차단한다.

2) 재질 및 기능

- AIR CURTAIN의 케이스는 소부도장 STEEL이나 플라스틱 재질을 사용한다.

- 전동기에 의해서 가동되는 양단의 다익송풍를 부착한 구조이다.

- FAN의 재질은 플라스틱을 사용하고 작동 시 PIN이 이탈되지 않도록 밀봉하고 좌, 우의 FAN균형을 동일하게 하여 정숙한 운전이 되도록 한다.

- AIR CURTAIN 의 토출구에는 디퓨져를 설치하여 풍향을 조절할 수 있게 한다.

- 토출구에서 풍속은 13M/SEC 이상이어야 하며 토출구로부터 4M지점에서 1M/SEC 이상이어야 한다.

- AIR CURTAIN의 설치 및 고장 수리 시 용이하게 작업할 수 있도록  고정판을 부착하여야하며 설치판의 재질은 STEEL 1MM 이상으로  쉽게 부식이 되지 않는 아연도 철판에 방청도색 되어야 한다.

- 전동기의 기동 시 FAN의 충격 및 진동을 흡수할 수 있도록 전동기의 축과 FAN의 연결 부위에 방진고무를 사용한다.

마. 단열공사

1) 공인기관의 품질인증을 받은 냉장창고용 경질 폴리우레탄을 사용한다.

(산업표준심의회 KSM3809호 기준 : 밀도35KG/㎥이상

열전도율 0.018kcal/h·m·℃이하)

2) 금속 단열 복합판넬 : 샌드위치 구조로서 내심재는 경질 폴리우레탄 이고, 양면을 철판(0.5MM이상으로서 코팅제품)으로 마감한 구조를 택한다.

3) 판넬과 판넬의 연결부위는 브림 또는 화스너타입으로 접합부 체결율이 완벽하고 단열이 우수한 제품을 사용한다.

4) 우레탄 발포현장시공 : 시공 시 화재예방 및 곰팡이 서식, 먼지착상 등이 없도록 코팅처리 등을 실시한다.(GAP기준 충족)

5) 단열재와 단열재 사이의 빈틈이 없이 저장고 내를 완전히 감쌀 수 있도록 시공한다.

(* 판넬접합, 우레탄발포 등에 사용되는 시공방법,자재,규격 등을 상세하게 명기하고 시공도면을 작성)

6) 지역적인 특성을 충분히 고려하여 설계에 반영한다.

바. 기타

1) BASE FRAME

(1) 콘덴싱유니트는 기초 콘크리트 위에 설치한다.

(2) BASE는 최대한 수평상태가 되도록 한다.(평도 ±10MM이내)

2) 페인트작업

(1) 금속류는 유성조합 폐인트를 칠하며 KS 2급품을 사용한다.

(2) 페인트를 칠하기 전에 대상물의 습기, 먼지, 기름 등을 완전히 제거한다.

(3) 희석재는 반드시 용도에 적합한 것을 사용한다.

(4) 페인트의 색상은 발주자 지정하는 색으로 한다.

3) 센서 감시 및 조작범위

(1) 각 실의 온도 및 습도 센서 설치(온도센서 PT100Ω×3EA, 습도계 1EA 이상설치, 센서는 가급적 NTC 서미스터 5KΩ이상을 사용)

(2) 정전이나 고장 시 저장고 온·습도, 작동상태 등을 무선 원격 모니터링할 수 있는 시스템 채용 권장

4. 제안서 작성지침

가. 제안서의 구성

❍ 심사제안서, 사업제안서, 입찰가격제안서(입찰서)

❍ 제안서(심사제안서, 사업제안서)별로 제본제출

❍ 제안서 작성시 (심사제안서, 사업제안서)

- 제안서의 각 페이지는 페이지 하단 중앙에 일련번호(1,2,3)를 붙여야 함.

- 표기는 한글과 아라비아 숫자를 원칙으로 하되, 필요시 한문 및 영문은 괄호 안에 넣어 표기할 수 있다.

❍ 실시 설계서

나. 심사제안서 평가관련 서류작성요령

<표지> .............................................................................................<붙임4>

<작성목차 및 내용> .....................................................................<붙임4-1>

<작성목록 및 지침>

❍ 일반기준 : 제출되는 내용중 사본은 원본대조필을 요함

❍ 회사의 일반현황 ........................................................................<붙임4-2>

❍ 기술인력 보유 현황 ................................................................ <붙임4-3>

- 공고일 이전 입사한 자로 본 사업에 참여할 기술자만 작성

- 기술인력 등급 구분기준 ...................................................... <붙임4-3-1>

❍ 수행경험(실적)집계표 ...............................................................<붙임4-4>

- 유사용역 및 공사수행 실적은 공고일 기준 최근 3년 이내(준공일 기준)

준공실적에 한하며, ‘평가기준’에 따라 평가됨

- 이행실적확인서(해당기관의 확인을 받아 제출).................<붙임4-4-1>

❍ 회사의 경영상태 등............................................................ <해당서식>

- 신용평가등급 확인서

- 최근 3년간 회사(수급자)가 관계법령에 의해 입찰참가 제한 처분 또는

영업정지 처분된 사항을 반드시 제출해야 하며 추후 미기재 사실의 확인 시는 평가에서 제외 조치됨.

※ 공통사항 : 해당사항이 없는 업체도 별도 “해당 없음” 사실을 제출하여야 함

다. 사업제안서 ..............................................................................<붙임5>

※ 작성시 포함될 내용

❍ 실시설계서

❍ 공사수행 체계 및 방법

❍ 수행기관의 장점 및 유사 공사실적 소개

❍ 업체 자체 인력확보 현황 및 본 공사 투입 계획

❍ 공사추진 세부일정

❍ 준공 후 사후관리 계획(기계운영자 교육.A/S...신기술 제공 등)

❍ 냉동냉장설비 시스템 공사 개요

- 기본 설계기준, 목적, 제작설치방향, 성능보증, 차별화 방안 등

❍ 유통센터 냉동냉장설비계획

- 공정 계획

- 기기 배치계획

- 각 장비 사양 및 특징

- 안정성 및 품질계획

- 냉장설비 제어 및 소프트웨어 구성

❍ 기타 필요사항

라. 입찰가격제안서 ........................................................................<붙임6>

❍ 입찰가격명세표와 함께 밀봉하여 제출

❍ 원가계산서 및 공종별내역서........................별도 파일

5. 제안서 형식 및 제출부수

가. 제안서 형식

❍ 제안서는 A4용지 크기에 50페이지 이내로 좌철

❍ 모든 페이지는 페이지 번호부여

나. 제안서 제출부수

❍ 심사제안서 (수행능력평가용) 2부.

❍ 사업제안서 (사업계획평가용) 10부, CD 또는 USB 1개.

❍ 입찰가격제안서 1부.(밀봉제출)

❍ 실시 설계서 2부

6. 유의사항

❍ 제출된 제안서의 기재내용은 특별한 사유가 없는 한 수정, 삭제 및 대체할

수 없으며 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주

❍ 제안서 내용은 명확한 용어를 사용하여야 하며, ‘~를 제공할 수 있다.’,

‘~이 가능하다.’, ‘~을 고려하고 있다.’ 등과 같은 모호한 표현은 제안서

평가 시 불가능한 것으로 간주함.

❍ 제출된 서류중 내용이 허위임이 발견되거나 서류작성이 현저히 부실하여

객관적인 평가가 어렵다고 판단될 경우(증빙서류가 2종 이상 미비할 경우

등)에는 평가에서 제외됨

❍ 증빙자료 요구항목에 대하여는 발주기관, 관계기관 또는 협회에서 증명, 확인(입증)하는 증빙자료를 첨부하여야 하며, 증빙자료가 첨부되지 아니한 것은 무효처리하고 추가 증빙자료의 제출은 인정하지 않음을 원칙으로

함.

❍ 제안서 및 제출서류의 중요한 기재사항이 허위이거나 불일치한 경우에는

입찰자격을 무효로 처리하고 계약을 해지할 수 있음.

❍ 기술인력 보유현황(투입계획)에 기재된 기술자는 원칙적으로 사업 수행에 참여하여야 하며 단, 퇴직․질병 등의 사유로 부득이 구성원을 변경할 경우에는 미리 서면으로 발주기관의 승인을 얻어 당초 구성원과 동등하거나 그 이상

의 자격, 경력을 가진 자를 배치하여야 함

❍ 제안서 작성․제출 시에는 반드시 대화농협이 지정한 작성순서(서식순)에 의거 철하여 제출

❍ 제안서는 제출요구 시한 내에 접수된 것만 유효

❍ 제안서는 성실과 신의의 원칙에 의하여 작성하여야 하며 만약 기재사항이 잘못 또는 허위기재 사실이 발견될 시는 본 사업 참가자격을 상실하게 되

며 이에 대하여 이의를 제기할 수 없음

❍ 대화농협이 필요시 입찰참가자에 대하여 추가제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력이 있음

❍ 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 서류작성에 소요된 비용은 지급하지 아니 함

Ⅳ. 제안서 평가기준 및 방법

1. 제안서 심사

❍ 심사위원회 구성･운영

- 심사(평가)위원회의 구성 및 운영은 대화농협에서 내부기준에 따름

- 심사위원의 명단은 공정한 심사를 위해 공개하지 아니함.

2. 제안서 평가기준 및 방법

가. 제안서 평가기준

❍ 제안서의 평가는 종합평가(기술능력평가 점수 + 입찰가격평가 점수)로 하고

객관성을 유지한다.

❍ 평가비중은 기술능력평가 80%, 제안(입찰)가격평가 20%로 한다.

나. 제안서의 평가항목

구 분		평가항목	비고
기술능력 평 가 (80%)	수행능력평가 (20점)	▪기술인력 보유상태 ▪수행경험(실적) ▪경영상태 등	▪계약담당자가 평가
	사업계획평가 (60점)	▪기술·지식능력 ▪공사수행계획 ▪지원기술·사후관리	▪심사(평가)위원이 평가
입찰가격 평가 (20%)			※평점산식 : 아래

❍ 평가항목 및 배점

구 분	평 가 항 목			배점	비 고
기술능력 평가 (80점)	수행능력 (20)	기술인력 보유현황	◦관련 기술인력 확보 및 경력	5	객관적 지표
		경영상태	◦신용평가등급	5
		수행경험 (실적)	◦최근 3년간 실적 누계 (금액)	10
	기술지식능력 (30)		◦재료의 내구성 및 공사품질 전반	15	주관적 평가 (심사위원평가)
			◦기존 대화농협 유통센타 와 유기적인 공사 적용 (설계,기본계획 구성의 적합성)	15
	공사수행계획 (15)		◦공사수행계획 방안 적정성	15
	지원기술 사후관리 (15)		◦유지보수, 사후관리 방안의 적정성	15
제안(입찰)가격평가 (20점)			◦협상에 의한 계약체결기준 적용	20	평점산식 에 의함
합 계				100

나. 제안서 평가방법

1) 기술능력평가(80점)

가) 수행능력 평가(20점)

❍ 수행능력 평가는 심사제안서에 기재된 기술인력보유현황 , 수행경험(실적),

경영상태(신용평가등급) 등 각 평가항목별 평가기준 및 배점에 따라 평가함.

❍ 기술인력 보유 현황(당해사업 참여기술자에 한함)

평가항목	평가요소	배점한도	등 급		배점
해당분야 관련 기술인력 보유능력	기술인력 보유정도 평가 참여기술자	5	특급기술자	1인	1.0점
			고급기술자	1인	0.8점
			중급기술자	1인	0.6점
			초급기술자	1인	0.4점

주)  5점을 초과할 경우에도 5점으로 배점

※ 해당분야: 저온저장고 기술인력으로 한정

* 기술인력 등급기준(엔지니어링사업대가의 기준 지식경제부공고 제2008-109호, 2008.06.3 개정)적용

구 분	기술자격 및 관련업무 수행 기준	학력 및 관련업무 수행 기준
특 급 기술자	기사자격 소지자로 10년이상 산업기사자격 소지자로 13년이상	박사학위 소지자로 3년 이상 석사학위 소지자로 9년 이상 학사학위 소지자로 12년 이상 전문대학 졸업자로 15년 이상
고 급 기술자	기사자격 소지자로 7년이상 10년미만 산업기사자격 소지자로 10년이상 13년미만	박사학위 소지자 석사학위 소지자로 6년이상 9년미만 학사학위 소지자로 9년이상 12년미만 전문대학 졸업자로 12년이상 15년미만 고등학교 졸업자로 15년 이상
중 급 기술자	기사자격 소지자로 4년이상 7년미만 산업기사자격 소지자로 7년이상 10년미만	석사학위 소지자로 3년이상 6년미만 학사학위 소지자로 6년이상 9년미만 전문대학 졸업자로 9년이상 12년미만 고등학교 졸업자로 12년이상 15년미만
초 급 기술자	기사자격 소지자 산업기사자격 소지자	석사학위 소지자 학사학위 소지자 전문대학 졸업자 고등학교 졸업자로 3년 이상

※ 해당협회 기술자경력수첩 사본 (초급, 중급, 고급, 특급)

❍ 수행경험(실적)

- 입찰공고일 기준 최근 3년 이내에 정부 및 지방자치단체, 공공기관

(공공기관 운영에 관한 법률에서 정하는 기관), 농․축협에서  발주한 건축

공사 실적 누계 금액

구 분	배정한도	배점기준		비고
수행실적	10점	삼억 이상	10점	부가세 포함 금액 기준
		삼억 미만 이억 이상	8점
		이억 미만 일억 이상	7점
		일억 미만 오천만 이상	6점
		오천만 미만	5점

주)1. 공동계약으로 이행한 실적은 해당 지분율을 곱하여 기준금액 이상일

경우에만 그 지분금액을 실적으로 인정함

2. II-2(참가자격)에서 요구하는 실적확인 서류를 제출하여야 함

3. 허위 또는 착오로 인하여 사업수행실적을 사실과 다르게 작성하여    제출한 것이 확인될 경우 해당업체는 실격처리 함

❍ 경영상태 등(신용평가 등급)

《 신용평가등급 설명 》

① 신용평가등급은 신용정보의이용및보호에관한법률 제4조 제4항 제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 동 세부기준 제5조의 적용기준일 이전 가장 최근에 평가한 유효기간 내 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급(위의 신용정보업자가 신용평가등급, 등급평가일 및 등급유효기간 등을 명시하여 작성한 ‘신용평가등급 확인서’(이하 ‘등급 확인서’라 함))을 기준으로 평가한다.

② 적격심사대상자의 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 및 기업신용평가에 따른 평점이 다른 경우에는 높은 평점으로 평가하며, ‘등급 확인서’를 제출하지 않은 경우에는 최저등급으로 평가한다.

③ 합병한 업체에 대하여는 합병후 새로운 신용평가등급으로 심사하여야 하며 합병후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상업체 중 가장

낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급으로 심사한다.

회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가등급	점 수
AAA		AAA (회사채에 대한 신용평가등급 AAA에 준하는 등급)	5점
AA+, AA0, AA-	A1	AA+, AA0, AA- (회사채에 대한 신용평가등급 AA+, AA0, AA-에 준하는 등급)
A+	A2+	A+ (회사채에 대한 신용평가등급 A+에 준하는 등급)
A0	A20	A0 (회사채에 대한 신용평가등급 A0에 준하는 등급)	4점
A-	A2-	A- (회사채에 대한 신용평가등급 A-에 준하는 등급)
BBB+	A3+	BBB+ (회사채에 대한 신용평가등급 BBB+에 준하는 등급)
BBB0	A30	BBB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BBB0에 준하는 등급)	3점
BBB-	A3-	BBB- (회사채에 대한 신용평가등급 BBB-에 준하는 등급)
BB+, BB0	B+	BB+, BB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BB+, BB0에 준하는 등급)	2점
BB-	B0	BB- (회사채에 대한 신용평가등급 BB-에 준하는 등급)
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B- (회사채에 대한 신용평가등급 B+, B0, B-에 준하는 등급)	1점
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하 (회사채에 대한 신용평가등급 CCC+에 준하는 등급)

나) 사업계획 평가(60점)

❍ 사업계획 평가는 사업제안서에 대한 심사위원 평가로서

- 최고점수와 최저점수를 준 위원을 제외하고 나머지 위원의 평가점수를   합산하여 산술평균한 점수로 한다.

(단 최고점수와.최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수 만 제외

한다)

- 평균점수 산정결과 소수점이하의 숫자가 있은 경우에는 소수점 셋째

자리에서 반올림한다.

- 각 평가항목별 배점을 기준으로 15점 만점을 기준으로 상대평가 하되

- 평가점수 산출은 [15점(탁월), 12점(우수), 9점(보통), 6점(미흡),

3점(부적정)]로 하여 심사위원의 부분별 점수합계 평균

2) 입찰가격 평가(20점)

【 입찰가격 평점산식 】

❍ 입찰가격이 예정가격의 100분의 80 이상인 경우

평점 = 입찰가격평가 배점한도 x ( 최저입찰가격 / 당해입찰가격 )

❍ 입찰가격이 예정가격의 100분의 80 미만인 경우

평점 = 입찰가격이 예정가격의 100분의 80일 경우의 평점

평점 = 입찰가격이 예정가격의 100분의 80일 경우의 평점＋[2 × (예정가격의 80% 상당가격 - 당해입찰가격)/(예정가격의 80% 상당가격-예정가격의 60% 상당가격) ]

※ 1. 입찰가격이 예정가격의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산

3) 최종점수 산정방법

❍ 기술능력평가(사업계획평가+사업수행능력평가) + 입찰가격평가

3. 계약체결

가. 협상대상 후보자 선정

❍ 제안서 평가결과의 합산점수(기술능력평가점수 + 입찰가격평가 점수)가 70점

이상인 자를 협상적격자로 선정

❍ 협상순서는 협상적격자 중 고득점순에 의하여 결정하되 점수가 동일한

제안자가 2인 이상일 경우에는

- 기술능력평가 점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고,

- 기술능력평가 점수도 동일한 경우에는 추첨에 의한다.

❍ 협상순위에 따라 결정된 협상대상자와 협상을 하며, 협상이 성립된 때에는

다른 협상적격자와 협상을 실시하지 아니함.

❍ 우선협상대상자와 협상이 결렬되면 동일한 기준과 절차에 의해 차순위 협상대상자와의 협상을 실시하고, 이 경우에도 협상이 결렬되면 순차적

으로 차순위 협상대상자와 협상을 실시함.

❍ 제안서 평가결과의 내용과 협상결과 등 세부내용을 공개하지 않으며

제안된 내용은 본 법인이 활용할 수 있음.

나. 협상내용과 범위

❍ 협상대상자가 제안한 이행과업내용, 이행일정, 제안가격 등의 제안서

내용을 대상으로 협상을 실시하며, 협상대상자와의 협상을 통해

그 내용의 일부를 조정할 수 있음.

다. 계약체결 방법

○ 지방계약법 시행령 제43조에 의한 「협상에 의한 계약체결」

○ 행정안전부 회계예규「협상에 의한 계약체결 기준」준용

4. 기타

❍ 본 상세내역에 규정되지 아니한 사항과 이 기준시행에 필요한 사항에

대하여는 세부사항을 따로 정하여 시행할 수 있음.

❍ 본 공사는 청렴계약제 적용대상 공사임. (별첨 3-2호 서식 제출)

【수행능력평가심사제안서제출서류목록】

심사분야	연번	내 용	비 고
총 괄	1 2 3	❍ 심사제안서(표지) ❍ 작성목차 및 내용 ❍ 회사의 일반현황 - 면허증, 허가증, 등록증 사본 - 특허증 사본	<붙임 4> <붙임 4-1> <붙임 4-2> 발행기관 발행기관
기술인력보유 현황	4	❍ 기술인력 보유현황 - 저온저장고설치관련 기술인력 보유현황 자료	<붙임 4-3> 협회 경력수첩 사본 최종학교 졸업증명서, 자격증 및 경력증명서
수행경험 (실적)	5	❍ 수행경험(실적) 집계표 - 공사(준공)수행실적증명서	<붙임 4-4> 발주기관
경영상태 등	6	❍ 신용평가등급확인서	<해당서식> 발행기관

<붙임 1>

입 찰 유 의 서

제1조(목  적) 이 유의서는 대화농협(이하 "발주사무소"라 한다)이 행하는 물품의 제조·구매 및 기타 물품계약에 대한 입찰에 있어 입찰에 참가하고자 하는 자가 유의하여야 할 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 유의서에서 사용하는 용어의 정의는 이 유의서에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 농협의 계약관련 제규정 및 공사계약일반조건(이하 "일반조건"이라 한다)에 정하는 바에 의한다.

제3조(입찰참가신청) ① 입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰공고 또는 입찰참가통지서에 기재된 입찰참가신청마감일까지 다음 각호의 서류를 발주사무소에 제출하여 입찰참가신청을 하여야 한다.

1. 입찰참가신청서(법인 소정서식) 1통

2. 입찰참가자격을 증명하는 서류 1통

3. 인감증명서 1통

4. 기타 공고 또는 통지로 요구하는 서류

② 제1항제2호의 경우에는 원본을 제시하거나 사본에 "원본과 같음"을 명기하고 인감으로 날인하여 제출하여야 한다.

제4조(관계사항의 숙지) 입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰관련 공고사항, 물품구매입찰유의서, 사양설명서, 물품구매계약일반조건, 물품구매계약특수조건등 기타 입찰에 필요한 사항을 입찰전에 완전히 숙지하여야 하며 이를 숙지하지 못한 책임은 입찰참가자에게 있다.

제5조(사양설명) 입찰공고에서 사양설명을 반드시 청취할 것을 요구한 경우에는 사양설명에 참가한 자만이 입찰에 참가할 수 있다.

제6조(입찰보증금) ① 입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰참가신청마감일까지 입찰금액의 100분의 5이상에 상당하는 입찰보증금을 현금 또는 발주사무소가 인정하는 보증서 등으로 발주사무소에 납부하여야 한다.

② 낙찰자가 소정의 기한내에 계약을 체결하지 아니한 때에는 당해 입찰보증금은 발주사무소에 귀속한다.

③ 낙찰되지 아니한 입찰자의 입찰보증금은 낙찰자가 결정된후 입찰자의 신청에 의하여 이를 반환한다. 다만, 낙찰자의 입찰보증금은 계약체결후 낙찰자의 요청에 의하여 반환한다.

④ 보증서등에 의한 입찰보증금의 보증기간은 입찰일이전부터 입찰일 30일이후이어야 한다.

제7조(입찰참가) ① 입찰참가신청을 한 자가 아니면 입찰에 참가할 수 없다.

② 대리인을 지정한 경우에는 그 대리인도 입찰에 참가할 수 있다.

③ 농협·정부 또는 공공기관 등으로부터 부정당업자로 입찰참가자격을 제한받고 있는 자는 제2항의 규정에 의한 대리인으로 할 수 없다.

제8조(입찰서의 작성) ① 입찰서는 소정의 서식에 의하여 작성하여야 하며, 입찰금액은 총액입찰인 경우에는 총액을, 단가입찰인 경우에는 단가를 표기하여야 한다.

② 입찰서에 사용하는 인감(외국인에 대하여 서명을 허용한 경우에는 서명을 포함한다 이하 같다)은 입찰참가신청서 제출시 신고한 인감으로 하여야 한다.

③ 입찰서의 기재사항중 말소 또는 정정한 곳이 있을 때에는 입찰에 사용하는 인감으로 날인하여야 한다.

④ 입찰서는 입찰공고 또는 입찰참가통지서 등에 별도로 규정한 경우를 제외하고는 한글로 작성하여야 하고 입찰금액의 통화는 원화로 하여야 한다.

⑤ 입찰서의 금액표시는 한글 또는 한자로 기재하여야 하며 아라비아숫자를 병기할 수 있다. 이 경우 한글 또는 한자로 기재된 금액과 아라비아숫자가 차이가 있을 때에는 한글 또는 한자로 기재한 금액에 의한다.

제9조(입찰서의 제출) ① 입찰서는 봉함하여 1인 1통만을 제출하여야 한다.

② 입찰자는 제출한 입찰서를 교환·변경 또는 취소할 수 없다. 다만, 입찰서에 기재한 중요부분에 오기가 있음을 이유로 개찰현장에서 입찰자가 입찰의 취소의사를 표시한 것으로서 계약담당자(계약사무를 위임하는 경우에는 계약사무취급자를 계약담당자로 본다. 이하같다)가 이를 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제10조(경쟁입찰의 성립) 경쟁입찰은 2인이상의 유효한 입찰로써 성립한다.

제11조(입찰의 무효) 다음 각호의 1에 해당하는 입찰은 무효로 한다.

1. 입찰참가자격이 없는 자가 한 입찰

2. 대리권이 없는 자가 한 입찰

3. 소정일시까지 소정의 입찰보증금을 납부하지 아니하고 한 입찰 또는 입찰보증금이 입찰금액의 100분의 5에 미달한 입찰

4. 동일사항에 대하여 동일인이 2통이상의 입찰서를 제출한 입찰

5. 동일사항에 대하여 타인의 대리를 겸하거나 2인이상을 대리한 입찰

6. 입찰서의 입찰금액 등 중요한 부분이 불분명하거나 정정한 후 정정날인을 누락한 입찰

7. 담합하거나 타인의 경쟁참가를 방해 또는 입찰사무집행을 방해한 자의 입찰

8. 입찰자의 기명날인이 없는 입찰(입찰참가신청서 제출시 신고한 인감과 다른 인감으로 날인된 경우도 포함한다)

9. 입찰서에 기재한 중요부분에 오기가 있음을 이유로 개찰현장에서 입찰자가 입찰의 취소의사를 표시한 것으로서 계약담당자가 이를 인정한 입찰

10. 제8조제1항 및 제4항의 규정에 위반하여 소정의 입찰서를 사용하지 않거나 입찰서의 금액을 아라비아숫자로만 기재한 입찰

11. 제5조의 규정에 의하여 사양설명을 반드시 청취할 것을 요구한 경우로서 사양설명에 참가하지 아니한 자의 입찰

제12조(견품의 제출) ① 입찰참가자는 입찰공고 등에서 견품의 제출을 요구하였거나 이의 제출이 필요하다고 인정할 때에는 견품을 제출하여야 한다. 이 때에는 견품에 품명, 입찰참가자의 주소·성명(또는 상호) 및 입찰공고번호 등 필요한 사항을 기재하여야 한다.

② 낙찰자의 견품은 계약이행후, 낙찰자 이외의 입찰자의 견품은 낙찰자 결정후 각각 1개월이내에 당해 낙찰자 또는 입찰자의 요구에 의하여 반환한다. 이 경우 발주사무소의 책임없는 사유로 인하여 발생된 견품의 멸실,훼손과 반환에 따른 경비부담에 대하여 발주사무소는 책임을 지지 아니한다.

제13조(입찰의 연기) ① 발주사무소가 필요한 경우에는 입찰공고등에 예정된 입찰일시를 연기할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 입찰연기의 경우에는 그 연기사유와 기간을 당초 방법과 동일한 방법으로 공고 또는 통지하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 경우에는 입찰참가신청자에게 모사전송(FAX)의 방법으로 통지할 수 있다.

③ 입찰에 참가하고자 하는 자는 제 1항의 규정에 의한 연기로 인하여 발생한 추가비용은 이를 발주사무소에 청구할 수 없다.

제14조(재입찰 및 재공고입찰) ① 계약담당자는 경쟁입찰에 있어서 2인이상의 유효한 입찰자가 없거나 낙찰자가 없는 경우에는 같은 장소에서 다시 입찰에 부칠 수 있다. 이 경우 입찰횟수에는 제한을 받지 아니하나 1차입찰부터 계속하여 입찰에 참가하지 아니한자는 재입찰에 참가할 수 없다.

② 입찰자나 낙찰자가 없는 경우 또는 낙찰자가 계약을 체결하지 아니하는 경우에는 재공고 입찰에 부칠 수 있다.

제15조(낙찰자의 결정) ① 발주사무소가 필요할 경우 행정안전부 회계예규 협상에 의한 계약체결기준을 적용하여 낙찰자를 결정할 수 있다.

② 희망수량에 의한 단가입찰의 경우에는 유효한 입찰자 중 예정가격이하의 최저단가입찰자로부터 순찰 수요수량에 달할 때까지 입찰자를 낙찰자로 한다. 다만, 최후 순위의 낙찰자의 수량이 다른 낙찰자의 수량과 합산하여 구매예정량을 초과할 때에는 그 초과하는 수량에 대하여는 낙찰되지 아니한 것으로 한다.

③ 제1항의 경우 낙찰이 될 수 있는 동일가격으로 입찰한 자가 2인이상인 때에는 추첨에 의하여 낙찰자를 결정하여야 한다.

④ 제3항의 규정에 의한 추첨을 실시함에 있어서 동일가격 입찰자전원이 추첨에 참석하게 한 후 추첨하여야 한다.

⑤ 제2항의 경우 낙찰자가 될 동가의 입찰자가 2인이상인 때에는 입찰수량이 많은 입찰자를 우선순위의 낙찰자로 하며, 입찰수량도 동일한 경우에는 추첨으로 우선순위의 낙찰자를 결정한다.

제16조(계약의 체결) ① 낙찰자는 낙찰이 결정된 날로부터 5일이내에 소정서식의 계약서에 의하여 계약을 체결하여야 한다. 다만, 천재지변등 불가항력의 사유로 인하여 계약을 체결할 수 없는 경우에는 불가항력의 사유가 존속하는 기간은 이를 산입하지 아니한다.

② 제1항의 규정에 의하여 발주사무소와 계약을 체결하고자 하는 자는 필요한 관계서류를 계약담당자에게 제출하여야 한다.

③ 낙찰자가 정당한 이유없이 제1항의 규정에 의하여 계약을 체결하지 아니할 때에는 계약담당자로부터 당해 낙찰 취소조치를 받게 된다.

제17조(계약의 성립) 계약은 계약서를 작성하고 계약담당자와 낙찰자가 기명·날인(외국인에 대하여 서명을 허용한 경우에는 서명을 포함한다)함으로써 확정된다.

제18조(부정당업자의 입찰참가자격제한) ① 입찰자 또는 낙찰자가 다음 각호의 사유에 해당하는 경우에는 일정기간동안 입찰참가자격 제한조치를 받게 된다.

1. 계약을 이행함에 있어서 조잡 또는 부당하게 하거나 부정한 행위를 한 자

2. 정당한 이유없이 계약을 체결 또는 이행하지 아니한 자

3. 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하였거나, 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 자

4. 입찰참가자격에 관한 서류 기타, 계약에 관한 서류를 위조 또는 변조한 자

5. 고의로 무효의 입찰을 한 자

6. 입찰참가신청서 또는 입찰참가승낙서를 제출하고도 정당한 이유없이 입찰에 참가하지 아니한 자

7. 입찰참가를 방해하거나 낙찰자의 계약체결 또는 그 이행을 방해한 자

8. 검사에 있어서 그 직무의 수행을 방해한 자

② 입찰일 현재 농협·정부·지방자치단체 또는 정부투자기관등에서 부정당업자로 제재받고 있는 자는 입찰에 참가하지 못한다.

제19조(비밀유지의 의무) 입찰자는 발주사무소로부터 배부받은 입찰에 관한 서류 또는 각종 자료 및 입찰과정에서 얻은 정보를 당해 입찰외의 목적으로 사용하여서는 아니된다.

제20조(기타사항) 입찰공고조건 및 이 유의서에 명시되지 아니한 기타사항에 대하여는 발주사무소에서 정하는 바에 의한다.

<붙임 2>

공사계약일반조건

제1조(총 칙) 계약담당자와 계약상대자는 공사도급표준계약서(이하 "계약서"라 한다)에

기재한 공사의 도급계약에 관하여 제3조의 규정에 의한 계약문서에서 정하는 바에 따

라 이를 이행한다.

제2조(정 의) 이 조건에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "계약담당자"라 함은  대화농협으로부터 공사계약에 관한 권한을 위임받은

대화농협의 직원을 말한다.

2. "계약상대자"라 함은 대화농협(이하 "발주사무소"라 한다)과 공사계약을 체결한

자연인 또는 법인을 말한다.

3. "공사감독자"라 함은 제13조의 임무를 수행하기 위하여 대화농협이 임명한 직원

또는 그의 대리인을 말한다. 다만, 건설기술관리법에 의하여 책임관리를 하는

공사에 있어서는 당해 공사의 감리를 수행하는 감리원을 말한다.

4. "설계서"라 함은 공사시방서, 설계도면 및 현장설명서를 말한다.

제3조(계약문서) ① 계약문서는 계약서, 설계서, 공사입찰유의서, 공사계약일반조건, 공

사계약특수조건 및 공사비내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다.

② 계약담당자는 당해 공사계약의 특성상 필요하다고 인정되는 사항에 대하여 제1항에

규정된 공사계약특수조건을 정할 수 있다.

③ 이 조건이 정하는 바에 의하여 계약당사자 간에 행한 통지문서 등은 계약문서로서의 효력을 가진다.

④ 이 조건에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 발주사무소의 계약 관련 제 규정 및 공사입찰유의서에서 정하는 바에 의한다.

제4조(통지 등) ① 구두에 의한 통지ㆍ신청ㆍ청구ㆍ요구ㆍ회신ㆍ승인 또는 지시 등(이하

"통지 등"이라 한다)은 문서로 보완되어야 효력이 있다.

② 통지 등의 장소는 계약서에 기재된 주소로 하며, 주소를 변경하는 경우에는 이를 즉시 계약당사자에게 통지하여야 한다.

③ 통지 등의 효력은 계약문서에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 계약당사자에게 도

달한 날부터 발생한다. 이 경우 도달일이 공휴일인 경우에는 그 익일부터 효력이 발생

한다.

제5조(채권양도) ① 계약상대자는 이 공사의 이행을 위한 목적 이외의 목적을 위하여 이

계약에 의하여 발생한 채권(공사대금청구권)을 제3자에게 양도하지 못한다.

② 계약상대자가 채권양도를 하고자 하는 경우에는 미리 연대보증인 또는 공사이행보

증서 발급기관(이하 "보증기관"이라 한다)에 동의를 얻어 발주사무소의 서면 승인을

받아야 한다.

제6조(계약보증금) ① 계약을 체결하고자 하는 자는 계약체결일까지 현금 또는 보증서 등

으로 계약보증금을 납부하여야 한다.

② 계약보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제받은 경우 발주사무소에 귀속사유가 발

생할 때에 계약보증금에 해당하는 금액을 현금으로 납입할 것을 확약하는 내용의 문서

(이하 "계약보증금지급각서"라 한다)를 제출하여야 한다.

③ 계약상대자는 이 조건의 규정에 의하여 계약금액이 증액된 경우에는 이에 상응하는

금액의 계약보증금을 추가로 납부하여야 하며, 계약금액이 감액된 경우에는 이에 상응

하는 금액의 계약보증금을 반환청구할 수 있다.

제7조(계약보증금의 처리) ① 계약상대자가 정당한 이유없이 계약상의 의무를 이행하지

아니한 때에는 계약보증금을 발주사무소에 귀속한다.

② 제6조제2항의 규정에 의하여 계약보증금지급각서를 제출한 경우로서 계약보증금이

발주사무소에 귀속사유가 발생하여 계약담당자의 납입요청이 있을 때에는 계약상대자

는 당해 계약보증금을 지체없이 현금으로 납부하여야 한다.

③ 계약상대자가 납부한 계약보증금은 계약이 이행된 후 계약상대자의 청구에 의하여

환급한다. 이 경우 계약보증금에 대한 이자는 지급하지 아니한다.

제8조(연대보증인 및 공사이행보증) ① 계약상대자는 계약담당자가 요구하는 바에 의하여

이 계약상의 의무이행을 보증하는 1인 이상의 연대보증인을 세우거나, 계약보증금의

2배를 납부 또는 공사이행보증서를 제출하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 연대보증인은 다음 각호에 해당하는 자격을 갖추고 있어야 한

다. 계약상대자는 연대보증인의 적격여부를 심사하기 위하여 계약담당자가 관련 자료의 제출을 요구할 경우 이에 응하여야 한다.

1. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 계열회사가 아닌 자

2. 농협ㆍ정부 또는 정부투자기관 등으로부터 입찰참가자격제한을 받은 사실이 없거나

그 제한을 받고 당해 제한기간 만료 후 1년 이상 경과한 자

3. 입찰공고 등에서 정한 입찰참가자격과 동등이상의 자격을 갖춘 자

③ 계약담당자는 연대보증인으로 된 자가 부적격하다고 인정되는 때에는 계약상대자에

게 연대보증인의 변경을 청구할 수 있다.

제9조(공사자재의 검사) ① 공사에 사용할 자재는 신품이어야 하며 품질 및 규격 등은 반드시 설계서와 일치되어야 한다. 다만, 설계서에 명확히 규정되지 아니한 것은 표준품  이상으로 계약의 목적을 달성하는데 가장 적합한 것이어야 한다.

② 계약상대자는 공사자재를 사용하기 전에 전부 공사감독자의 검사를 받아야 하며 불합격된 자재는 즉시 대체하여 다시 검사를 받아야 한다.

③ 계약상대자가 불합격된 자재를 즉시 이송하지 않거나 대체하지 아니하는 경우에는 계약담당자가 일방적으로 불합격 자재를 제거하거나 대체시킬 수 있으며, 그 비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

④ 계약상대자는 시험 또는 조합을 요하는 자재가 있는 경우 공사감독자의 참여 하에

그 시험 또는 조합을 하여야 한다.

⑤ 수중 또는 지하에 매몰하는 공작물 기타 준공 후 외부로부터 검사할 수 없는 공작물의 공사는 공사감독자의 참여 하에 시공하여야 한다.

⑥ 계약상대자가 제1항 내지 제5항에 정한 조건에 위배하거나 또는 설계서에 합치되지

않는 시공을 하였을 때에는 계약담당자는 공작물의 대체 또는 개조를 명할 수 있다.

⑦ 제2항 내지 제6항의 경우 검사에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담하여야 하며,

계약금액을 증감하거나 계약기간을 연장할 수 없다.

제10조(지급자재 등) ① 공사수행에 필요한 특정자재 등(이하 "지급자재 등"이라 한다)은 계약담당자가 지정한 일시와 장소에서 계약상대자에게 공급할 수 있다.

② 지급자재 등의 소유권은 발주사무소에 있으며 계약담당자는 필요할 경우에는 수시로 지급자재가 비치된 장소에 출입하여 이를 검사확인할 수 있다.

③ 제1항의 규정에 의한 인도 후의 지급자재 등에 대한 관리상의 책임은 계약상대자에게 있으며, 이를 멸실 또는 훼손하였을 경우에는 발주사무소에 변상하여야 한다. 또한 잉여분이 있을 경우 계약상대자는 이를 발주사무소에 통지하여 계약담당자의 지시에 따라 이를 반환하여야 한다.

④ 계약상대자는 지급자재 등을 계약의 수행 외의 목적으로 사용할 수 없으며, 공사감독자의 서면승인 없이는 현장외부로 반출하여서는 아니된다.

⑤ 계약상대자는 지급자재 등을 인수할 때에는 이를 검수하여야 하며 그 품질 또는 규

격이 시공에 적당하지 아니하다고 인정될 경우에는 즉시 계약담당자에게 이를 통지하

여 이의 대체를 요구할 수 있다.

⑥ 계약담당자는 필요하다고 인정할 경우에는 지급자재 등의 수량ㆍ품질ㆍ규격ㆍ인도시기ㆍ인도장소 등을 변경할 수 있다.

제11조(공사현장대리인) ① 계약상대자는 계약된 공사에 적격한 공사현장대리인(국가기술

자격취득자 또는 건설기술관리법 등 관계법령에 의하여 기술자로 인정하고 있는 자를

말한다. 이하 같다)을 지명하여 계약담당자에게 통지하여야 한다.

② 공사현장대리인은 공사현장에 상주하여 계약문서와 공사감독자의 지시에 따라 공사

현장의 단속 및 공사에 관한 모든 사항을 처리하여야 한다.

③ 계약상대자는 공사감독자가 현장대리인이 부적당하다고 인정하여 교체를 요구한 때

에는 이에 응하여야 한다.

제12조(공사현장근로자) ① 계약상대자는 당해 계약의 시공 또는 관리에 필요한 기술과

경험을 가진 근로자를 채용하여야 하며 근로자의 행위에 대하여 모든 책임을 져야 한다.

② 계약상대자는 계약담당자가 계약상대자가 채용한 근로자에 대하여 당해 계약의 시공 또는 관리상 적당하지 아니하다고 인정하여 이의 교체를 요구한 때에는 즉시 교체하여야 하며, 계약담당자의 승인 없이는 교체된 근로자를 당해 계약의 시공 또는 관리를 위하여 다시 채용할 수 없다.

제13조(공사감독자) ① 공사감독자는 계약된 공사의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하

여 공사관리요령 제16조의 규정 및 이 조건에서 규정한 업무를 행한다.

② 공사감독자는 계약담당자의 승인 없이 계약상대자의 의무와 책임을 면제시키거나 증감시킬 수 없다.

③ 계약상대자는 공사감독자의 지시 또는 결정이 이 조건에서 정한 사항에 위반되거나

계약의 이행에 적합하지 아니하다고 인정될 경우에는 즉시 계약담당자에게 이의 시정

을 요구하여야 한다.

④ 계약담당자는 제3항의 규정에 의한 시정요구 내용을 검토하여 필요한 조치를 취하

여야 한다.

⑤ 계약상대자는 그가 발주사무소에 제출하는 모든 문서에 대하여 그 사본을 공사감독

자가 요구할 경우 이에 응하여야 한다.

제14조(착공 및 공정보고) ① 계약상대자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 착공하여야

하며 착공 시에는 관계법령에서 정한 서류 및 다음 각호의 서류가 포함된 착공신고서를 발주사무소에 제출하여야 한다.

1. 현장기술자지정신고서(안전관리자,환경관리자,품질관리자 등)

2. 공사공정예정표

3. 안전ㆍ환경 및 품질관리계획서

4. 착공 전 현장사진

5. 기타 계약담당자가 지정한 서류 등

② 계약상대자는 계약의 이행 중에 설계변경 또는 기타 계약내용의 변경으로 인하여

제1항의 규정에 의하여 제출한 서류의 변경이 필요한 때에는 관련 서류를 변경하여 제

출하여야 한다.

③ 계약담당자는 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 제출된 서류의 내용을 조정할 필요

가 있다고 인정하는 경우에는 계약상대자에게 이의 조정을 요구할 수 있다.

④ 계약담당자는 계약상대자로 하여금 수행한 공사의 공정내용에 대하여 제출하게 할

수 있으며, 이 경우 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

⑤ 계약담당자는 공정이 지체되어 소정기한 내에 공사가 준공될 수 없다고 인정할 경우에는 월별현황 또는 주간 공정현황의 제출 등 공사추진에 필요한 조치를 계약상대자에게 지시할 수 있다.

제15조(설계변경 등) ① 계약상대자는 다음 각호의 1에 해당하는 사실을 발견한 때에는 당해 부분에 대한 계약이행 전에 지체 없이 공사감독자를 경유하여 계약담당자에게 서면으로 이를 통지하여야 한다.

1. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락ㆍ오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 때

2. 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 때

② 계약담당자는 제1항의 통지를 받은 때에는 그 사실을 조사 확인하고 공사가 적절히

이행될 수 있도록 설계변경 또는 기타 필요한 조치를 취할 수 있다.

③ 계약담당자는 제1항에 정한 사유 외에 다음 각호의 사유로 인하여 설계서를 변경할

필요가 있다고 인정할 경우에는 계약상대자에게 이를 서면으로 통보할 수 있다.

1. 당해 공사의 일부변경이 수반되는 추가공사의 발생

2. 특정공종의 삭제

3. 공종계획의 변경

4. 시공방법의 변경

5. 기타 공사의 적정한 이행을 위하여 변경이 필요한 사항

④ 계약담당자는 제1항 내지 제3항의 규정에 의하여 설계변경조치를 하는 경우 그 변

경사항이 목적물의 구조변경 등 안전과 관련이 있는 때에는 하자발생 시 책임한계를 명확하게 하기 위하여 당초 설계자의 의견을 들어야 한다.

⑤ 계약담당자는 제1항 및 제3항의 규정에 의하여 설계변경을 하는 경우 계약상대자로 하여금 다음 각호의 사항을 공사감독자를 경유하여 제출하게 할 수 있으며, 이 경우 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

1. 당해 공종의 수정공정표

2. 당해 공종의 수정도면 및 수정상세도면

3. 조정이 요구되는 계약금액 및 기간

4. 여타의 공정에 미치는 영향

제16조(설계변경으로 인한 계약금액 조정) ① 계약담당자는 제15조의 규정에 의한 설계변경으로 인하여 공사량이 증감하는 경우에는 다음 각호의 1의 기준에 의하여 계약금액을 조정할 수 있다.

1. 증감된 공사량의 단가는 계약단가로 한다. 다만, 계약단가가 예정가격단가보다 높

은 경우로서 물량이 증가하게 되는 경우 그 증가된 물량에 대한 적용단가는 예정가

격단가로 한다.

2. 계약단가가 없는 신규비목의 단가는 설계변경당시(설계도면의 변경을 요하는 경우

에는 변경도면이 확정된 때, 설계도면의 변경을 요하지 않는 경우에는 계약당사자

간에 설계변경을 문서에 합의한 때를 말한다. 이하 같다)를 기준으로 산정한 단가에 낙찰율(예정가격에 대한 낙찰금액 또는 계약금액의 비율을 말한다. 이하 같다)을 곱한 금액으로 한다.

② 계약상대자의 책임없는 사유로 인하여 발주사무소가 설계변경을 요구한 경우에는

증가된 물량 또는 신규비목의 단가는 설계변경당시를 기준으로 산정한 단가와 동 단가

에 낙찰율을 곱한 금액의 범위안에서 발주사무소와 계약상대자가 상호 협의하여 결정

한다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 계약금액의 증감분에 대한 간접노무비,산재보험료

및 안전관리비등 승율비용과 일반관리비 및 이윤은 당초 계약 시 승인받은 공사비명세

서상의 간접노무비율,산재보험료율 및 안전관리비율 등의 승율비율과 일반관리비율 및

이윤율에 의한다.

제17조(기타 계약내용 변경으로 인한 계약금액 조정) ① 계약담당자는 16조의 규정에 의

한 경우 이외에 공사기간ㆍ운반거리의 변경 등 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정할 필요가 있는 경우에는 그 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 아니하는 범위안에서 이를 조정할 수 있다.

② 제1항의 경우에는 제16조제3항의 규정을 준용한다.

제18조(응급조치) ① 계약상대자는 시공기간 중 재해방지를 위하여 필요하다고 인정할 때

에는 미리 공사감독자의 의견을 들어 필요한 조치를 취하여야 한다.

② 공사감독자는 재해방지 기타 시공상 부득이할 때에는 계약상대자에 대하여 필요한

응급조치를 취할 것을 요구할 수 있다. 이 경우에 계약상대자는 즉시 이에 응해야 한

다. 다만, 계약상대자가 요구에 응하지 아니할 때에는 계약담당자는 일방적으로 계약

상대자 부담으로 제3자로 하여금 응급조치를 하게 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항의 조치에 소요된 경비 중에서 계약상대자가 계약금액의 범위 내에서 부담하는 것이 부당하다고 계약담당자가 인정하는 때에는 제17조의 규정을 준용하여 실비의 범위 안에서 계약금액을 조정할 수 있다.

제19조(지체상금) ① 계약상대자는 계약서에 정한 준공기한 내에 공사를 완성하지 아니한

때에는 매 지체일수마다 계약서에 정한 지체상금률을 계약금액에 곱하여 산출한 금액

(이하 "지체상금"이라 한다)을 현금으로 납부하여야 한다.

② 계약담당자는 제1항의 경우에 제23조의 규정에 의하여 기성부분을 인수한 때에는

그 부분에 상당하는 금액을 계약금액에서 공제한다. 이 경우 기성부분의 인수는 그 성

질상 분할할 수 있는 공사에 대한 완성부분으로 인수하는 것에 한한다.

③ 계약담당자는 다음 각호의 1에 해당되어 공사가 지체되었다고 인정할 때에는 그 해

당 일수를 제1항의 지체일수에 산입하지 아니한다.

1. 천재지변 등 불가항력의 사유에 의한 경우

2. 계약상대자가 대체 사용할 수 없는 중요 지급자재 등의 공급이 지연되어 공사의 진

행이 불가능하였을 경우

3. 발주사무소의 책임으로 착공이 지연되거나 시공이 중단되었을 경우

4. 계약상대자의 부도 등으로 연대보증인이 보증시공을 할 경우

5. 계약상대자의 부도 등으로 보증기관이 보증이행업체를 지정하여 보증시공할 경우

6  제15조의 규정에 의한 설계변경으로 인하여 준공기한 내에 계약을 이행할 수 없을

경우

7. 기타 계약상대자의 책임에 속하지 아니하는 사유로 인하여 지체된 경우

④ 제3항제4호의 규정에 의하여 지체일수에 산입하지 아니하는 기간은 부도 등이 확정

된 날부터 보증시공을 지시한 날까지이며, 제3항제5호의 규정에 의하여 지체일수에 산

입하지 아니하는 기간은 발주사무소로부터 보증채무 이행청구서를 접수한 날부터 보증이행개시일 전일까지(단, 30일이내에 한한다)로 한다.

⑤ 계약담당자는 제1항 내지 제4항의 규정에 의한 지체상금은 계약상대자에게 지급될

대가 또는 기타 예치금 등과 상계할 수 있다.

제20조(계약기간의 연장) ① 계약상대자는 제19조제3항 각호의 1의 사유가 계약기간 내에

발생한 경우에는 지체 없이 수정공정표를 첨부하여 공사감독자를 경유하여 계약담당자

에게 서면으로 계약기간의 연장을 청구하여야 한다.

② 계약담당자는 제1항의 규정에 의한 계약기간 연장신청이 접수된 때에는 즉시 그 사

실을 조사 확인하고 공사가 적절히 이행될 수 있도록 계약기간의 연장 등 필요한 조치

를 한다.

③ 계약담당자는 제1항에서 규정한 연장청구를 승인하였을 경우 동 연장기간에 대하여

는 제19조의 규정에 의한 지체상금을 부과하지 아니한다.

제21조(검 사) ① 계약상대자는 공사를 완성하였을 때에는 준공계 등을 서면으로 계약담당자에게 제출하고 필요한 검사를 받아야 한다.

② 계약담당자는 제1항의 통지를 받은 때에는 계약서, 설계서, 준공신고서 기타 관계

서류에 의하여 계약상대자의 입회 하에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 한다.

③ 계약담당자는 제2항의 검사에 있어서 계약상대자의 계약이행내용의 전부 또는 일부

가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 시정조치를 하여야 한다.

④ 제3항의 경우에 계약이행기간이 연장될 때에는 계약담당자는 제19조의 규정에 의한

지체상금을 부과한다.

⑤ 계약상대자는 제2항의 규정에 의한 검사에 입회ㆍ협력하여야 한다. 계약상대자가

입회를 거부하거나 검사에 협력하지 아니함으로써 발생하는 지체에 대하여는 제3항 및

제4항의 규정을 준용한다.

⑥ 계약담당자는 검사를 완료한 때에는 그 결과를 계약상대자에게 통지하며, 검사완료

통지를 받은 계약상대자는 모든 공사시설, 잉여자재, 폐기물 및 가설물 등을 공사장으

로부터 즉시 철거반출하여야 하며 공사장을 정돈하여야 한다.

⑦ 기성검사 시 검사에 합격된 자재라도 단순히 공사현장에 반입된 것만으로는 기성부

분으로 인정할 수 없다. 다만, 이 경우 일반자재시장에서 거래되지 아니하는 자재로서

계약상대자가 직접 또는 제3자에게 위탁하여 가공ㆍ조립 또는 제작된 자재인 때에는

당해 자재의 특성, 용도 및 시장거래상황 등을 고려하여 반입된 자재의 100분의 50에

해당하는 범위 내에서 기성부분으로 인정할 수 있다.

제22조(인 수) ① 계약담당자는 제21조의 규정에 의하여 검사완료 통지를 한 후 계약상대

자가 서면으로 인수를 요청하였을 때에는 당해 공사목적물을 인수한다.

② 계약담당자는 계약상대자가 제1항의 규정에 의한 공사목적물의 인수요청을 하지 아

니한 때에는 공사대가의 지급과 동시에 공사목적물의 인도를 요구할 수 있다. 이 경우

계약상대자는 지체 없이 당해 공사목적물을 인도하여야 한다.

제23조(기성부분의 인수) ① 계약담당자는 전체 공사 목적물이 아닌 기성부분(성질상 분

할할 수 있는 공사에 대한 완성부분에 한한다)에 대하여 이를 인수할 수 있다.

② 제22조의 규정은 제1항의 경우에 이를 준용할 수 있다.

제24조(부분사용 및 부가공사) ① 발주사무소는 계약목적물의 인수 전에 기성부분이나 미

완성부분을 사용할 수 있으며 동 부분에 대하여는 당해 구조물 안전에 지장을 주지 아

니하는 부가공사를 할 수 있다.

② 제1항의 경우 계약상대자와 부가공사에 대한 계약상대자는 계약담당자의 지시에 따

라 공사를 진행하여야 한다.

③ 계약담당자는 제1항의 규정에 의한 부분사용 또는 부가공사로 인하여 계약상대자에

게 손해가 발생한 경우에는 실비의 범위 내에서 보상할 수 있다.

제25조(일반적 손해 및 천재지변 등 불가항력에 의한 손해) ① 계약상대자는 계약의 이행

중 공사목적물,지급자재,대여품 및 제3자에 대한 손해를 발생시켰을 때에는 발주사무

소에 책임이 있는 경우를 제외하고는 손해를 부담하여야 한다.

② 계약상대자는 제22조 및 제23조의 규정에 의한 공사목적물의 인도 후에 천재지변 등 불가항력적인 사유 또는 기타 계약상대자의 책임없는 사유로 인하여 발생한 손해에 대하여는 책임을 지지 아니한다.

제26조(하자보수) ① 계약상대자는 제21조의 규정에 의한 검사를 완료한 날부터 계약서에

서 정한 기간(이하 "하자담보책임기간"이라 한다)동안 공사목적물의 하자에 대한 보수

책임이 있다.

② 계약상대자는 하자보수 통지를 받은 때에는 즉시 보수작업을 하여야 하며, 당해 하

자의 발생원인 및 기타 조치사항을 명시하여 발주사무소에 제출하여야 한다.

제27조(하자보수보증금) ① 계약상대자는 공사의 하자보수를 보증하기 위하여 계약서에서

정한 하자보수보증금률을 계약금액(당초 계약금액이 조정된 경우에는 조정된 계약금액

을 말한다)에 곱하여 산출한 금액(이하 "하자보수보증금"이라 한다)을 준공검사 후 그

공사의 대가를 지급할 때까지 현금 또는 보증서 등으로 납부 또는 제출하여야 한다.

다만, 하자보수보증금을 납부하지 아니하게 할 수 있는 공사는 그러하지 아니하다.

② 계약상대자가 제26조제1항의 규정에 의한 하자담보책임기간 중 계약담당자의 하자보수요구를 받고 이에 불응한 경우에는 제1항의 규정에 의한 하자보수보증금을 발주사무소에 귀속한다.

③ 하자보수보증금은 하자담보 책임기간이 만료된 후 계약상대자의 요청에 의하여 반

환한다.

제28조(하자검사) ① 계약상대자는 하자검사에 입회하여야 한다. 다만, 계약상대자가 입

회를 거부하는 경우에는 계약담당자는 일방적으로 검사를 할 수 있으며 검사결과에 대

하여 계약상대자가 동의한 것으로 간주한다.

② 계약담당자는 하자담보책임기간의 만료 후 최종검사를 하였을 때에는 하자보수완료

확인서를 계약상대자에게 발급한다. 이 경우 최종검사에서 발견되는 하자사항은 계약

상대자가 자신의 부담으로 보수하여야 한다.

③ 계약상대자의 책임과 의무는 제2항의 규정에 의한 하자보수완료확인서 발급일로부

터 소멸한다.

제29조(특별책임) 계약담당자는 하자보수완료확인서 발급에 불구하고 당해 공사의 특성 및 관련 법령에서 정한 바에 따라 필요하다고 인정하는 경우 및 검사과정에서 발견되지 아니한 시공상의 하자에 대하여는 계약상대의 책임으로 하는 특약을 정할 수 있다.

제30조(특허권의 사용) 공사의 이행에 특허권 기타 제3자의 권리의 대상으로 되어 있는

시공방법을 사용할 때에는 계약상대자는 그 사용에 관한 일체의 책임을 져야 한다.

제31조(발굴물의 처리) ① 공사현장에서 발견한 모든 가치있는 화석ㆍ금전ㆍ보물 기타 지

질학 및 고고학상의 유물 또는 물품은 관계법규에서 정하는 바에 의하여 처리한다.

② 계약상대자는 제1항의 물품이나 유물을 발견하였을 때에는 즉시 계약담당자에게 통

지하고 그 지시에 따라야 하며, 이를 취급할 때에는 파손이 없도록 적절한 예방조치를

하여야 한다.

제32조(기성대가의 지급) ① 공사완성 전이라도 계약상대자의 청구에 의하여 계약담당자는 기성부분에 대한 대가를        회에 한하여 지급할 수 있다.

② 기성대가는 기성검사에 의해 계약단가에 의하여 산정ㆍ지급한다. 다만, 계약단가가

없을 경우에는 설계변경 시 산정한 단가를 적용한다.

제33조(준공대가의 지급) ① 계약상대자는 공사를 완성한 후 제21조의 규정에 의한 검사

에 합격한 때에는 소정절차에 따라 대가지급을 청구할 수 있다.

② 계약담당자는 제1항의 청구를 받은 후 그 청구내용의 전부 또는 일부가 부당함을

발견한 때에는 그 사유를 명시하여 계약상대자에게 당해 청구서를 반송할 수 있다.

③ 대가의 지급에 있어서 계약담당자는 발주사무소에 대한 계약상대자의 부담금과 계

약담당자가 확인한 당해 공사에 관련된 제 과징금 및 체불노임과 기타 요공제액을 제

외한 금액만 지급하여도 계약상대자는 이에 대하여 이의를 제기하지 못한다.

제33조의2(국민건강보험료 등 사후정산) ① 계약담당자는 공사의 예정가격 작성 시 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료(이하 □국민건강보험료 등□이라 한다)를 관련 법령에 따라 각각 계상한다.

② 계약담당자는 국민건강보험료 등의 사후정산과 관련하여 다음 각호의 사항을 입찰공고 등에 명시하여 입찰에 참가하고자 하는 자가 미리 열람할 수 있도록 하여야 한다.

1. 국민건강보험료 등은 사후정산을 하게 된다는 사항

2. 예정가격 작성 시 계상된 국민건강보험료 등

3. 입찰참가자가 입찰금액 산정 시(공사비내역서 포함) 국민건강보험료 등은 제2호에 따른 금액을 조정 없이 반영하여야 한다는 사항

③ 계약상대자는, 계약담당자가 제33조의 규정에 의한 대가지급 시 당해 공사 전체에 대한 보험료 납부여부를 최종 확인한 후 제2항제2호에 따라 입찰공고 등에 고지된 국민건강보험료 등의 범위 내에서 정산하는데 동의하며, 이를 위하여 계약상대자는 국민건강보험료 등의 납부여부를 확인할 수 있는 증빙서류를 계약담당자에게 제출하여야 한다.

제34조(계약금액의 감액 또는 환수) ① 계약담당자는 계약체결 후 계약내용에 하자 또는

착오가 있음이 발견되거나 기타 계약금액을 감액하여야 할 사유가 발생하였을 때에는

계약상대자에게 해당금액을 감액 또는 환수할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 계약금액의 감액 또는 환수는 계약상대자에게 귀속하는 모든

명목의 금액에서 공제할 수 있으며, 공제할 금액이 없을 경우에는 계약담당자가 정한

기일까지 계약상대자는 해당 금액을 납부하여야 한다.

제35조(하도급의 승인 등) ① 계약상대자가 계약된 공사의 일부를 제3자에게 하도급하고자 할 때에는 발주사무소의 서면 승인을 받아야 한다. 다만, 건설업법의 규정에 의하여 전문공사를 당해 전문공사업자에게 하도급하는 경우에는 발주사무소에 대한 통지로서 갈음할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의하여 하도급한 경우에도 이 계약상의 계약상대자의 책임과 의무

가 면제되지 아니하며, 계약상대자는 하수급인ㆍ하수급인의 대리인ㆍ근로자의 행위에

대하여 모든 책임을 져야 한다.

③ 계약담당자는 제1항의 규정에 의하여 계약상대자로부터 하도급계약에 대한 승인신

청 또는 통지를 받은 때에는 하도급계약금액이 하도급하고자 하는 부분의 산출내역서

상의 계약단가를 기준으로 산출한 금액(일반관리비 및 이윤을 포함한다)의 100분의 90

미만인 때에는 당해 하도급계약내용을 심사하여 당해 공사의 적정한 이행이 되지 아니

할 우려가 있다고 인정되는 때에는 계약상대자에게 하도급계약내용의 변경을 요구할

수 있다. 이 경우 계약상대자는 정당한 이유가 없는 한 변경요구에 응하여야 한다.

④ 계약담당자는 제3항의 규정에 의한 심사는 당해 하도급공사의 성질ㆍ이행의 난이도

ㆍ공사량의 다과 및 하도급계약 체결방법 등을 종합하여 심사할 수 있다.

⑤ 계약담당자는 승인한 하도급공사의 시공에 있어 당해 하도급자가 부적당하다고 인

정될 때에는 계약상대자에 대하여 하도급자의 교체를 요구할 수 있다. 이 경우 계약상

대자는 특별한 사유가 없는 한 하도급자를 교체하여야 한다.

⑥ 계약담당자는 제1항의 규정에 의거 하도급계약을 승인하거나 통보받은 경우로서 기

성 및 준공대가를 지급하는 때에는 지급 전에 그 대가지급내용을 당해 하수급인에게 통보할 수 있으며, 이 조건이 정하는 바에 의하여 계약금액을 조정한 때에는 조정내용을 당해 하수급인에게 통보할 수 있다.

⑦ 계약상대자는 제1항의 규정에 의거 하도급계약에 대한 승인신청 또는 통지를 할 때

에는 제36조제1항 각호의 1에 해당될 경우 하도급부분에 대한 대가를 발주사무소가 하

수급인에게 직접 지급하는 것을 용인한다는 내용의 문서를 제출하여야 하며, 계약담당

자는 동 문서를 제출하지 아니한 경우에는 특별한 사유가 없는 한 하도급계약의 승인

을 하지 아니한다.

⑧ 제1항 내지 제6항의 규정은 승인 또는 통보된 하도급계약의 내용을 변경하는 경우

에 이를 준용한다.

⑨ 계약상대자는 발주사무소에 대한 계약문서상 계약상대자의 모든 의무규정을 하수급

인이 계약상대자에 대하여 준수하고 이행할 것을 하수급인과 약정하여야 한다.

제36조(하도급대가의 직접지급 등) ① 계약담당자는 계약상대자가 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 제35조제1항의 규정에 의하여 승인 또는 통보받은 하도급계약 중 하수급인이 시공한 부분에 상당하는 금액에 대하여는 계약상대자가 하수급인에게 기성대가

및 준공대가 지급을 의뢰한 것으로 보아 하수급인에게 직접 지급한다.

1. 하수급인이 계약상대자를 상대로 하여 받은 판결로서 그가 시공한 분에 대한 하도

급대금지급을 명하는 확정판결이 있는 경우

2. 계약상대자가 파산,부도,영업정지 및 면허취소 등으로 하도급대금을 하수급인에게

지급할 수 없게 된 경우

3. 예정가격의 100분의 90 미만의 금액으로 계약을 체결한 경우로서 발주자가 하수급자의 보호를 위해 필요하다고 인정하는 공사의 경우

4. 하도급계약의 이행보증을 요하는 건설공사의 하도급계약 중 계약상대자가 하수급업

자에게 하도급대금의 지급을 보증하지 아니한 경우로서 발주자가 하수급사업자의

보호를 위하여 필요하다고 인정하는 경우

② 계약담당자는 제1항의 규정에 불구하고 하수급인이 당해 하도급계약과 관련하여 노

임, 중기사용료, 자재대 등을 체불한 사실을 계약상대자가 객관적으로 입증할 수 있는

서류를 첨부하여 당해 하도급대가의 직접 지급중지를 요청한 때에는 당해 하도급대가

를 직접 지급하지 아니할 수 있다.

③ 계약상대자는 준공신고 또는 기성대가의 지급청구를 위한 검사를 신청하고자 할 경

우에는 하수급인이 시공한 부분에 대한 내역을 구분하여 신청하여야 하며, 기성대가

및 준공대가 신청 시 제1항의 하도급대가가 포함된 대가지급을 청구할 때에는 당해 하

도급대가를 분리하여 청구하여야 한다.

제37조(계약의 해제 또는 해지) ① 계약담당자는 계약상대자가 다음 각호의 1에 해당하는

경우에는 당해 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다. 다만, 제3호의 경

우에는 해제 또는 해지하여야 한다.

1. 정당한 이유없이 약정한 착공시일이 경과하고도 공사에 착수하지 아니할 경우

2. 계약상대자의 책임있는 사유로 인하여 준공기한까지 공사를 완성하지 못하거나 완

성할 가능성이 없다고 인정될 경우

3. 제19조에 의한 지체상금이 당해 계약의 계약보증금상당액에 달한 경우로서 계약기

간을 연장하여도 공사를 완공할 가능성이 없다고 판단되는 경우

4. 계약상대자의 부도발생 등으로 정상적인 공사수행 가능성이 없다고 판단될 경우

5. 기타 계약조건을 위반하고 그 위반으로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인

정될 경우

② 계약담당자는 제1항의 규정에 의하여 계약을 해제 또는 해지한 때에는 그 사실을

계약상대자 및 제35조의 규정에 의한 하수급자에게 통지하여야 한다.

③ 제2항의 규정에 의한 통지를 받은 계약상대자는 다음 각호의 사항을 준수하여야 한

다

1. 당해 공사를 즉시 중지하고 모든 공사자재 및 기구 등을 공사장으로부터 철거하여야 한다.

2. 계약상대자는 발주사무소로부터 받은 대여품 등이 있을 때에는 지체 없이 발주사무소에 반환하여야 한다.이 경우 당해 대여품 등이 계약상대자의 고의 또는 과실로 인하여 멸실 또는 파손되었을 때에는 원상회복 또는 그 손해배상을 하여야 한다.

3. 제10조의 규정에 의한 지급자재 중 기성부분으로 인수된 부분에 사용한 것을 제외한 잔여재료는 발주사무소에 반환하여야 한다. 이 경우 당해 재료가 계약상대자의 고의 또는 과실로 인하여 멸실 또는 파손되었을 때, 또는 공사의 기성부분으로서 인수되지 아니하는 부분에 사용된 때에는 원상회복 또는 그 손해배상을 하여야 한다.

4. 발주사무소가 요구하는 공사장의 모든 재료, 정보 및 편의를 발주사무소에 제공하

여야 한다.

④ 계약담당자는 제1항의 규정에 의하여 계약을 해제 또는 해지한 경우 연대보증인 또

는 보증기관이 보증이행을 하는 경우에 기성부분을 검사하여 인수한 때에는 당해 부분

에 상당하는 대가를 계약상대자에게 지급한다.

⑤ 제1항의 규정에 의하여 계약이 해제 또는 해지된 경우 계약상대자는 지급받은 선금

이 있는 경우 미정산 잔액에 대한 약정이자상당액을 가산하여 발주사무소에 상환하여

야 한다. 이 경우 계약담당자는 상환할 금액과 기성부분의 대가를 상계할 수 있다. 다

만, 제36조의 규정에 의하여 하도급대가를 직접 지급하는 경우에는 하도급대가 지급 후 잔액이 있을 때에는 이와 상계할 수 있다.

제38조(사정변경에 의한 계약의 해제 또는 해지) ① 계약담당자는 제37조제1항 각호의 경

우 외에 객관적으로 명백한 발주사무소의 불가피한 사정이 발생한 때에는 계약을 해제

또는 해지할 수 있다.

② 제37조제2항 및 제3항의 규정은 제1항의 규정에 의하여 계약을 해제 또는 해지하는

경우에 이를 준용한다.

③ 계약담당자는 제1항의 규정에 의하여 계약을 해제 또는 해지하는 경우에는 다음 각

호에 해당하는 금액을 37조제3항 각호의 사항을 수행 완료한 날 이후 계약상대자에게

지급하여야 한다.

1. 계약상대자가 시공한 부분 중 대가를 지급하지 아니한 금액

2. 전체공사의 완성을 위하여 계약의 해제 또는 해지일 이전에 투입된 계약상대자의 인력ㆍ자재 및 장비의 철수비용

④ 계약상대자는 선금에 대한 미정산잔액이 있는 경우에는 이를 발주사무소에 상환하

여야 한다. 이 경우 미정산 잔액에 대한 이자는 가산하지 아니한다.

제39조(계약해제 금지) ① 계약상대자는 당해 계약체결 후 계산착오, 오기 등을 이유로 공사의 변경 또는 계약의 해제를 요구할 수 없다. 다만, 발주사무소의 사정으로 공사정지기간이 공기의 100분의 50을 초과하였을 때에는 그러하지 아니하다.

② 제38조제2항 내지 제4항의 규정은 제1항의 규정에 의하여 계약이 해제 또는 해지되

었을 경우에 이를 준용한다.

제40조(공사의 일시정지) ① 공사감독자는 다음 각호의 경우에는 공사의 전부 또는 일부

의 이행을 정지시킬 수 있다. 이 경우 계약상대자는 정지기간 중 선량한 관리자의 주의의무를 해태하여서는 아니된다.

1. 공사의 이행이 계약내용과 일치하지 아니하는 경우

2. 공사의 전부 또는 일부의 안전을 위하여 공사의 정지가 필요한 경우

3. 제18조의 규정에 의한 응급조치의 경우

4. 기타 발주사무소의 필요에 의하여 계약담당자가 지시한 경우

② 공사감독자는 제1항의 규정에 의하여 공사를 정지시킨 경우에는 지체 없이 계약상대자 및 계약담당자에게 정지사유 및 정지기간을 통지하여야 한다.

③ 제1항의 규정에 의하여 공사를 정지시킨 경우 계약상대자는 계약기간의 연장 또는

추가금액을 청구할 수 없다. 다만, 계약상대자의 책임있는 사유로 인한 정지가 아닌

때에는 그러하지 아니하다.

제41조(공사계약에 있어서의 이행보증) ① 계약담당자는 계약상대자가 37조제1항 각호의

1에 해당하는 경우에는 연대보증인 또는 보증기관에 대하여 공사를 완성할 것을 청구

할 수 있다.

② 제1항의 청구가 있을 때에는 연대보증인 또는 보증기관은 지체 없이 그 보증의무를

이행하여야 한다. 이 경우 보증의무를 이행한 연대보증인 또는 보증기관은 계속공사에

있어서 계약상대자가 가지는 계약체결상의 이익을 가진다. 다만, 보증기관은 보증이행

업체를 지정하여 보증의무를 이행하는 대신 공사이행보증서에 정한 금액을 현금으로

발주사무소에 납부함으로써 보증의무이행에 갈음할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의하여 당해 계약을 이행하는 연대보증인 또는 보증기관은 계약금

액 중 보증이행부분에 상당하는 금액을 발주사무소에 직접 청구할 수 있는 권리를 가지며 계약상대자는 연대보증인 또는 보증기관의 보증이행부분에 상당하는 금액을 청구할 수 있는 권리를 상실한다.

④ 계약담당자는 연대보증인이 제1항의 청구를 받고 보증의무를 이행하지 아니한 경우

에는 계약자와 동일한 제재조치를 취할 수 있다.

⑤ 제1항 내지 제3항의 규정 외에 공사이행보증서 제출에 따른 보증의무이행에 대하여

는 정부의 보증제도운용요령을 준용할 수 있다.

제42조(부정당업자의 입찰참가자격제한) 계약상대자 및 연대보증인은 농협이 정한 부정당업자 제한기준에 해당하는 경우 및 정부 또는 정부투자기관에서 입찰참가자격 제한을 받은 경우에는 입찰참가자격이 제한된다.

제43조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무) ① 계약담당자는 계약서의 규정에 의하여 계

약상대자가 제출하는 각종 보고서, 정보 기타 자료 및 이에 응하여 얻은 기술지식의

전부 또는 일부를 발주사무소의 이익을 위하여 복사ㆍ이용 또는 공개할 수 있다.

② 계약상대자는 당해 계약을 통하여 얻은 정보 또는 발주사무소의 비밀사항을 계약이

행의 전후를 막론하고 외부에 누설할 수 없다.

제44조(분쟁의 해결) ① 계약서에서 정한 사항 외에 계약의 수행 중 계약당사자 간에 발생하는 분쟁은 계약당사자가 협의에 의하여 해결한다.

② 제1항의 분쟁이 협의에 의하여 해결되지 아니할 때에는 법원의 판결 또는 중재법에 의한 중재에 의하여 해결한다.

③ 계약상대자는 제1항 및 제2항의 규정에 의한 분쟁기간 중 공사의 수행을 중지하여서는 아니된다.

제45조(공사관련자료의 제출) 계약담당자는 필요하다고 인정할 경우 계약상대자에게 산출

내역의 기초가 되는 단가산출서 또는 일위대가표의 제출을 요구할 수 있으며 이 경우

계약상대자는 이에 응하여야 한다.

접수번호		입찰참가(응모) 신청서 ※ 아래 사항중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.					등록일자
							20 . . .
신청인	상호 또는 법인명칭				법인등록번호
	주 소				전 화 번 호
	대 표 자				주민등록번호
입찰 개요	입찰(지명)공고		대화농협 제		제안서 제출	20. . .
	입찰건명		유통센터 저온저장고 보수공사
입찰보증금	납 부		· 보증금율 : % · 보증금 : 금 원정(￦ ) · 보증금납부방법 :
	납부면제 및 지 급 확 약		· 본인은 낙찰 후 계약 미체결시 귀법인에 낙찰금액에 해당하는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대리인 ․ 사용 인감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. - 성 명 : - 주민등록번호 :			사용인감계	본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)
본인은 위의 번호로 공고한 귀 법인의 제한경쟁 입찰에(협상에 의한 계약 체결) 참가하고자 법인에서 정한 공사입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰 참가신청을 합니다. 붙임서류 1. 사업자등록증사본 1부. 2. 인감증명서 1부 3. 재직증명서(대리인) 1부. 4. 서약서 1부 5. 청렴계약이행각서 1부 6. 기타 공고로서 정한 서류 신 청 인 : (인) 대화농업협동조합장 귀하

<붙임 3>

<붙임 3-1>

서    약    서

당사는 대화농협 유통센터 저온저장고 보수 공사제안 공모에 응모하고자

함에 있어 아래의 내용을 준수․이행할 것을 확약하고 이에 서약서를

제출합니다.

1. 당사는 대화농협의 공모 제안요청서에 기술된 내용 및 절차를 인정하고, 성실히 준수하겠으며, 본 제안요청서을 위해할 시 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.

2. 당사는 제안서의 제반사항을 사실적 근거에 의해 작성하겠으며, 제출하는 서류 및 증빙자료가 부정한 방법으로 작성되었거나 허위 기재사항 등이 확인될 경우 참가자격 박탈 등 법적·재정적·행정적 책임을 감수하겠습니다.

3. 당사는 대화농협에서 제안서의 심사 평가를 위해 시행하는 심사위원회의 구성 및 평가방법, 평가 후 발표된 당선작에 대하여 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 본 서약서에 명시되지 않은 사항은 대화농협의 해석에 따르겠습니다..

2015 년    월    일

업체명 :

주  소 :

대표자 :               (인)

대화농업협동조합장 귀하

<붙임 3-2>

청렴계약이행각서

당사는「부패없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가경쟁력에

중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지협약이 발효되었고

부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호

응하여 귀 법인에서 발주하는 대화농협 유통센터 저온저장고 보수 공사입찰에 참여함에 있어 당사 임직원과 대리인은,

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의,

합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

○ 이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이

사실로 드러날 경우 법인에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격 제한처분을 받은 날

로부터 2년동안 참가하지 않겠으며,

○ 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인

의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우 법인이 시행하는 입찰에 입찰참가

자격제한 처분을 받은 날로부터 1년 동안 참여하지 않고,

○ 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제및공정거래에관한

법률에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 일체의 이

의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 계약관계직원에게 직·간접적으로 금품ㆍ향응

등의 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

○ 이를 위반하여 입찰, 계약의 체결 또는 계약이행과 관련하여 관계직원에게 금품,

향응 등을 제공함으로써 입찰에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나 계약이행

과정에서 편의를 받아 부실하게 시공 또는 제조한 사실이 드러날 경우에는 법인

에서 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 2년동안 참가하지

않겠으며,

○ 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약목적물의

이행을 부실하게 할 목적으로 계약관계직원에게 금품ㆍ향응 등을 제공한 사실이

드러날 경우에는 법인이 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터

1년 동안 참가하지 않고,

○ 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 계약관계직원에게 금품ㆍ향응 등을 제공한

사실이 드러날 경우에는 법인이 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은

날로부터 6개월 동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 계약관계직원에게 금품ㆍ향응 등을 제공한

사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전

에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는

해지하여도 감수하겠으며, 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임ㆍ직원이 계약관계직원에게 금품ㆍ향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정

행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리제보자에 대해서도 일체의 불

이익 처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며,

낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 이행하고 입찰참가자격제한, 계약해지

등 법인의 조치와 관련하여 당사자가 법인을 상대로 손해배상을 청구하거나 당

사를 배제하는 입찰에 관하여 민·형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약

합니다.

20   .    .    .

서약자  업체명 :

대표자 :                   (인)

대화농업협동조합장 귀하

<붙임 4> 표지 양식

심 사 제 안 서

(객관적 지표)

20  .   .    .

○○○(회사명)

주의사항

1. A4, 백색아트지(150g/㎡, 무코팅)

2. 2부 제출

<붙임 4-1>

심사제안서 작성목차 및 내용

1. 회사의 일반현황

2. 기술인력 보유 현황

○ 공고일 이전 입사한 자로 본 사업에 참여할 기술자만 작성

※ 기술인력 등급 구분기준 <붙임 4--3-1>에 의거 작성

3. 수행경험(실적)

○ 유사용역 및 공사수행 실적은 공고일 기준 최근 3년 이내 준공실적에 한하며, ‘평가기준’에 따라 평가됨

○ 해당기관의 확인을 받아 제출하여야 함

4. 회사의 경영상태 등

○ 신용평가등급확인서

※ 공통사항

○ 해당사항이 없는 업체도 별도 “해당 없음” 사실을 제출하여야 함

<붙임 4-2>

회사의 일반현황

1. 기본사항

회 사 명		대표자명
주 소		관할세무서
전화번호		팩스번호
사업자번호		업 종
면허/허가/ 등록증보유현황
총종업원수		매출액 (20 년)
자 본 금

2. 회사연혁

연월일	내 용	비 고

주) 1. 자격보유회사는 면허증, 허가증, 등록증 사본 첨부

2. 제작공장 보유시에는 공장등록증 사본 첨부

3. 특허보유현황은 관련 특허 개수를 면허증, 허가증, 등록증 보유현황에 표시 하고 특허증 사본 첨부

<붙임 4-3>

기술인력 보유현황

구분	일련 번호	등 급	기 술 분 야	자 격 종 목	성 명	등록일 (취득일)	경 력 기 간	등록번호	붙임

주) 1. 기술자의 구분은 엔지니어링기술진흥법 제10조 규정에 의한 엔지니어링사업 대가의 기준에 따르며 <붙임 4-3-1>참조, 공고일 이전 입사한 자로 본 사업에 참여할 기술자만 명기

2. 분야별 기술자 기재순서는 평가시 참고할 수 있도록 순위별로 기재

3. 해당협회 기술자경력수첩, 자격증, 최종학교 졸업증명서, 경력증명서 첨부

<붙임 4-3-1>

기술인력 등급 구분기준

구 분	기술자격 및 경험기준	학력 및 경험기준
특 급 기술자	기 술 사	∘박 사 : 3년 이상 ∘석 사 : 9년 이상 ∘학 사 : 12년 이상 ∘전문대학 졸 : 15년 이상
	∘기사자격 : 10년이상 ∘산업기사 : 13년이상
고 급 기술자	∘기사자격 : 7년이상 10년미만 ∘산업기사 : 10년이상 13년미만	∘박 사 ∘석 사 : 6년이상 9년미만 ∘학 사 : 9년이상 12년미만 ∘전문대학 졸 : 12년이상 15년미만 ∘고등학교 졸 : 15년이상
중 급 기술자	∘기사자격 : 4년이상 7년미만 ∘산업기사 : 7년이상 10년미만	∘석 사 : 3년이상 6년미만 ∘학 사 : 6년이상 9년미만 ∘전문대학 졸 : 9년이상 12년미만 ∘고등학교 졸 : 12년이상 15년미만
초 급 기술자	∘기사자격을 가진 자 ∘산업기사자격을 가진 자	∘석사 학위자 ∘학사 학위자 ∘전문대학 졸업자 ∘고등학교 졸 : 3년 이상

<붙임 4-4>

수행경험(실적) 집계표

구 분	공 사 명		공 사 기 간	준공금액	발 주 처	실적확인이 가능한 발주 기관의 전화	비 고
①최대실적 (1건)
	소 계
②기타실적
	소 계
합 계 (①+②)

주)  1. 입찰공고일 기준 최근 3년 이내에 정부 및 지방자치단체, 공공기관(공공기관 운영에 관한 법률에서 정하는 기관), 농․축협에서 발주한 저온저장고 공사로 (완료실적)을 최근 연도순으로 기재

2. 공사실적증명서(해당기관발행)

(단일실적 최대실적 증명에 대한 건축물관리 대장 첩부)

<붙임 4-4-1>

이행실적확인서

신청인	업체명(상호)				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				제 출 처
	증명서용도	입찰참가신청용
	공사범위 및 기준 (면적,금액등)
공사이행 실적내용	공 사 명				구 분
	공 사 개 요
	계 약 번 호	계약 일자	계약 기간	규모	이 행 실 적		비 고
					비 율	실 적
증명서 발급기관	위 사실을 증명함. 년 월 일
	기관명 : (인) (전화번호 : ) (FAX번호 : )
	주 소 :
	발급부서 :				담당자 :
대화농업협동조합장 귀중

<붙임 5> 표지양식

사 업 제 안 서

20  .   .    .

○○○(회사명)

<붙임 5-1>

공사제안서 작성목차 및 내용

Ⅰ. 제안요지 : 과업내용을 명확히 이해하고 본 제안의 목적, 특징 및 장점, 기대효과 등을 요약 기술

Ⅱ. 제안업체현황 : 일반현황, 조직 및 인원, 주요공사내용, 주요공사실적

Ⅲ. 사업수행계획

1. 수행조직 및 업무분장

가. 업무수행조직

나. 투입인원 업무분장

2. 투입인력 및 이력사항

가. 투입인력 총괄표

나. 투입인력별 이력사항 (주임급 이상)

3. 공사추진방법 (자세히)

가. 공정별 추진방법

나. 부분별 추진방법

다. 단계별 추진방법

4. 전체 추진일정

IV. 기타 사항

1. 공사관리 방안

가. 보고체계 및 계획 : 공사기간동안의 보고 및 단계별 검토계획

나. 품질관리 방안 : 품질 유지 관리계획

2. 사후관리 방안

3. 기타 관련사항

Ⅴ. 기타사항

<붙임 6>

입 찰 가 격 제 안 서
입찰내용	공 고 번 호	대화농협	제안서제출 마 감 일 자		20 년 월 일
	건 명	유통센터 저온저장고 보수공사
	금 액	금 원정(￦ ) 부가세포함
	준공(납품)년월일	착공일부터 30일
입찰자	상호또는법인명칭			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			주민등록번호
본인은 대화농협에서 정한 유통센터 저온저장고 보수공사의 제안 요청서 및 입찰유의서에 따라 응찰하며, 이 입찰이 귀 법인에 의하여 수락되면 공사계약일반조건․계약특수조건․설계서(물품규격서) 등에 따라 위의 입찰금액으로 준공(납품)을 완성(제조․납품)할 것을 확약하며 입찰서를 제출합니다. 20 . . . 입 찰 자 : (인) 대화농업협동조합장 귀하