[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

경제체육과/체육시설

②담당자

(연락처)

김종율 (행정7급)

(330-2723)

③정책사업명

용평체육공원 조성사업

④선정기준

30억이상 예산 건설사업

⑤사업기간

‘15. 1월 ~ ’16. 12월

⑥주요내용

□ 사업개요

○ 위    치 : 평창군 용평면 장평리 산266-2번지 일원

○ 사업규모 : 부지 47,047㎡, 축구장, 다목적구장, 부대시설

□ 사업비 현황

○ 총사업비 : 7,600백만원(국 1,650, 도 770, 군 5,180)

(백만원)

재원별	총사업비	2014년	2015년	2016년	비 고
계	7,600	960	2,750	3,890
국 비	1,650	-	825	825
도 비	770	-	385	385
군 비	5,180	960	1,540	2,680

□ 추진상황

○ 인·허가 용역 : ‘15. 4. 13. ~ ’15. 5. 27.

□ 향후계획

○ 인·허가 행정절차 추진 : ‘15. 4월 ~ ’15. 7월

○ 실시설계 : ‘15. 5월 ~ ’15. 9월

○ 공사착수 : ‘15. 10월