[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

안전건설과/도로

②담당자

(전화번호)

어성용(시설6급)

(330-2484)

③정책사업명

군도 및 농어촌도로 확포장사업

④선정기준

30억이상 예산 건설사업

⑤사업기간

2013~2016

⑥주요내용

□ 사업목적

협소한 도로를 확포장하여 도로이용자 통행불편 해소 및

원활한 농산물 반출로 지역주민 소득증대 기여

□ 사업개요

노선명	위 치	사업량 (km)	사업비(백만원)					비고
			계	기 투자	‘14년	‘15	‘16년이후
계	4 개소		6,986	1,209	1,150	1,858	2,769
군도1호선	평창읍 종부3리	1.0	2,452	-	700	500	1,252	설계 및 보상완료
군도8호선	용평면 장평리	1.0	3,226	1,209	-	500	1,517	설계완료
미탄201호	미탄면 평안1리	0.7	608	-	-	608	-	성장촉진 국비지원
대관령206호	대관령면 횡계리	0.2	700		450	250	-	마무리 구 간

□ 추진계획

○ 설계 및 행정절차 협의 : ‘15. 3. 31까지

○ 편입토지 및 지장물 보상 : ‘15. 4. 10까지

○ 공사 착공  : ‘15. 4. 15

○ 공사 준공 :  ‘15. 7 ∼11. 30

- 신규발주보다는 기 시행중인 노선의 마무리로 추진코자 함.