강원도 고시 제2015 - 224호

2018 평창동계올림픽대회

「대회관련시설의 설치․이용 등에 관한 계획」변경 승인 고시(5차)

1.『2018 평창 동계올림픽대회 및 장애인동계올림픽대회 지원 등에 관한 특별법』제27조 제4항 및 동법 시행령 제15조 규정에 의거 2018 평창 동계올림픽대회의「대회관련시설의 설치․이용 등에 관한 계획」에 대한 변경 승인사항을 다음과 같이 고시합니다.

2. 관계 도서는 강원도청 동계올림픽본부 시설관리과, 강릉시청 동계올림픽지원단, 평창군청 동계올림픽추진단, 정선군청 동계올림픽지원단에 비치하고 일반인에게 열람할 수 있도록 합니다.

2015.  6.  12.

강  원  도  지  사  (직인생략)

1. 사업의 기본방향 및 개요

가. 사업의 개요

○ 사업 목적

- 2018년 제23회 평창 동계올림픽대회를 성공적으로 개최함으로써      국민체육 진흥 및 국가발전에 이바지하고,

- 동계올림픽 개최 협약서, IOC 제규정 이행 및 대회 운영을 위한      경기 시설을 적기에 건립하기 위함

○ 사업기간 : 사업계획 고시일로부터 2018. 12. 31까지

○ 사 업 비

· (변경) 115,381억원(국비 76,071, 지방비 4,279, 민자등 35,031)

· (당초) 114,955억원(국비 75,752, 지방비 4,172, 민자등 35,031)

나. 대회 개요

○ 대회명칭 : 2018 평창 동계올림픽 및 장애인 동계올림픽대회

○ 영문명칭 : 2018 PyeongChang Olympic and Paralympic Winter Games

○ 대회기간 : 2018. 2. 9 ~ 2. 25(17일간)

※ 장애인 동계올림픽 : 2018. 3. 9 ~ 3. 18(10일간)

○ 주    최 : 국제올림픽위원회(IOC)

○ 주    관 : 대회조직위원회

○ 참가규모 : 80여개국 선수․임원, IOC패밀리, 보도진 등 26천여명

○ 경기종목 : 7경기 15개 종목 98개 세부종목

2. 대회관련시설을 설치·이용하는 지역의 위치 및 규모

가. 사업 위치 : 강원도 평창군, 강릉시, 정선군 관내

나. 사업 규모 : 대회관련시설 49개소

○ 대회 직접관련시설 : 20개소

(변경)경기장수 : 13개소, 8,063억원(국비 6,047, 지방비 2,016)

- (당초)경기장수 : 13개소, 7,637억원(국비 5,728, 지방비 1,909)

- 대회지원시설 : 7개소, 12,639억원(국비 558, 지방비 341, 민자 등 11,740)

○ 대회 여건조성시설 : 29개소

- 접근교통망 : 28개노선

· 94,079억원(국비 69,106, 지방비 1,682, 민자 등 23,291)

- 용수공급시설 : 1개소

· 600억원(국비 360, 지방비 240)

3. 부지 조성 계획

가. 알펜시아 클러스터

1) 경기장 및 선수촌·미디어촌

대회관련시설	위치	부지면적(㎡)	도시계획 사항	비고
스키점프 경기장	평창군 대관령면 알펜시아리조트 내	124,700	계획관리지역	관광단지
크로스 컨트리 경기장		106,663	계획관리지역
바이애슬론 경기장		79,770	계획관리지역
봅슬레이/스켈레톤/루지 경기장		121,201	계획관리·농림지역
선수촌		431,000	계획관리지역

2) 스노보드/프리스타일스키 경기장

대회관련시설	위치	부지면적(㎡)	도시계획 사항	비고
스노보드 / 프리스타일스키 경기장	평창군 봉평면 보광리조트 내	701,420	계획관리지역	관광단지

3) 알파인 경기장(중봉)

대회관련시설	위치	부지면적(㎡)	도시계획 사항	비고
알파인 경기장	정선군 북평면 숙암리	2,608,000	농림지역	산림유전자보호림 일부 포함

대회관련시설	위치	부지면적(㎡)	도시계획 사항	비고
알파인경기장	평창군 대관령면 용평리조트 내	745,722	계획관리지역	관광단지

4) 알파인 경기장(용평)

대회관련시설	위치	부지면적(㎡)	도시계획 사항	비고
급수체계 구축사업	평창군 대관령면 횡계리(소황병산계곡)	417,000	농림·자연환경보전지역	-

5) 급수체계 구축사업(평창)

나. 코스탈 클러스터

대회관련시설	위치	부지면적(㎡)	도시계획 사항	비고
스피드스케이팅 경기장	강릉체육시설단지 내	406,472	자연녹지지역	운동장
피겨/쇼트트랙 경기장
아이스하키Ⅰ 경기장
컬링경기장	강릉시 교동 강릉빙상장	27,212	자연녹지지역	운동장
선수촌 / 미디어촌	강릉시 교동 유천택지 내	125,000	주거지역

1) 빙상경기장 및 선수촌·미디어촌

대회관련시설	위치	부지면적(㎡)	도시계획 사항	비고
아이스하키Ⅱ 경기장	강릉시 내곡동 관동대학교 내	51,900	자연녹지지역	학교

2) 아이스하키 Ⅱ 경기장

3) 도핑컨트롤 센터

대회관련시설	위치	부지면적(㎡)	도시계획 사항	비고
도핑컨트롤센터	강릉시 대전동 강릉과학산업지방단지 내 KIST강릉 분원	165,290	준공업지역

4. 대회관련시설의 조성계획

가. 경기장

○ 총 괄

구 분			신설 및 보완	사 업 계 획		비 고
				위치 / 규모
합 계			13개소
설상 종목	소 계		8개소
	알파인	활강	신설	정선 중봉	L = 3,360m
		슈퍼대회전			L = 2,560m
		대회전	기존	용평리조트	L = 1,191m
		회전			L = 583m
	봅슬레이/스켈레톤/루지		신설	알펜시아리조트	L = 1,400m
	프 리 스타일	모글	보완	보광리조트	L = 250m
		에어리얼			L = 123m
		스키크로스			L = 1,275m
		하프파이프			L = 265m
		슬로프스타일			L = 617m
	스 노 보 드	대회전			L = 581m
		스노보드크로스			L = 1,277m
		하프파이프			L = 265m
		회전			L = 377m
		슬로프스타일			L = 617m
	스키점프		기존	알펜시아리조트	K125, K98 (K60, K25, K15)
	크로스 컨트리				L = 7,500m
	바이애슬론				L = 4,000m
빙상 종목	소 계		5개소
	스피드스케이팅		신설	강릉체육시설 단지	8,000석
	피겨/쇼트트랙				12,000석
	아이스하키Ⅰ				10,000석
	아이스하키Ⅱ			관동대학교	6,000석
	컬링		보완	강릉빙상장	3,500석

1) 설상경기장

가) 중봉 알파인 경기장

구 분	내 용	구 분	내 용
유치종목	알파인 (활강, 슈퍼대회전, 복합)	관람석	12,000석 (좌석 6,000, 입석 6,000)
		주차대수	승용 2,150, 버스 200
대지면적	2,608,000 ㎡
		주요 경기시설	남자코스 (L:3,400m, 표고차 880m) 여자코스 (L:2,540m, 표고차 780m)
운영건물 연면적	4,636 ㎡
운영건물 층수	2층
		기타시설	관람석, 곤돌라, 리프트

나) 봅슬레이/스켈레톤/루지 경기장

구 분	내 용	구 분	내 용
유치종목	봅슬레이, 스켈레톤, 루지	관람석	11,000석 (좌석 1,000, 입석 10,000)
대지면적	177,000㎡	주차대수	승용 78, 버스 52
운영건물 연면적	2,863 ㎡	주요 경기시설	트랙길이 L:1,200~1,650m
운영건물 층수	-	기타시설	스타트/피니쉬 하우스 냉각플랜트 및 장비창고 등

다) 스노보드/프리스타일스키 경기장

구 분	내 용	구 분	내 용
유치종목	프리스타일 스키 (모글, 에어리얼, 스키 크로스, 하프파이프, 슬로프 스타일) 스노보드 (크로스, 하프파이프, 대회전, 회전, 슬로프 스타일)	관람석	14,000석 (좌석 4,000, 입석 10,000)
대지면적	701,420 ㎡	주차대수	승용 1,100, 버스 760
		주요 경기시설	모글(L:250m),에어리얼(L:123m), 스키크로스(L:1,275m)
운영건물 연면적	2,090 ㎡
			스노보드크로스(L:1,277m), 대회전(L:581m), 하프파이프(L:265m)
운영건물 층수	3층
		기타시설	-

라) 스키점프장

구 분	내 용	구 분	내 용
유치종목	스키점프, 노르딕 복합	관람석(입석)	20,000석 (좌석 11,000, 입석 9,000)
대지면적	124,700 ㎡	주차대수	승용 49, 버스 38
운영건물 연면적 / 층수	10,746 ㎡	주요 경기시설	점핑힐스 시합용 2EA (K125, K98) 점핑힐스 연습용 2EA (K60, K35, K15)
전망타워 연면적 / 층수	4층	기타시설	모노레일 330m, 20인/대

마) 바이애슬론 경기장

구 분	내 용	구 분	내 용
유치종목	바이애슬론	관람석(입석)	13,000석 (좌석 5,000, 입석 8,000)
대지면적	79,770 ㎡	주차대수	승용 246, 버스 102
운영건물 연면적	2,853 ㎡	주요 경기시설	사격장, 트랙 (L:4㎞, W:8m)
운영건물 층수	2층	기타시설	-

바) 크로스컨트리 경기장

구 분	내 용	구 분	내 용
유치종목	크로스컨트리, 노르딕 복합	관람석(입석)	13,000석 (좌석 5,000, 입석 8,000)
대지면적	106,663 ㎡	주차대수	승용 137
운영건물 연면적	3,607 ㎡	주요 경기시설	트랙 (L:7.5㎞, W:8m)
운영건물 층수	2층	기타시설	-

사) 용평 알파인 경기장

구 분	내 용	구 분	내 용
유치종목	알파인 (대회전, 회전)	관람석	18,000석 (좌석 8,000, 입석 10,000)
대지면적	745,722 ㎡	주차대수	승용 50, 버스 10
운영건물 연면적	2,090 ㎡	주요 경기시설	대회전코스 (L:1,191m) 회전코스 (L:583m)
운영건물 층수	3층	기타시설	Finish Area 100m X 100m

아) 스피드스케이팅 경기장

구 분	내 용	구 분	내 용
유치종목	스피드스케이팅	관람석	8,000석
대지면적 (체육시설단지)	406,472 ㎡	주차대수	승용 285, 버스 10
운영건물 연면적	37,485 ㎡	주요 경기시설	아이스링크(더블트랙)
운영건물 층수	2층	기타시설	-

자) 피겨/쇼트트랙 경기장

구 분	내 용	구 분	내 용
유치종목	피겨스케이팅 / 쇼트트랙	관람석	12,000석
대지면적 (체육시설단지)	406,472 ㎡	주차대수	승용 124, 버스 28
운영건물 연면적	29,621 ㎡	주요 경기시설	아이스링크 2면
운영건물 층수	4층	기타시설	연습 링크장

차) 아이스하키 Ⅰ 경기장

구 분	내 용	구 분	내 용
유치종목	아이스하키 (남자)	관람석	10,000석
대지면적 (체육시설단지)	406,472 ㎡	주차대수	승용 143, 버스 26
운영건물 연면적	23,523 ㎡	주요 경기시설	아이스링크 1면
운영건물 층수	4층	기타시설	연습 링크장

카) 아이스하키 Ⅱ 경기장

구 분	내 용	구 분	내 용
유치종목	아이스하키 (여자)	관람석	6,000석
대지면적	51,900 ㎡	주차대수	승용 98, 버스 78
운영건물 연면적	12,553 ㎡	주요 경기시설	아이스링크 1면
운영건물 층수	4층	기타시설	연습 링크장

타) 컬링 경기장

구 분	내 용	구 분	내 용
유치종목	컬링	관람석	3,500 석
대지면적	27,212 ㎡	주차대수	승용 170, 버스 18
운영건물 연면적	17,213 ㎡	주요 경기시설	컬링시트 4개 아이스링크 2면
운영건물 층수	3층	연습경기장	2,591 ㎡

나. 진입도로

○ 총 괄

구 분		사 업 명 (구 간)	사 업 량 (정비유형)	비 고
합 계		28개
광역 간선 교통망	소 계	6개
	공 항	양양공항	탑승교 1개 추가
	철 도	원주~강릉	복선 L = 122.6km
		경의선~공항철도 연계시설	복선전철 및 연결통로 등
	고속국도	영동고속도로 임시 IC	임시 IC신설
		제2영동고속도로(광주~원주)	L = 56.95km (4차로)
		동홍천~양양 고속도로	L = 71.70km (4차로)
보조 간선 교통망	소 계	6개
	국도 6호	둔내~무이	L = 22.5km (2차로)
		무이~장평	L = 5.5km (4차로)
		장평~간평	L = 24.8km (4차로)
		두능~연곡	L = 12.66km (4차로)
	국도 59호	나전~막동	L = 17.0km (2차로)
		막동~마평	L = 3.3km (2차로)
경기장 진입 교통망	소 계	16개
	국도 7호	강릉원주대~죽헌교차로	L = 1.5km (4차로 확장)
	지방도408호	면온IC~보광	L = 5.5km (2차로)
	지방도456호	진부~횡계IC	L = 7.2km (2차로)
	지방도456호	월정삼거리~차항	L = 7.2km (4차로 확장)
	군도12호	유천~수하	L = 1.75km (4차로)
	군도12호	유천~용산	L = 2.9km (2차로)
	군도13호	싸리재~용산	L = 4.2km (4차로)
	도암205호	횡계~횡계	L = 2.9km (4차로)
	도암209호	용산~수하	L = 1.36km (2차로)
	내부연결도로	용평알파인경기장 진입도로	L = 2.36km (2차로)
		진부역 진입도로	L = 8.76km (2차로)
		올림픽파크 진입도로	L = 1.26km (2차로)
		진부IC~호명교	L = 2.65km (2,4차로 확장)
		차항~횡계	L = 3.5km (2차로)
		선수촌~경기장	L = 2.2km (2차로 신설 및 4차로 확장)
		강릉역~경기장	L = 0.94km (4차로 확장)

1) 진입도로

가) 광역간선도로망

① 양양국제공항

· 위    치 : 강원도 양양군 손양면 동호리 산28-1

· 사업내용 : 활주로 연장 및 지원·편의시설 확충

· 사업규모 : 탑승교 1개소 추가 신설

· 총사업비 : 7억원(국비)

· 사업기간 : '16 ~ '17

② 원주~강릉 철도

· 위    치 : 시점 - 강원도 원주시(서원주역), 종점 - 강원도 강릉시(강릉역)

· 사업내용 : 원주 ~ 강릉 철도건설

· 사업규모 : 총 연장 122.6㎞

· 사업기간 :  ‘12 ~ ’18(개통 ‘17.12월)

· 총사업비 :  38,962억원(국비)

③ 경의선~공항철도 연계시설

· 위    치 : 시점 - 인천국제공항, 종점- 수색역

· 사업내용 :

- 수색연결선(신경의선 ∼ 공항철도) 2.2km 복선전철 신설

- 서울역 연결통로(공항철도 ↔지하철 1․4호선) 300m 신설

- 공항철도(고양～인천국제공항 45.1km) 시스템 개량(고속화)

- 정거장(검암, 인천국제공항)개량

· 사업기간 : ‘10 ~ ’13

· 총사업비 : 3,100억원(국비)

④ 올림픽 임시 IC 신설

· 위    치 : 강원도 평창군 대관령면 진부, 횡계 IC 사이 지점

· 사업내용 : 평창올림픽 IC(임시) 신설

· 사업규모 : 출입시설 1개소

· 사업기간 : ‘14 ~ ’17

· 총사업비 : 312억원(국비)

⑤ 제2영동고속도로(광주~원주)

· 위    치 : 시점 - 경기도 광주시 초월면, 종점- 강원도 원주시 가현동

· 사업내용 : L = 56.95km(왕복 4차로), BTO(Build-Transfer Operate) 방식 추진

· 사업기간 : ‘11 ~ ’16

· 총사업비 : 1조 5,397 억원(국비 : 3,483 억원, 민자 : 1조 1,914 억원)

⑥ 동홍천~양양 고속도로

· 위    치 : 시점 - 동홍천, 종점- 양양

· 사업내용 : L = 71.7km

· 사업기간 : ‘08 ~ ’15

· 총사업비 : 2조 3,841 억원(국비 : 1조 2,605 억원, 민자 1조 1,236억원)

나) 보조간선교통망

① 국도 6호선

□ 둔내 - 무이

· 위    치 : 횡성군 둔내면 현천리 ～ 평창군 봉평면 무이리

· 사업내용 : 2차로 개량

· 사업규모 : L = 22.5㎞

· 사업기간 : ‘12 ～ ’17

· 총사업비 : 1,597억원(국비)

□ 무이 - 장평

· 위    치 : 평창군 봉평면 무이리 ～ 평창군 장평면 장평리

· 사업내용 : 4차로 확장

· 사업규모 : L = 5.5㎞

· 사업기간 : ‘12 ～ ’17

· 총사업비 : 781억원(국비)

□ 장평 - 간평

· 위    치 : 평창군 장평면 장평리 ～ 평창군 진부면 간평리

· 사업내용 : 4차로 확장

· 사업규모 : L = 24.8㎞

· 사업기간 : ‘12 ～ ’17

· 총사업비 : 1,760억원(국비)

□ 두능 - 연곡

· 위    치 : 강원도 강릉시 연곡면 삼산리 ～ 강릉시 연곡면 방내리(국도 6호선)

· 사업내용 : 도로확장 2차로 → 4차로

· 사업규모 : L= 12.66km, 4차로(폭 20.0m)

· 사업기간 : ‘04 ～ ’14

· 총사업비 : 1,065 억원(국비)

② 국도 59호선

□ 나전 – 막동

· 위    치 : 평창군 진부면 막동리 ～ 정선군 북평면 나전리

· 사업내용 : 2차로 개량

· 사업규모 : L = 17㎞

· 사업기간 : ‘11 ～ ’17

· 총사업비 : 1,248억원(국비)

□ 막동 – 마평

· 위    치 : 정선군 진부면 막동리 ～ 정선군 진부면 마평리

· 사업내용 : 2～4차로 개량

· 사업규모 : L = 3.3㎞

· 사업기간 : ‘13 ～ ’17

· 총사업비 : 402억원(국비)

다) 경기장 진입도로

① 국도 7호선

□ 강릉원주대 - 죽헌교차로

· 위    치 : 강릉시 강릉원주대 ~ 죽헌교차로

· 사업내용 : 2→4차로 시설개량

· 사업규모 : L = 1.5km

· 사업기간 : ‘15 ~ ’17

· 총사업비 : 211억원(국비 148억원, 지방비 63억원)

② 지방도 408호선

□ 면온IC - 보광

· 위    치 : 평창군 봉평면 면온리 ~ 무이리

· 사업내용 : 2차로 시설개량

· 사업규모 : L = 5.5km

· 사업기간 : ‘12 ~ ’16

· 총사업비 : 562억원(국비 393억원, 지방비 169억원)

③ 지방도 456호선

□ 진부 - 횡계IC

· 위    치 : 평창군 진부면 간평리 ~ 대관령면 횡계리

· 사업내용 : 2차로 시설개량

· 사업규모 : L = 7.2㎞

· 사업기간 : ‘12 ~ ’16

· 총사업비 : 330억원(국비 231억원, 지방비 99억원)

④ 지방도 456호선

□ 월정삼거리 - 차항

· 위    치 : 평창군 진부면 간평리 ~ 대관령면 차항리

· 사업내용 : 2→4차로 시설개량

· 사업규모 : L = 7.2㎞

· 사업기간 : ‘15 ~ ’17

· 총사업비 : 619억원(국비 433억원, 지방비 186억원)

⑤ 군도 12호

□ 유천 - 수하

· 위    치 : 평창군 대관령면 유천리 ~ 수하리

· 사업내용 : 4차로 확장

· 사업규모 : L = 1.75㎞

· 사업기간 : ‘12 ~ ’16

· 총사업비 : 235억원(국비 165억원, 지방비 70억원)

⑥ 군도 12호

□ 유천 - 용산

· 위    치 : 평창군 대관령면 유천리 ~ 용산리

· 사업내용 : 2차로 확장

· 사업규모 : L = 2.9㎞

· 사업기간 : ‘15 ~ ’17

· 총사업비 : 149억원(국비 104억원, 지방비 45억원)

⑦ 군도 13호

□ 싸리재 - 용산

· 위    치 : 평창군 대관령면 유천리 ~ 용산리

· 사업내용 : 4차로 확포장

· 사업규모 : L = 4.2㎞

· 사업기간 : ‘12 ~ ’16

· 총사업비 : 519억원(국비 363억원, 지방비 156억원)

⑧ 농어촌도로 205호

□ 횡계 - 횡계

· 위    치 : 평창군 대관령면 용산리 ~ 수하리

· 사업내용 : 4차로 신설

· 사업규모 : L = 2.9㎞

· 사업기간 : ‘12 ~ ’16

· 총사업비 : 335억원(국비 234억원, 지방비 101억원)

⑨ 농어촌도로 209호

□ 용산 - 수하

· 위    치 : 평창군 대관령면 횡계리 ~ 수하리

· 사업내용 : 2차로 신설

· 사업규모 : L = 1.36㎞

· 사업기간 : ‘12 ~ ’16

· 총사업비 : 152억원(국비 106억원, 지방비 46억원)

⑩ 용평 알파인경기장 진입도로

□ 용산 - 용평알파인경기장

· 위    치 : 평창군 대관령면 용산리

· 사업내용 : 2차로 신설

· 사업규모 : L = 2.36㎞

· 사업기간 : ‘12 ~ ’16

· 총사업비 : 128억원(국비 90억원, 지방비 38억원)

⑪ 진부역 진입도로

□ 호명 - 용산

· 위    치 : 평창군 진부면 호명리 ~ 대관령면 용산리

· 사업내용 : 2차로 신설

· 사업규모 : L = 8.76㎞

· 사업기간 : ‘12 ~ ’16

· 총사업비 : 1,214억원(국비 850억원, 지방비 364억원)

⑫ 올림픽파크 진입도로

□ 강릉종합운동장 - 난설헌로

· 위    치 : 강원도 강릉시 교동 강릉종합운동장~난설헌로

· 사업내용 : 2차로 신설

· 사업규모 : L = 1.26㎞

· 사업기간 : ‘13 ~ ’16

· 총사업비 : 77억원(국비 54억원, 지방비 23억원)

⑬ 진부IC ~ 호명교

□ 진부IC - 호명교

· 위    치 : 평창군 진부면 하진부리~호명리

· 사업내용 : 4차로 및 2차로 확장(지하차도 포함)

· 사업규모 : L = 2.65㎞

· 사업기간 : ‘15 ~ ’17

· 총사업비 : 307억원(국비 215억원, 지방비 92억원)

⑭ 차항 ~ 횡계

□ 차항 - 횡계

· 위    치 : 평창군 대관령면 차항리~횡계리

· 사업내용 : 2차로 신설

· 사업규모 : L = 3.5㎞

· 사업기간 : ‘15 ~ ’17

· 총사업비 : 287억원(국비 201억원, 지방비 86억원)

⑮ 선수촌 ~ 경기장

□ 선수촌 - 경기장

· 위    치 : 강릉시 교동~포남동

· 사업내용 : 2차로 신설, 2→4차로 확장

· 사업규모 : L = 2.2㎞

· 사업기간 : ‘15 ~ ’17

· 총사업비 : 181억원(국비 127억원, 지방비 54억원)

⑯ 강릉역 ~ 경기장

□ 강릉역 - 경기장

· 위    치 : 강릉시 교동(강릉역)~포남동(경기장)

· 사업내용 : 4차로 신설, 보행로 신설

· 사업규모 : L = 0.94㎞

· 사업기간 : ‘15 ~ ’17

· 총사업비 : 301억원(국비 211억원, 지방비 90억원)

다. 부대시설

○ 총 괄

구 분		신설 및 보완	위치 / 규모
선수촌	알펜시아 클러스터	신설	알펜시아리조트	954세대 / 3,500bed
	코스탈 클러스터		유천택지 내	575세대 / 2,640bed
	중봉대체선수촌		중봉알파인스키장	200실
미디어촌	알펜시아 클러스터	기존	알펜시아리조트	4,190실
	코스탈 클러스터	신설	유천택지 내	2,625세대 / 6,285실
도핑컨트롤센터	코스탈 클러스터	기존	KIST강릉분원	기존시설 활용
급수체계 구축사업	알펜시아 클러스터	신설	대관령면 횡계리	총 저수량 194.2만㎥, 상수도시설 1식
올림픽 개·폐회식장 건립		신설	평창 대관령면 횡계리 고원훈련장 일원	40,000석 (개폐회식장, 성화대, 메달프라자 등)

1) 선수촌·미디어촌

가) 알펜시아 클러스터 선수촌

· 위    치 : 강원도 평창군 대관령면 알펜시아리조트 내(군인공제회)

· 사업내용 : 선수 및 임원 숙소건설

· 기본방향 : 휴양콘도미니엄 임대사용

· 주변현황 : 알펜시아 클러스터 경기장과 인접하여 접근성 우수

· 시설규모 : 3개 단지, 954세대(85㎡초과)

· 총사업비 : 6,385억원(민자)

· 사업기간 : '13 ~ '17

· 부지조성계획

구분		선수촌
		면적(m²)	구성비(%)
부지면적		384,107	100
	주택건설용지	129,509	33.7
	상업시설용지	93,168	24.3
	공공시설용지	161,430	42

· 토지이용계획

구분		면적	구성비
			주택건설용지	공공주택건설용지	임대주택건설용지
합 계		384,107	100	-	-
	주택건설용지	129,509	33.7	-	-
	상업시설용지	93,168	24.3	-	-
	공공시설용지	161,430	42	-	-

· 건축계획

구 분		내 용
주택비율		-
용적률		89.3%(133,216㎡/149,247㎡)
평균층수		8~10층 (3개단지 20동)
세대구성		호수	구성비(%)
계		954세대	100.0
전용면적	60m²	-	-
	60~85m²	-	-
	85m²초과	954세대	100

나) 코스탈 클러스터 선수촌·미디어촌

· 위    치 : 강원도 강릉시 유천택지개발단지 내(LH)

· 사업내용 : 선수 및 임원, 미디어 관계자 숙소건설

· 기본방향 : LH공사가 건설중인 공동주택 임대사용

· 주변현황 : 경기장과 접근성 10분 이내로 우수

· 시설규모

- 선수촌 : 575세대(60~85㎡ 575세대)

- 미디어촌 : 2,625세대(60㎡ 이하 2,255세대, 60~85㎡ 370세대)

· 총사업비

- 선수촌 : 1,780억원(민자)

- 미디어촌 : 3,150억원(민자)

· 사업기간 : '13 ~ '17

· 부지조성계획

구분		선수촌․미디어촌
		면적(m²)	구성비(%)
부지면적		670,098	100.0
	주택건설용지	322,539	47.8
	상업시설용지	-	-
	공공시설용지	347,559	52.2

· 토지이용계획

구분		면적	구성비
			주택건설용지	공공주택건설용지	임대주택건설용지
합 계		670,098	-	-	-
	주택건설용지	322,539	52,408(16.2%)	202,156(62.7%)	62,365(21.1%)
	상업시설용지	-	-	-	-
	공공시설용지	347,559	-	-	-

· 건축계획

(코스탈 클러스터 선수촌 건축계획)

구 분		내 용
주택비율		100%
용적률		160%
평균층수		15~20
세대구성		호수	구성비(%)
계		575	100.0
전용면적	60m²	-	-
	60~85m²	575	100.0
	85m²초과	-	-

(코스탈 클러스터 미디어촌 건축계획)

구 분		내 용
주택비율		100%
용적률		160%
평균층수		15~20
세대구성		호수	구성비(%)
계		2,625	100.0
전용면적	60m²	2,255	85.9
	60~85m²	370	14.1
	85m²초과	-	-

2) 도핑컨트롤센터

· 위    치 : KIST강릉분원

· 사업내용 : 관련장비 구입후 기존시설 활용

· 기본방향 : 시료채취를 위하여 선수촌과 모든 경기시설에 도핑검사실을                             설치할 것이며, 혈액검사를 위해 경기시설에 별도의 채취실                              (Blood doping room)을 설치할 계획

· 도핑컨트롤센터 장비

샘 플	장 비	개 수
소 변	GC/MSD	6
	LC/MS/MS(트리플 사중극자)	4
	HRMS	1
	C-IR/MS	1
	Electrophoresis System	1
혈 액	Immulite	1
	Sysmex	2
	Luminometer	1
	Flow Cytometer	1
	Electrophoresis System	2

3) 평창동계올림픽 급수체계 구축사업

· 위    치 : 강원도 평창군 대관령면 횡계리(소 황병산 계곡)

· 사업내용 : 동계올림픽 급수체계구축

· 기본방향 : 대관령 식수전용저수지를 개발하여 용수부족을 해결하고,                              올림픽의 성공적인 개최와 증가하게 될 지역 개발수요에                              능동적으로 대처

- 올림픽 개최 기간 동안 매일 11,000톤의 용수 수요 발생

· 시설규모

- 대관령식수전용저수지 개발 및 상수도시설 확충 1식(취·정수장, 배수지, 관로)

- 유역면적 : 15.30㎢

- 총 저수량 : 194.2만㎥(유효저수량 158.7만㎥)

· 총사업비 : 600억원(국비 360억원, 지방비 240억원)

· 사업기간 : '13 ~ '16

4) 동계올림픽 개·폐회식장 건립

· 위    치 : 강원도 평창군 대관령면 횡계리(고원훈련장 일원)

· 사업내용 : 동계올림픽 개·폐회식장 건립

· 기본방향 : 최적의 개·폐회식장 건립을 통해 우리 문화의 개성과 우수성을 홍보하는 장으로 활용하고, 대회 후 올림픽 유산으로 활용 및 지역의 지속가능한 균형발전 도모

· 시설규모

- 사업부지 : 236,000㎡

- 수용능력 : 40,000석(대회 개최 이후에 1만5천석 이하로 남기고 나머지 시설 철거)

- 주요시설 : 개·폐회식장, 성화대, 메달플라자 등

· 총사업비 : 1,226억원

- 1단계 필수시설 859억원(국비 429억원, 지방비 215억원, 민자(조직위) 215억원)

* 필수시설 : 개폐회식장, 성화대, 메달플라자

- 2단계 문화지원시설 367억원(국비 129억원, 지방비 126억원, 민자(조직위) 112억원)

· 사업기간 : '15 ~ '17

5. 연도별 투자계획 및 재원 조달계획

1) 연도별 투자계획

가) 경기장

(변경)

구분			신설 및 보완	연도별투자계획(억 원)
				재원별	합계	2012까지	2013	2014	2015	2016
합계			8개소	합계	8,063	198	678	1,218	3,054	2,915
				국비	6,047	76	580	916	2,292	2,183
				지방비	2,016	122	98	302	762	732
설상	소계		3개소	합계	3,656	81	233	441	1106	1,795
				국비	2,742	23	212	331	830	1.346
				지방비	914	58	21	110	276	449
	알파인	정선중봉	신설	합계	1,723	44	122	185	464	908
				국비	1,292	12	112	139	348	681
				지방비	431	32	10	46	116	227
	봅슬레이 스켈레톤 루지	알펜시아리조트	신설	합계	1,241	37	111	216	540	337
				국비	931	11	100	162	405	253
				지방비	310	26	11	54	135	84
	프리스타일	보광 리조트	보완	합계	692	-	-	40	102	550
				국비	519	-	-	30	77	412
	스노보드
				지방비	173	-	-	10	25	138
빙상	소계		5개소	합계	4,407	117	445	777	1,948	1,120
				국비	3,305	53	368	585	1,462	837
				지방비	1,102	64	77	192	486	283
	스피드스케이팅	강릉체육시설단지	신설	합계	1,373	39	145	225	563	401
				국비	1,029	17	121	169	422	300
				지방비	344	22	24	56	141	101
	피겨 쇼트트랙			합계	1,305	33	116	242	606	308
				국비	979	14	97	182	455	231
				지방비	326	19	19	60	151	77
	아이스 하키I			합계	1,075	25	100	190	476	284
				국비	806	12	82	143	357	212
				지방비	269	13	18	47	119	72
	아이스 하키II	관동 대학교	신설	합계	561	20	84	102	257	98
				국비	421	10	68	77	193	73
				지방비	140	10	16	25	64	25
	컬링	강릉 빙상장	보완	합계	93	-	-	18	46	29
				국비	70	-	-	14	35	21
				지방비	23	-	-	4	11	8

(당초)

구분			신설 및 보완	연도별투자계획(억 원)
				재원별	합계	2012까지	2013	2014	2015	2016
합계			8개소	합계	7,637	198	678	1,218	3,054	2,489
				국비	5,728	76	580	916	2,292	1,864
				지방비	1,909	122	98	302	762	625
설상	소계		3개소	합계	3,167	81	233	441	1106	1,306
				국비	2,375	23	212	331	830	979
				지방비	792	58	21	110	276	327
	알파인	정선중봉	신설	합계	1,723	44	122	185	464	908
				국비	1,292	12	112	139	348	681
				지방비	431	32	10	46	116	227
	봅슬레이 스켈레톤 루지	알펜시아리조트	신설	합계	1,241	37	111	216	540	337
				국비	931	11	100	162	405	253
				지방비	310	26	11	54	135	84
	프리스타일	보광 리조트	보완	합계	203	-	-	40	102	61
				국비	152	-	-	30	77	45
	스노보드
				지방비	51	-	-	10	25	16
빙상	소계		5개소	합계	4,470	117	445	777	1,948	1,183
				국비	3,353	53	368	585	1,462	885
				지방비	1,117	64	77	192	486	298
	스피드스케이팅	강릉체육시설단지	신설	합계	1,435	39	145	225	563	463
				국비	1,076	17	121	169	422	347
				지방비	359	22	24	56	141	116
	피겨 쇼트트랙			합계	1,305	33	116	242	606	308
				국비	979	14	97	182	455	231
				지방비	326	19	19	60	151	77
	아이스 하키I			합계	1,075	25	100	190	476	284
				국비	806	12	82	143	357	212
				지방비	269	13	18	47	119	72
	아이스 하키II	관동 대학교	신설	합계	561	20	84	102	257	98
				국비	421	10	68	77	193	73
				지방비	140	10	16	25	64	25
	컬링	강릉 빙상장	보완	합계	94	-	-	18	46	30
				국비	71	-	-	14	35	22
				지방비	23	-	-	4	11	8

나) 진입도로

(1) 광역간선교통망, 보조간선교통망

구분		사 업 명 (구 간)		연도별 투자계획(억 원)
				합계	2012까지	2013	2014	2015	2016	2017
진입도로 총 합계		28개소	합계	94,079	14,945	12,451	22,527	26,469	13,057	4,630
			국비	69,106	9,859	9,153	16,457	20,006	9,197	4,434
			지방비	1,682	49	123	173	487	696	154
			민자	23,291	5,037	3,175	5,897	5,976	3,164	42
광역 간선 교통망 (국비)	소계	6개소	합계	81,619	14,107	11,308	20,433	23,303	9,491	2,977
			국비	58,328	9,070	8,133	14,536	17,327	6,327	2,935
			민자	23,291	5,037	3,175	5,897	5,976	3,164	42
	공항	양양공항	민자	7	-	-	-	-	1	6
	철도	원주~강릉	합계	38,962	2,639	4,500	10,340	13,250	5,350	2,883
			국비	38,962	2,639	4,500	10,340	13,250	5,350	2,883
		경의선~공항철도 연계시설	합계	3,100	1,368	1,551	181	-	-	-
			국비	3,100	1,368	1,551	181	-	-	-
	고속국도	영동고속도로 임시 IC	합계	312	-	-	6	98	120	88
			국비	178	-	-	3	55	68	52
			민자	134	-	-	3	43	52	36
		제2영동고속도로(광주~원주)	합계	15,397	916	2,311	4,050	4,100	4,020	-
			국비	3,483	208	523	916	927	909	-
			민자	11,914	708	1,788	3,134	3,173	3,111	-
		동홍천~양양 고속도로	합계	23,841	9,184	2,946	5,856	5,855	-	-
			국비	12,605	4,855	1,559	3,096	3,095	-	-
			민자	11,236	4,329	1,387	2,760	2,760	-	-
보조 간선 교통망 (국비)	소계	6개소	합계	6,853	789	618	1,508	1,539	1,260	1,139
			국비	6,853	789	618	1,508	1,539	1,260	1,139
	국도6호	둔내~무이	합계	1,597	-	100	357	390	400	350
			국비	1,597	-	100	357	390	400	350
		무이~장평	합계	781	-	70	180	190	210	131
			국비	781	-	70	180	190	210	131
		장평~간평	합계	1,760	-	100	450	450	370	390
			국비	1,760	-	100	450	450	370	390
		두능~연곡	합계	1,065	666	158	121	120	-	-
			국비	1,065	666	158	121	120	-	-
	국도59호	나전~막동	합계	1,248	-	100	300	300	280	268
			국비	1,248	-	100	300	300	280	268
		막동~마평	합계	402	123	90	100	89	-	-
			국비	402	123	90	100	89	-	-

(2) 경기장진입 교통망

구분		사 업 명 (구 간)	연도별 투자계획(억 원)
			재원별	합계	2012까지	2013	2014	2015	2016	2017
경기장 진입 교통망	소계	16개소	합계	5,607	49	525	586	1,627	2,306	514
			국비	3,925	-	402	413	1,140	1,610	360
			지방비	1,682	49	123	173	487	696	154
	국도 7호	강릉원주대 ~ 죽헌교차로	합계	211	-	-	-	14	144	53
			국비	148	-	-	-	10	101	37
			지방비	63	-	-	-	4	43	16
	지방도408호	면온IC ~ 보광	합계	562	12	104	88	223	135	-
			국비	393	-	81	62	156	94	-
			지방비	169	12	23	26	67	41	-
	지방도456호	진부 ~ 횡계IC	합계	330	-	69	51	130	80	-
			국비	231	-	48	36	91	56	-
			지방비	99	-	21	15	39	24	-
	지방도456호	월정삼거리 ~ 차항	합계	619	-	-	-	43	421	155
			국비	433	-	-	-	30	295	108
			지방비	186	-	-	-	13	126	47
	군도12호	유천 ~ 수하	합계	235	7	67	31	80	50	-
			국비	165	-	52	22	56	35	-
			지방비	70	7	15	9	24	15	-
	군도12호	유천 ~ 용산	합계	149	-	-	-	10	102	37
			국비	104	-	-	-	7	71	26
			지방비	45	-	-	-	3	31	11
	군도13호	싸리재 ~ 용산	합계	519	7	69	88	221	134	-
			국비	363	-	53	62	155	93	-
			지방비	156	7	16	26	66	41	-
	도암205호	횡계 ~ 횡계	합계	335	2	26	60	153	94	-
			국비	234	-	20	42	107	65	-
			지방비	101	2	6	18	46	29	-
	도암209호	용산 ~ 수하	합계	152	3	25	24	62	38	-
			국비	106	-	20	17	43	26	-
			지방비	46	3	5	7	19	12	-
	내부연결도로	용평알파인경기장 진입도로	합계	128	3	30	18	47	30	-
			국비	90	-	23	13	33	21	-
			지방비	38	3	7	5	14	9	-
		진부역 진입도로	합계	1,214	15	135	212	531	321	-
			국비	850	-	105	149	372	224	-
			지방비	364	15	30	63	159	97	-
		올림픽파크 진입도로	합계	77	-	-	14	38	25	-
			국비	54	-	-	10	27	17	-
			지방비	23	-	-	4	11	8	-
		진부IC~호명교	합계	307	-	-	-	21	209	77
			국비	215	-	-	-	15	146	54
			지방비	92	-	-	-	6	63	23
		차항~횡계	합계	287	-	-	-	20	196	71
			국비	201	-	-	-	14	137	50
			지방비	86	-	-	-	6	59	21
		선수촌~경기장	합계	181	-	-	-	13	123	45
			국비	127	-	-	-	9	86	32
			지방비	54	-	-	-	4	37	13
		강릉역~경기장	합계	301	-	-	-	21	204	76
			국비	211	-	-	-	15	143	53
			지방비	90	-	-	-	6	61	23

다. 부대시설

구분		연도별 투자계획(억 원)
		재원별	합계	2012까지	2013	2014	2015	2016	2017
합계		합계	13,239	-	479	1,759	3,384	3,303	3,088
		국비	918	-	30	60	135	135	-
		지방비	581	-	20	40	90	90	-
		민자	11,740	-	429	1,659	3,159	3,078	3,088
선수촌	알펜시아 클러스터	합계	6,385	-	230	1,640	1,640	1,559	1,316
		국비	-	-	-	-	-	-	-
		지방비	-	-
		민자	6,385	-	230	1,640	1,640	1,559	1,316
	코스탈 클러스터	합계	1,780	-	65	-	550	550	615
		국비	-	-	-	-	-	-	-
		지방비	-	-	-	-	-	-	-
		민자	1,780	-	65	-	550	550	615
	중봉대체 선수촌	합계	98	-	19	19	19	19	22
		국비	-	-	-	-	-	-	-
		지방비	-	-	-	-	-	-	-
		민자	98	-	19	19	19	19	22
미디어촌	코스탈 클러스터	합계	3,150	-	115	-	950	950	1,135
		국비	-	-	-	-	-	-	-
		지방비	-	-	-	-	-	-	-
		민자	3,150	-	115	-	950	950	1,135
급수체계 구축사업		합계	600	-	50	100	225	225	-
		국비	360	-	30	60	135	135	-
		지방비	240	-	20	40	90	90	-
		민자	-	-	-	-	-	-	-
올림픽 개·폐회식장 건립		합계	1,226	-	-	-	미 정
		국비	558	-	-	-
		지방비	341	-	-	-
		민자	327	-	-	-

※ 올림픽 개·폐회식장 건립사업 연도별 투자계획은 미확정된 사항임

2) 재원 조달계획

(변경)

년도	재원 조달액	주체별 재원조달액(억 원)
		국비	지방비	민자
2012까지	15,143	9,935	171	5,037
2013	13,608	9,763	241	3,604
2014	25,504	17,433	515	7,556
2015	32,907	22,433	1,339	9,135
2016	19,275	11,515	1,518	6,242
2017	7,718	4,434	154	3,130
계	114,155	75,513	3,938	34,704

※ 올림픽 개·폐회식장 건립사업 연도별 재원조달액은 미확정된 사항으로 미반영됨

(당초)

년도	재원 조달액	주체별 재원조달액(억 원)
		국비	지방비	민자
2012까지	15,143	9,935	171	5,037
2013	13,608	9,763	241	3,604
2014	25,504	17,433	515	7,556
2015	32,907	22,433	1,339	9,135
2016	18,849	11,196	1,411	6,242
2017	7,718	4,434	154	3,130
계	113,729	75,194	3,831	34,704

※ 올림픽 개·폐회식장 건립사업 연도별 재원조달액은 미확정된 사항으로 미반영됨

6. 신축 경기장 시설의 사후 활용 방안

구분	경기종목	규모	사후활용	비고
정선 중봉	알파인	수용능력 : 12,000석	활용	-
알펜시아 리조트	루지/봅슬레이/스켈레톤	수용능력 : 11,000석	활용	-
강릉 체육시설 단지	스피드 스케이팅	수용능력 : 8,000석	철거	-
	피겨/쇼트트랙	수용능력 : 12,000석	활용	-
	아이스하키Ⅰ	수용능력 : 10,000석	이전/활용	원주시로 이전
강릉 관동대학교	아이스하키Ⅱ	수용능력 : 6,000석	활용	학생·시민 체육 시설
올림픽 개·폐회식장	-	수용능력 : 40,000석	활용	대회 개최 이후에 1만5천석 이하로 남기고 나머지 시설 철거