[별지 7] 개별 투자심사 사업의 추진현황

월정사 전시관 건립

부서

문화관광과

담당자

황재국(☎330-2714)

□ 사업목적 및 필요성

○ 월정사에는 국보 제48호 팔각구층석탑과 보물 제139호 석조보살좌상 등 3,500여점의 지정.비지정 문화재를 성보 박물관에 소장하고 있으나,

○ 발굴되는 유물이 증가하고 있는 반면 수장고 공간 부족과 낙후된 방범.방화시설로 화재와 도난에 노출되어 있어 전시관 신축이 필요함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011년 ~ 2015년

○ 위 치 : 평창군 진부면 동산리 산17-5번지

○ 규 모 : 전시관 1동(건축연면적 6,268.52㎡ 지하2층/지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	19,400	6,200	4,920	6,880	1,400
국 비	5,820	1,860	1,476	2,064	420
시 도 비	6,790	2,170	1,722	2,408	490
시군구비	6,790	2,170	1,722	2,408	490

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   70%)

○ 2012. 11. 21. 문화재청 조건부 실시설계 승인

○ 2012. 12. 20 건축공사 착공

○ 2014. 04. 30 건축 골조 공사 완료

□ 향후계획

○ 2016년 국비 1,400백만원 추가 확보를 통한 사업 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

구 분	변경전	변경후	세부내역
사업기간	2011∼2015.12	2011∼2016.06	지열시스템으로의 설계 변경 및 물가 변동에 따른 자재가격 인상
총사업비	18,000백만원	19,400백만원

전통민속 상설공연장 건립

부서

문화관광과

담당자

이영숙 (☎330-2571)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2018 평창동계올림픽 대비 한국의 전통문화를 알리는 문화올림픽 자원

으로 활용, 문화복합공간과 연계한 문화관광상품 자원화 및 지역경제

활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년~2016년 (4년)

○ 위 치 : 평창군 용평면 장평리 380-2

○ 규 모 : 공연장(지상2층 1동 연면적 2,182㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,500백만원(부지매입비 1,400백만원 별도 추진)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	4,500	121		1,000	3,379
국 비	1,800	48.4		400	1,351.6
시 도 비	540	14.52		120	405.48
시군구비	2,160	58.08		480	1,621.92

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 공유재산관리계획 승인(대체부지) : 2013. 06. 25

○ 사업관련용역(4건) 추진 : 2013. 07. 01 ~ 2015. 10. 23

○ 지구단위계획 변경용역 등 관련 용역 일시중지 : 2014. 01. 07 ~ 2015. 07. 05

- 주민의견 수렴에 따른 계획(안) 확정 지연

○ 대체부지(축협) 소유권이전 및 보상금 지급 : 2014. 02. 12

□ 향후계획

○ 지구단위계획 변경용역 : 2015. 07

○ 지구단위계획 변경완료 및 실시설계 준공 : 2015. 10.

○ 건축인허가 : 2015. 10. ~ 11.

○ 공사착공 및 준공 : 2015. 11. ~2016. 10.

마하생태관광모델 조성사업

부서

문화관광과

담당자

김남수 (☎330-2746)

□ 사업목적 및 필요성

○ 백룡동굴, 민물고기생태관, 동강을 연계한 생태관광을 벨트화하여 자연환경을 최대한 보전하고 생태녹색관광지로 조성하여 생태체험프로그램 운영으로 지역 경제 활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010 ~ 2015 (6년간)

○ 위 치 : 평창군 미탄면 마하리 일원

○ 규 모 :  3,397,921㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,160백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	3,160	1,640	520	1,000
국 비	1,580	820	260	500
시 도 비
시군구비	1,580	820	260	500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 기반시설 구축(진입로 개선, 동강생태 전시실 보강, 조형물 설치, 짚라인 설치 등)

○ 주민 역량교육 및 생태체험프로그램 운영

○ 홍보 마케팅(국제관광홍보전, 거리홍보전, 팸투어, 온라인 오프라인 광고)

○ 생태체험축제 지원 및 팸투어 추진, 작은 음악회 개최

○ 생태터널 조성공사, 민물고기생태관 야외편의시설 설치

○ 뗏목체험장 및 전기자동차 거치소 설치, 과학생태실험교실 조성

□ 향후계획

○ 생태관광 홍보 및 프로그램 운영

○ 방문자 센터 건립 및 세족장 정비

○ 백룡동굴 모바일 홈페이지 제작 및 안전진단

평창송어종합공연체험장 건립

부서

문화관광과

담당자

김남수 (☎330-2746)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2018평창동계올림픽 배후도시 문화예술 인프라 구축을 통한 문화올림픽의  성공적 개최 견인

○ 평창 송어축제와 연계한 다양한 문화콘텐츠 가동이 가능한 문화시설의 확충으로 축제의 명품화와 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2017 (3년간)

○ 위 치 : 평창군 진부면 하진부리 337-2번지 일원

○ 규 모 : 공연체험장(연면적 2,200㎡), 다목적 체험장(600㎡), 부대시설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	8,000		250	1,000	6,750
국 비	4,000		125	500	3,375
시 도 비	1,200		37.5	150	1,012.5
시군구비	2,800		87.5	350	2,362.5

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 4%)

○ 공연장 건립 타당성 및 기본구상 용역 완료 : 2014. 1월

○ 동계올림픽 특구지정(진부 도시재상지구) : 2014. 4월

○ 사업부지 매입 평창군 공유재산관리계획 심의 : 2014. 4월

○ 공공건축 사업계획 사전검토(건축도시공간연구소) : 2015. 6월

○ 사업부지 측량 용역 : 2015. 7월

□ 향후계획

○ 계획 및 실시설계 공모 및 시행 : 2015. 9월 ~ 12월

○ 건축 인허가 등 관련 행정절차 이행 : 2016. 1월

○ 건축공사 등 관련 공사 시행 : 2016. 3월~ 2017. 8월

○ 평창송어종합공연체험장 개관 : 2017. 8월

오대산 자연명상센터 건립

부서

문화관광과

담당자

황재국 (☎330-2714)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2018 평창동계올림픽 효과 극대화를 위한 배후지역의 관광인프라 구축

○ 현대인의 웰니스 트랜드 증가 추세에 대비한 명상산업 관광상품화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2017년

○ 위 치 : 평창군 진부면 동산리 24번지 일원

○ 규 모 : 명상마을 조성 170,000㎡ (51,000평)

- 명상센터 등 총 20동【건축연면적 : 10,670㎡ (3,200평)】

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	29,500	216	1,395	11,389	16,500
국 비	7,500	108	697	5,695	1,000
시 도 비	2,250	33	209	1,708	300
시군구비	5,250	75	489	3,986	700
민간자본	14,500				14,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2012. 3. : 오대산 자연명상마을 조성 추진계획수립

○ 2013. 3. 25 : 추진방향설정 관계자회의(월정사, 도시계획부서, 전문가 등)

○ 2013. 6. 10 ~ 2014. 6. 9 : 용역(2건) 추진 중

- 군관리계획(오대산 자연명상지구) 결정 용역

- 군관리계획결정에 따른 전략환경영향평가 용역

○ 2013. 8. 23 : 기본구상 용역 준공

○ 2014. 02월 : 건축 및 기반시설 실시설계용역 착수 (절대공기: 300일)

○ 2014. 04월 : 전략환경영향평가 관련 환경영향평가협의회 심의 실시

○ 2014. 05월 : 부지정비공사(오대산호텔 철거) 준공

○ 2014. 05월 : 군관리계획(오대산 자연명상지구) 결정(변경) 신청

○ 2014. 09월 : 군관리계획 결정(변경) 주민의견청취 공람·공고

○ 2015. 01월 : 군관리계획 결정(변경) 평창군의회 의견 청취안 『찬성』의결

○ 2015. 01월 : 평창군 군계획위원회(2015년 제1회 본위원회) 자문(심의)

○ 2015. 04월 : 군관리계획 결정(변경) 강원도 입안

○ 2015. 05월 : 문화재지표조사 실시

○ 2015. 07월 : 군관리계획 결정 관련법 관련부서 협의 및 검토

○ 2015. 07월 : 평창동계올림픽 특구지정 중도위 심의 조건부 의결

□ 향후계획

○ 2015. 08월 : 군관리계획 결정(변경) 강원도 승인 (용도지역 변경)

○ 2015. 09월 : 군관리계획 결정(변경) 평창군 승인 (지구단위계획 변경)

○ 2015. 10월 : 국·공유지 협의(용도폐지) 및 매입

○ 2015. 11월 : 건축허가 및 관련인·허가 승인

○ 2015. 11월 : 건축공사 및 기반시설공사 착공

○ 2015. 11월 : 건축공사 및 기반시설공사 감리용역 착수

○ 2017. 12월 : 건축공사 및 관련사업 준공

노람뜰 녹색치유 및 레포츠단지 조성

부서

문화관광과

담당자

임정학(☎330-2752)

□ 사업목적 및 필요성

○ 유명수석산지인 평창군 수석브랜드 강화 및 차별화된 힐링문화 공간 조성

○ 수석테마공원을 거점으로 인근 관광자원을 연계한 다양한 관광상품 개발로       집중체류형 관광산업 육성 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 :  2013년~2017년 (5년)

○ 위 치 : 평창군 평창읍 중리 15-3

○ 규 모 : 36,202㎡(수석전시관 1동, 명사십리 공원정비, 녹색휴양공원 조성,                       장암산 산책로 조성)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  9,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	9,600	1,724	1,000	2,400	4,476
국 비	3,890		500	1,200	2,190
시 도 비	1,167		150	360	657
시군구비	4,543	1,724	350	840	1,629

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 장암산산책로 조성 및 명사십리 공원 설계용역

○ 수석전시관 부지조성 완료 및 계약의뢰

□ 향후계획

○ 명사십리 공원, 장암산산책로, 녹색휴양공원 조성 공사추진 : 15.09. ~ 15. 12.

○ 수석전시관 설계용역 : 15. 08. ~ 11.

○ 수석전시관 건축공사 및 야외테마공원 조성 : 15. 12 ~ 17. 04.

2014년도 평창효석문화제

부서

문화관광과

담당자

이기언(☎330-2466)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역홍보 및 지역경제 활성화에 이바지 하고, 다양한 콘텐츠 개발 및 운영을 통한 발전적인 축제의 방향 제시

○ 다각적인 관광객이 참여 할 수 있는 축제 서비스 향상에 기여하고, 자연미와 어우러진 아이템과 공간 연출을 통해 평창군 축제 부각

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 6월~ 10월

○ 위 치 : 평창군 봉평면 효석문화마을 일원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 710백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	710		710
국 비	130		130
시 도 비	40		40
시군구비	490		490
민간자본	50		50

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 2014. 3. 2014 평창효석문화제 기본계획 수립

○ 2014. 6. 2014 평창효석문화제 세부 사업계획 수립

○ 2014. 9. 2014 제16회 효석문화제 개최

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

용평체육공원 조성사업

부서

경제체육과

담당자

김종율(☎330-2723)

□ 사업목적 및 필요성

○ 평창의 남부지역과 북부지역을 연결하는 평창군 교통의 중심지로서 접근성이 뛰어난 용평면에 체육공원을 조성하여 각종 행사와 대회를 유치, 경제 활성화에 기여하고 주민의 체육활동 증진을 통한 삶의 질을 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2016년

○ 위 치 : 평창군 용평면 장평리 산266-2번지 일원

○ 규 모 : 축구장 1면, 부대시설, 주차장 등(부지면적 47,047㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	7,600	-	960	2,750	3,890
국 비	1,650	-	-	825	825
시 도 비	770	-	-	385	385
시군구비	5,180	-	960	1,540	2,680

□ 향후계획

○ 소규모환경영향평가 등 사전 행정절차 이행 완료 : 2015. 7.

○ 관련법 협의 및 검토 : 2015. 8.

○ 공사착공 및 준공 : 2015. 10월 ~ 2016. 12월

창리천 생태하천복원사업

부서

환경위생과

담당자

이용구(☎330-2331)

□ 사업목적 및 필요성

○ 창리천 유슈량 복원 건천화 방지, 어로설치로 서식환경 복원

○ 수질정화 습지, 생물서식처 조성 등으로 생태환경개선

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2017년

○ 사업위치 : 평창군 미탄면 평안 1보 ~ 마하리 동강합류지점

○ 사업규모 : 창리천 16.8㎢

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,866백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	8,866	0	1,680	1,574	5,612
국 비	4,433	0	500	787	3,146
시 도 비
시군구비	1,330	0	830	236	264
기 타	3,103	0	350	551	2,202

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 실시설계 검토중

□ 향후계획

○ 실시설계완료 : 2015. 12월

○ 계약 착공 : 2016. 1월 ~ 2014. 12월

□ 사업변경 내역 : 해당없음

도암댐상류 비점오염 저감사업

부서

환경위생과

담당자

이용운 (☎330-2414)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도암댐 상류지역의 고랭지밭 등에서 배출되는 토사유출 방지

○ 비점오염 저감시설 조성을 통한 송천ㆍ도암댐 수질개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008년 ~ 2017년

○ 위 치 : 대관령면 일원

○ 규 모 : 148.73㎢

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  32,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	32,100	19,200	3,870	4,515	4,515
국 비	20,630	11,600	2,709	3,161	3,160
시 도 비	1,720	1,140	174	203	203
시군구비	1,721	1,140	174	203	204
기 타	8,029	5,320	813	948	948

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 1단계 사업추진 : 2014. 1월~12월

-  침사지, 수로조성, 사면보호공 등 토사유출 저감시설)

○ 도암댐상류 비점오염저감사업 기본 및 실시설계 용역 착공 : 2014. 3. 17.

○ 사업대상부지 토지매입(침사지) : 2014. 11월~12월

□ 향후계획

○ 시설계 승인 요청(원주지방환경청) : 2015. 3월

○ 공사착공 : 2015. 9월

○ 공사준공 : 2016. 12월

□ 사업변경 내역 : 해당없음

면온 공공하수처리장 증설 및 하수관거 확장공사

부서

상하수도사업소

담당자

홍성군 (☎330-2163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 면온 공공하수처리장 증설 및 하수관거 확장공사를 통하여 봉평면 무이리 지역의       미처리 생활하수를 적정 처리 후 방류하여 2018 평창 동계올림픽 경기장 인근 면온천의       수질오염 방지로 깨끗한 수질보전 및 쾌적한 주거환경을 조성하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년∼2016년

○ 위 치 : 강원도 평창군 봉평면 면온리, 무이리 일원

○ 규 모 : 공공하수처리장 증설 Q=820㎥/일(Q=480㎥/일⇒Q=1,300㎥/일)

: 하수관로 L=7,666m 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,939백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	10,939	426	260	7,359	2,894
국 비	7,657	298	182	5,151	2,026
기 금	1,994.8	102.4	46.8	1,324.8	520.8
시 도 비
시군구비	1,287.2	25.6	31.2	883.2	347.2

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공사중 45%)

○ 기본 및 실시설계용역 완료 : 2011. 09. 05∼2013. 12. 19

○ 총사업비 변경 승인 : 2013. 12. 24 (원주지방환경청)

○ 하수처리공법 관련 민사소송 종결 : 2014. 06. 12 (평창군 승소)

○ 기술검토 및 재원협의 승인 : 2014. 07. 08 (강원도, 원주지방환경청)

○ 공사착공 : 2014. 10. 17(공사중)

□ 향후계획

○ 공사 완공 및 운영 : 2016. 12월

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : 증설 Q=820㎥/일, 하수관로 L=9,400m⇒증설 Q=820㎥/일,

: 하수관로 L=7,666m (감 L=1,734m)

- 기본 및 실시설계 기술검토 및 재원협의 승인 : 2014. 07. 08 (강원도, 원주지방환경청)

○ 사업기간 : 2012년∼2014년⇒2012년∼2015년 (증 1년)

- 사업기간 변경 승인 : 2013. 12. 24 (원주지방환경청)

봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 확장공사

부서

상하수도사업소

담당자

홍성군 (☎330-2163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 확장공사를 통하여 봉평면 흥정리 지역의        미처리 생활하수를 적정 처리 후 방류하여 흥정천의 수질오염 방지로 흥정계곡의        깨끗한 수질보전 및 쾌적한 주거환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년∼2015년

○ 위 치 : 강원도 평창군 봉평면 창동리, 흥정리 일원

○ 규 모 : 공공하수처리장 증설 Q=200㎥/일(Q=1,000㎥/일⇒Q=1,200㎥/일)

: 하수관로 L=7,844m 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,248백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	8,248	1,876	4,972	1,400
국 비	5,773	1,313	3,480	980
기 금	1,502.2	355	895.2	252
시 도 비
시군구비	972.8	208	596.8	168

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공사중 67%)

○ 기본 및 실시설계용역 완료 : 2012. 04. 05∼2013. 06. 10

○ 기술검토 및 재원협의 승인 : 2013. 06. 20 (강원도, 원주지방환경청)

○ 공사 계약(총액계약) : 2013. 09. 24

○ 공사 착공 : 2013. 09. 25

○ 총사업비 변경 승인 : 2013. 12. 24 (원주지방환경청)

○ 1차분 준공 : 2014. 09. 02

○ 2차분 착공 : 2014. 01. 27 (추진중 67%)

□ 향후계획

○ 공사 완공 및 운영 : 2015. 12월

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : 증설 Q=200㎥/일, 하수관로 L=10,700m⇒증설 Q=200㎥/일,

: 하수관로 L=7,844m (감 L=2,856m)

- 기본 및 실시설계 기술검토 및 재원협의 승인 : 2014. 6. 20 (강원도, 원주지방환경청)

○ 총사업비 : 7,389백만원⇒8,248백만원 (증 859백만원)

○ 사업기간 : 2012년∼2014년⇒2012년∼2015년 (증 1년)

- 총사업비 및 사업기간 변경 승인 : 2013. 12. 24 (원주지방환경청)

하안미(가평동) 농어촌마을하수도 개량공사

부서

상하수도사업소

담당자

박영미 (☎330-2448)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대화면 하안미(가평동)지역 기존 간이오수처리시설 전면개량 및 하수관로 설치로 하안미5리 지역에서 배출되는 미처리 생활하수를 적정 처리 후 방류하여 인근 하안미천의 수질오염 방지로 깨끗한 수질보전 및 쾌적한 주거환경을 조성하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년∼2015년

○ 위 치 : 강원도 평창군 대화면 하안미5리 일원

○ 규 모 : 소규모 공공하수처리장 신설 Q=30㎥/일

: 하수관로 L=3,350m 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,893백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	2,893		1,167	1,226	500
국 비	718		350	368
기 금	886.6		490.2	396.4
시 도 비
시군구비	1,288.4		326.8	461.6	500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공사중  65%)

○ 실시설계용역 완료 : 2010. 03. 31∼2013. 02. 22

○ 총사업비 변경 승인 : 2013. 12. 24 (원주지방환경청)

○ 편입토지 보상 완료(2필지, A=942㎡) : 2014. 01. 24

○ 기술검토 승인 : 2014. 06. 12 (강원도)

○ 재원협의 협의 중 : 2014. 07. 07∼현재 (원주지방환경청)

□ 향후계획

○ 공사 완공 및 운영 : 2015. 12월

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : 신설 Q=30㎥/일, 하수관로 L=3,500m⇒신설 Q=30㎥/일,

: 하수관로 L=3,350m (감 L=150m) (실시설계 결과 반영)

○ 총사업비 : 2,393백만원⇒2,893백만원 (증 500백만원) (실시설계 결과 반영)

○ 사업기간 : 2013년∼2014년⇒2013년∼2015년 (증 1년)

- 사업기간 변경 승인 : 2013. 12. 24 (원주지방환경청)

운교리 농어촌마을하수도 설치사업

부서

상하수도사업소

담당자

박영미 (☎330-2448)

□ 사업목적 및 필요성

○ 방림면 운교리 농어촌마을하수도 설치사업을 통하여 운교1리 지역의 기존 가옥        및 펜션에서 배출되는 생활하수를 적정 처리 후 방류하여 인근 계촌천의 수질        오염 방지로 깨끗한 수질보전 및 쾌적한 주거환경을 조성하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년∼2015년

○ 위 치 : 강원도 평창군 방림면 운교1리 일원

○ 규 모 : 소규모 공공하수처리장 신설 Q=80㎥/일

: 하수관로 L=5,654m 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,047백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	4,047	428	1,538	286	1,795
국 비	2,833	300	1,076	200	1,257
기 금	728.4	76.8	277.2	51.6	322.8
시 도 비
시군구비	485.6	51.2	184.8	34.4	215.2

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공사중  65%)

○ 실시설계용역 : 2012. 11. 30∼2013. 12. 20 [(주)가온엔지니어링]

○ 하수도정비기본계획 부분변경 승인 : 2013. 07. 08 (강원도)

○ 사업기간 변경 승인 : 2013. 12. 24 (원주지방환경청)

○ 기술검토 및 재원협의 승인 : 2014. 07. 07 (강원도, 원주지방환경청)

○ 공사 착공 : 2014. 09. 11

○ 총사업비 변경승인 : 2014. 10. 14(원주지방환경청)

□ 향후계획

○ 공사 완공 및 운영 : 2015. 12월

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : 신설 Q=60㎥/일, 하수관로 L=2,760m⇒신설 Q=80㎥/일 (증 Q=20㎥/일),

: 하수관로 L=5,654m (증 L=2,894m)

- 실시설계 기술검토 및 재원협의 승인 : 2014. 07. 07 (강원도, 원주지방환경청)

○ 총사업비변경승인 : 2,252백만원⇒4,047백만원 (증 1,795백만원)

○ 사업기간 : 2013년∼2014년⇒2013년∼2015년 (증 1년)

- 사업기간 변경 승인 : 2013. 12. 24 (원주지방환경청)

2018 평창 동계올림픽 관련 하수도시설 확충사업

부서

상하수도사업소

담당자

홍성군 (☎330-2163)

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년∼2016년

○ 위 치 : 강원도 평창군 진부면, 대관령면 일원

○ 규 모 :

진부 공공하수처리장 증설 Q=900㎥/일(Q=4,100㎥/일⇒Q=5,000㎥/일)

진부 총인처리시설 증설 Q=900㎥/일(Q=4,100㎥/일⇒Q=5,000㎥/일)

대관령 공공하수처리장 하수저류시설 신설 Q=2,000㎥/일

대관령 총인처리시설 신설 Q=5,000㎥/일

하수관로 L=15.519㎞(진부 L=8.145km, 대관령 L=7.374km)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  23,211백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	23,211		428	11,248	11,535
국 비	16,248		300	7,874	8,074
기 금	4,177.8		76.8	2,024.4	2,076.6
시 도 비
시군구비	2,785.2		51.2	1,349.6	1,384.4

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공사중  30%)

○ 실시설계용역 : 2013. 06. 24 ~ 2015. 2. 17

○ 평창군 하수도정비기본계획 전체변경(안) 승인 2014. 07. 25

○ 하수처리공법(총인처리시설 포함) 선정 완료 : 2014. 10. 14

○ 기술검토 및 재원협의 완료 : 2015. 05. 06 :

○ 설치계획 인가 완료 : 2015. 05. 15 :

○ 건설사업관리용역 착수 : 2015. 06. 15

○ 공사 착수 : 2015. 07. 30

□ 향후계획

○ 공사 완공 및 운영 : 2017. 7월

□ 사업변경 내역 : 해당없음

평창군 장애인복지관 건립공사

부서

주민생활지원과

담당자

김진용 (☎330-2341)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군민의 약7%인 3,000여명 장애인에 대한 서비스 제공과 장애인의

삶의 질 향상을 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2016(3년)

○ 위 치 : 평창군 진부면 상진부리 245-23

○ 규 모 : 연면적 1,894㎡(약570평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	4,000	300	820	700	2,180
국 비
시 도 비
시군구비	4,000	300	820	700	2,180

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공사중단, 7%)

○ 2015.1.12 공사발주하여 기초공사는 완료(현공정 7%) 하였으나, 건축공사

업체의 건설업등록말소로 인한 계약해지로 공사 중지된 상태임

(2015.6.3 계약해지/ 2015.6.19소장제출)

□ 향후계획

○ 건축공사업체와 계약해지 무효확인 민사소송 중으로 소송 종료 후 공사추진.

원길1교 재가설 공사

부서

안전건설과

담당자

어성용 (☎330-2484)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시특법상 안전등급 “D"급 교량이 원길1교를 재가설하여 교통사고 사전예방       과 주민통행 불안감 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 06. 07. ∼ 2014. 09. 01.

○ 위 치 : 평창군 봉평면 원길리

○ 규 모 : 교량 L=79m, B=10m, 접속도로 L=419m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,596백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	2,596	1,721	875	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,596	1,721	875	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 교량시공 및 접속도로 완료 (2014. 8. 21. 준공)

□ 향후계획

○ 없음

□ 사업변경 내역

구분	당 초	변 경
사 업 량	교량79m, 접속도로 419m	교량79m, 접속도로 419m
사 업 비	2,400백만원(군비)	2,650백만원(특교세:550, 군비:2,100)
사업기간	2013. 06.07. ~ 2014. 8월말	2013.6.07. ~ 2014. 09. 01.

평창101호(유동~약수간)농어촌도로확포장공사

부서

안전건설과

담당자

강석원 (☎330-2488)

□ 사업목적 및 필요성

○ 협소한 도로를 확포장하여 주민 통행불편은 물론 안전사고를 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 06. 21. ~ 2014. 6. 23.

○ 위 치 : 평창군 평창읍 유동리일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=0.8㎞, 국도접속부포장 L=246m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,116백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	2,116	1,523	593	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,116	1,523	593	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 도로확포장 L=0.8㎞포장완료(2014. 6. 23. 준공)

□ 향후계획

○ 없음

□ 사업변경 내역

구분	당 초	변 경
사 업 량	도로확포장L=0.8㎞, 국도포장194m	도로확포장L=0.8㎞, 국도포장246m
사 업 비	2,200백만원	2,400백만원
사업기간	2013.6.21. ~ 2014. 6. 23.	2013.6.21. ~ 2014. 6. 23.

향토산업육성사업(고랭지산야초사업)

부서

농축산과

담당자

황창윤 (330-1322)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산채와 약용작물 등의 산야초를 활용한 고부가가치 가공식품 연구·개발

및 제품 표준화를 통해 생산, 판매, 유통, 체험을 통합한 새로운 프리미엄

산야초 브랜드 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014~2017년(4년)

○ 위 치 : 서울대학교 그린바이오 과학기술원 산학협력단지 내

○ 규 모 : S/W(제품개발, 홍보, 역량강화), H/W(발효농축액 제조시설)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원                                   (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	3,000			2,100	900
국 비	1,500			900	600
시 도 비
시군구비	600			300	300
민간자본	900			900

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ 2013.11 : 향토산업화육성 대상사업 선정

○ 2014.04 : 최종사업계획서 보완조치 승인(농식품부)

○ 2014.11 : 자본보조사업자 선정을 위한 공모 실시(참여자 없음)

○ 2015.07 : 사업단의 사단법인화를 위한 사단법인 설립 신청(강원도)

□ 향후계획

○ 고랭지 산야초사업단 설립 및 자회사의 영리법인 구축

○ 2015년 8월 S/W 및 H/W 사업 착수

황병산권역단위종합정비사업

부서

농축산과

담당자

권혁운(☎330-1338)

□ 사업목적 및 필요성

○ 황병산권역의 농촌다움의 유지․보전과 쾌적한 농촌공간 조성

○ 지역주민의 ‘ 삶의 질’ 향상과 국토의 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011~2015년(5년)

○ 위 치 : 대관령면 차항1,2리(법정리1, 행정리 2)

○ 규 모 : 4개부분 10개사업(H.W 5개, S.W 5개)

- H.W : 대관령광장쉼터, 대관령식문화가공체험센터, 눈꽃마을쉼터 등

- S.W : 교육 및 견학, 홍보마케팅, 정보화구축, 컨설팅, 마을경영지원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,095백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	4,095	3,030	643	422
국 비	2,611	1,970	345	296
시 도 비
시군구비	1,119	845	148	126
민간자본	365	215	150

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  70%)

○ H.W(5개사업): 3개사업 완료, 2개사업 추진 중

○ S.W(5개사업): 1단계(‘11~’13년) 사업 완료, 2단계(‘14~’15년) 추진 중

□ 향후계획

○ 2단계(‘14~’15년) 사업 완료(‘15.12.)

○ 사업비 정산(‘16.02.)

지역전략식품산업육성사업(기능성약선두유)

부서

농축산과

담당자

안병진(☎330-1371)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우수 강원(평창, 정선) 콩과 메밀․당귀․황기 등의 기능성 특수 작물을

활용한 약선두유 사업은 평창군․정선군 콩 및 약재류를 수매하여

원료로 조달함으로써 생산 농가의 안정적인 소득보장과 고용창출로

지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2018년(5년간)

○ 위 치 : 평창군 대화면 서울대학교 그린바이오 과학기술원 산학협력단지 내

○ 규 모 : 민간경상분야(S/W) 7개사업, 민간자본분야(H/W) 1개사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,004백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	5,004		230	2,764	2,010
국 비	2,202		115	1,082	1,005
시 도 비	661		34	325	302
시군구비	1,541		81	757	703
민간자본	600			600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 지방재정 투·융자사업심사완료(‘14년 제1차 강원도) : ’14. 3. 11

○ 사업계획 승인 및 사업비 확정 : ’14. 5. 8

○ 사업단 사무국 구성(사단법인 : 의사결정 기구 역할) : ‘14. 6. 1

○ 약선두유 제품개발 및 공동이용시설 설계용역 추진 : ‘15. 1 ~ 8월

□ 향후계획

○ 약선두유 공동이용시설 건축공사(‘15. 9 ~ ’15. 11월)

○ 두유제조 설비공사(‘15. 12 ~ ’16. 1월)

○ 기능성 약선두유 시제품 생산 및 판매(‘16. 1월 이후)

평창·대화 통합상수도 시설공사

부서

상하수도사업소

담당자

민선기(☎330-2441)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대화면에 서울농생대 그린바이오 첨단연구단지 입지에 따른 환경성 검토 협의 조건인 대화상수도 취수원이전과 단지 내 물 공급 및 평창읍을 비롯한 방림, 대화 지역주민 생활수준 향상과 각종 개발계획 등으로 상수도 사용량이 지속적으로 늘어나고 있어 원활한 용수공급과 환경부 지방상수도 통합운영에 맞추어 상수도를 효율적으로 운영하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010.  ~ 2014. 12

○ 위 치 : 평창군 평창․방림․대화면 일원

○ 규 모 : 취수시설 확장 9,900㎥/일, 정수장 신설 9,200㎥/일

배수지 2개소(신설1/2,000㎥/일, 개량1/738㎥/일 )

관로 L=34km, 가압장 4개소(라인가압장 1개소 포함) 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 40,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	40,000	35,701	4,299	-	-
국 비	32,000	28,561	3439		-
시 도 비	2,400	2,142	258		-
시군구비	5,600	4,998	602		-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 취수시설 확장 9,900㎥/일 완료

○ 정수장 신설 9,200㎥/일 완료

○ 정수시설 : 관리동, 침전지, 여과지, 송수펌프동, 약품투입동 완료

○ 배 수 지 : 신리배수지 신설완료, 대화배수지 개량완료

○ 관로시설 : L=34km 완료

□ 향후계획

○ 없음

상수관망 선진화사업

부서

상하수도사업소

담당자

민선기(☎330-2441)

□ 사업목적 및 필요성

○ 최적관리시스템 구축에 다른 유수율 제고 및 생산원가 절감으로

지자체간 수도요금 및 서비스수준 격차 완화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010.  ~ 2016.

○ 위 치 : 평창군 지방상수도 5개소

○ 규 모 : 블록시스템구축 및 관망정비 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 38,297백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	38,297	26,312	7,990	3,938	57
국 비	19,149	13,156	3,995	1,969	29
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	19,148	13,156	3,995	1,969	28

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 블록시스템구축 및 관망정비사업 계속 추진 중

□ 향후계획

○ 블록시스템구축 및 관망정비사업 계속 추진하여 2016년도 사업완료 시

목표 유수율 85% 달성

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : 당초 27,940백만원, 변경 38,297백만원

- 총사업비 변경승인(2013. 6. 28, 환경부)

- 기본계획 결과반영

평창동계올림픽 급수체계구축

부서

상하수도사업소

담당자

민선기(☎330-2441)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2018 평창동계올림픽 개최 및 지역개발 수요증가로 상수도 수요량이 급

증하고 있으나 현재 운영중인 대관령상수도 취수량 부족으로 대체수원

개발이 시급하여,

◦ 대관령 식수전용 저수지 개발 및 상수도시설 확충으로 용수부족을 해결

하고 개발수요에 능동적으로 대처하여 성공적인 올림픽을 개최

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2016

○ 위 치 : 평창군 대관령면 일원

○ 규 모 : 대관령 식수전용저수지- 총저수량 194만톤(유효 159만톤)

상수도시설 확충 - 정수장 Q=7,000㎥/일, 관로 L=17.6km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 60,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	60,000	1,022	7,579	21,819	29,580
국 비	36,000	614	4,547	13,091	17,748
시 도 비	12,000	204	1,516	4,364	5,916
시군구비	12,000	204	1,516	4,364	5,916

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2014. 9.  : 특별법에 따른 사업시행자(평창군수) 지정

○ 2014. 10. : 지방도 456호선 공사중첩구간(L=2.1km) 공사추진

○ 2014. 12. : 상수도 시설확충공사 계약업체 선정 및 공사추진

○ 2014. 12. : 식수전용저수지 계약업체 선정 및 공사추진

○ 2014. 12. : 특별법 제31조 및 동법 시행령 제18조에 따른 시행자 사업계획                  승인 신청(평창군 ⇒ 강원도)

□ 향후계획

○ 2017. 10. : 식수전용 저수지 및 상수도시설 확충공사 완료

평창도시계획도로 중로2-4호, 소로1-6호 개설공사

부서

도시주택과

담당자

신상대 (☎330-2418)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 도심지 혼잡도로개선을 통한 주민불편해소 및 주거환경정비

◦ 기반시설확충으로 지역관광 경쟁력확보 및 주민 삶의 질 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 1월 ～ 2015년 12월

○ 위 치 : 평창군 평창읍 종부리(평창의료원 앞) 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=789m, B=10~15m

-중로2-4호 L=497m, B=15.0m, 소로1-6호 L=292m, B=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	3,100	88	500	500	2,012
국 비
시 도 비
시군구비	3,100	88	500	500	2,012

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  30 %)

○ 실시설계용역 완료 : 2013. 03. 25.

○ 평창군계획시설사업 실시계획인가고시 : 2013. 07. 16.

◦ 분할측량 및 보상완료 : 2013년 3월 ~ 2014. 12월

□ 향후계획

○ 공사착공 및 준공 : 2015년 1월 ~ 2015년 12월

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

봉평도시계획도로 소로2-7호 개설공사

부서

도시주택과

담당자

신상대 (☎330-2418)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 도심지 혼잡도로개선을 통한 주민불편해소 및 주거환경정비

◦ 기반시설확충으로 지역관광 경쟁력확보 및 주민 삶의 질 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 1월 ～ 2015년 12월

○ 위 치 : 평창군 봉평면 창동리(뚱뚱슈퍼 뒤) 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=260m, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	2,200	835	305	25	1,035
국 비
시 도 비
시군구비	2,200	835	305	25	1,035

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  30 %)

◦ 실시설계완료 : 2013년 2월 ~ 4월

○ 평창군계획시설사업 실시계획인가고시 : 2013. 07. 26.

◦ 분할측량 및 보상완료 : 2013년 3월 ~ 2015. 12월

□ 향후계획

○ 보상협의 완료 및 공사착공, 준공 : 2016년 1월 ~ 2016년 12월

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

HOST CITY 올림픽거리 조성공사

부서

도시주택과

담당자

신상대 (☎330-2418)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 올림픽 개최도시인 평창의 아름다운 이미지를 제공

◦ 지역주민에게 휴식과 문화공간으로 활용할 수 있는 여건 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 2월 ～ 2014년 12월

○ 위 치 : 평창군 평창읍 하리(평창군청 앞 ~ 평창교) 일원

○ 규 모 : 올림픽거리 조성 L=500m → 인도정비, 가로수 식재, 가로화단 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	2,600	1,000	1,600
국 비
시 도 비
시군구비	2,600	1,000	1,600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100 %)

◦ 실시설계완료 : 2013년 2월 ~ 4월

◦ 사업기간 : 2013.10.10 ~ 2015.04.08.

- 경관가로정비사업 : 1,360백만원

- 지중화사업(군비 부담금)840백만원(한전 500, 통신사 340)

□ 향후계획

○ 가로수 및 시설물 유지관리

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

지역전략식품산업육성(기능성약선두유)사업

부서

농축산과

담당자

안병진(☎330-1371)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우수 강원(평창, 정선) 콩과 메밀․당귀․황기 등의 기능성 특수작물을 활용한 약선두유 사업은 평창군․정선군 콩 및 약재류를 수매하여 원료로 조달함으로써 생산 농가의 안정적인 소득보장과 고용창출로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2018년(5년)

○ 위 치 : 평창군 대화면 서울대학교 그린바이오 과학기술원 산학협력단지 내

○ 규 모 : 약선두유제조공장(건축연면적 1,440.87㎡ 지상2층) 및 제조설비 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,004백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	5,004	-	230	2,800	1,974
국 비	2,202	-	115	1,100	987
도 비	661	-	34.5	330	296.5
군 비	1,541	-	80.5	770	690.5
자 부 담	600	-	-	600	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   5%)

○ 사업계획 승인 및 사업비 확정 : ’14. 5. 8

○ 사업단 사단법인 허가 및 등기완료, 사업자등록 : ‘14. 5. 26

○ 사업단 사무국 구성(사단법인 : 의사결정 기구 역할) : ‘14. 6. 1

○ 기능성약선두유사업단 총회 및 워크숍, 사업설명회 개최 : 6회

□ 향후계획

○ 약선두유 공동이용시설(공장) 설비 및 기술검토 : 2015. 6 ~ 8월

○ 약선두유 제조공장 준공 : 2015. 9 ~ 2015. 12월

○ 기능성 약선두유 시제품 생산 : 2015. 12 ~ 2016. 2월

○ 기능성 약선두유 제품 생산 및 판촉·홍보 : 2016. 2월 이후

오대천 생태하천복원사업

부서

환경위생과

담당자

이용구 (☎330-2331)

□ 사업목적 및 필요성

○ 오대천 생태하천 복원으로 수질개선 및 친수공간 조성

○ 비오점물질에 대한 저감과 생태복원을 통하여 오대천을 생태명소로 되살려    동강, 남한강 등 하류수계 수질개선에 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2009년 ~ 2015년

○ 사업위치 : 평창군 진부면 동산리 ~ 장전리

○ 사업규모 : L=33.2㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	16,800	9,426	7,374	0	0
국 비	11,760	6,082	5,678	0	0
기 금	3,528	1,832	1,696	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	1,512	1,512	0	0	0

※ 2014년 말 이월금액 2,177백만원

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 위·수탁 협약 체결 (평창군 ↔ 한국환경공단) : 2008. 8. 5

○ 기본 및 실시설계 용역 준공 : 2011. 4. 28

○ 전체 및 1차 공사 계약 : 2011. 12. 23

○ 1차 공사 (여울 4개소 준공) : 2012. 1. 6 ~ 8. 27

○ 2차 공사 (생태습지 일부공사 준공) : 2012. 8. 28 ~ 2013. 7. 13

○ 3차 공사 (가동보, 어도 3개소, 징검여울 1개소) : 2013. 4. 1 ~ 2014. 6. 4

□ 향후계획

○ 산책로, 생태습지, 친수공간 조성, 여울2개소

□ 사업변경 내역 : 해당없음

한강 역사, 문화적 시원지 복원사업

부서

환경위생과

담당자

이용구 (☎330-2331)

□ 사업목적 및 필요성

○ 한강의 시원지인 우통수에 대한 샘터 복원, 체험시설 설치 등을 통하여

시원지의 역사, 문화적 가치를 새롭게 조명하고 “생명의 물 한강”을 상징화

하고 탐방객들에게 새로운 체험거리 제공

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2010년 ~ 2014년

○ 사업위치 : 평창군 진부면 동산리

○ 사업규모 : 연면적 980.24㎡(오대샘터복원, 한강시원지체험관, 음수체험관)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,991백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	4,991	2,061	2,930	0	0
국 비	2,496	1,086	1,410	0	0
시 도 비	749	339	410	0	0
시군구비	1,746	636	1,110	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사업기본계획 수립 : 2009. 3.

○ 기본설계 용역 완료 : 2010. 4 ~ 9.

○ 5대 샘터 복원 공사완료 : 2011. 5. 2 ~ 10. 31

○ 한강시원지 체험관 건축설계공모 및 설계 : 2011. 4 ~ 2012. 6

○ 한강시원지 체험관 전시분야 제안공모 및 설계 등 : 2011. 11. 8 ~ 2012. 6. 27

○ 한강시원지 체험관 실시설계용역(건축) 계약심사 의뢰(강원도) : 2012. 8.

○ 한강시원지 체험관 신축공사 발주(일반 6개, 감리 3개) : 2013. 1 ~ 2.

○ 한강시원지 체험관 신축공사 착공 : 2013. 4.

○ 한강시원지 체험관 신축공사 준공 : 2014. 12.

□ 사업변경 내역 : 해당없음