평창군 고시 제 2016-29호

평창군 봉평면 농촌중심지활성화사업

시행계획 고시

봉평면 농촌중심지활성화사업 시행계획에 대하여 농어촌정비법 제59조, 제60조 같은법 시행령 제82조 규정에 의거 다음과 같이 고시합니다.

2016년   3월   25일

평     창     군     수

1. 고시 내용 : 아래와 같음.

2. 관계서류 및 도서는 평창군청 도시주택과(☏ 033-330-2015) 및

봉평면사무소 총무담당(☏ 033-330-2605)에 비치하여 일반인에게 보입니다.

3. 사업시행자 : 평창군(일괄위탁 : 한국농어촌공사 원주지사)

봉평면 농촌중심지활성화사업 시행계획서

1. 사업개요

○ 위    치 : 강원도 평창군 창동리 일원

○ 사업기간 : 2014 ~ 2017년(4년간)

○ 주요사업내용

- 기초생활기반확충 : 문화복지센터, 체육관 리모델링

- 지역경관개선 : 기풍로 가로경관 및 포장공사, 경관조성, 무대경관조성

○ 소요사업비 : 6,790백만원(국비: 4,690, 지방비: 2,100)

2. 추진경위

2014. 03. 11 : 기본계획 착수

2014. 03. ~ 09.(6회) : 봉평면소재지 추진위원회 회의

2014. 03. ~ 12. : 봉평면 소재지 기본계획 수립

2015. 03. ~ 12. : 봉평면 소재지 시행계획 수립

2016. 03. ~ 2017. 12. : 공사착수 및 준공예정

3. 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	연차별 사업비 투자내역					비 고
	합 계	2014년	2015년	2016년	2017년
합 계	6,790	688	886	1,857	3,359	<>외서:자부담
◦ 국 비	4,690	482	620	1,300	2,288
◦ 지방비	2,100	206	266	557	1,071
◦ 민간부담	<6>	-	<6>	-	-

4. 기본계획 승인내역

(단위 : 백만원)

구 분	사업명	사 업 내 용	사업비(백만원)	비 고
		기본계획	기본계획
합 계			6,790
기초 생활 기반 확충	생활 기반	□ 문화복지센터 리모델링 810㎡(목욕탕, 체력단련실, 동아리실, 다목적실)	1,446
		□ 체육관 리모델링 777㎡(경기장, 무대, 탈의실, 샤워실, 화장실)	1,342
지역 경관 개선	경관	□ 기풍로 가로경관 (전선 지중화 698m, 전선 및 통신 선로)	2,395
		□ 경관조성	467
		□ 무대경관조성 (시장 280-5도 외 2필지, 무대 80㎡)	46	‘15.7.13 선승인
지역 역량 강화	교육	□ 리더교육, 주민교육, 선진지견학(국내,국외)	230	‘14.6.23 선승인
	컨설팅	□ 권역활성화컨설팅, 체험프로그램개발, 축제지원, 홈페이지구축 및 운영, 정보화기기 구축	102
	마을 경영 지원	□ 전문가 자문료, 추진위윈회 회의비	24
제경비	부대비용	□ 설계비, 관리비 등	738

5. 기본계획/시행계획 대비표

(단위 : 백만원)

구 분	사업명	사 업 내 용		사업비(백만원)		비 고
		기본계획	시행계획	기본계획	시행계획
합 계				6,790	6,790
기초 생활 기반 확충	생활 기반	□ 문화복지센터 리모델링 810㎡(목욕탕, 체력단련실, 동아리실, 다목적실)	□ 문화복지센터 리모델링 810㎡(목욕탕, 체력단련실, 동아리실, 소공연장, 회의실)	1,231	1,446
		□ 체육관 리모델링 777㎡ (경기장, 무대, 탈의실, 샤워실, 화장실)	□ 체육관 리모델링 777㎡ (경기장, 무대, 준비실, 대기실, 샤워실, 화장실, 소방시설)	863	1,342
지역 경관 개선	경관	□ 기풍로 가로경관 (전선 지중화 698m, 전선 및 통신 선로)	□ 기풍로 가로경관 및 포장공사 (시가지 환경정비, 도로 및 포장공사 628m)	2,802	2,395
		□ 경관조성 (산책로 조성(L=260m), 포토존)	□ 경관조성 (문화복지센터 및 생활체육관 주변공원조성)	582	467
		□ 무대경관조성 (시장 280-5도 외 2필지, 무대 80㎡)	□ 무대경관조성 (시장 280-5도 외 2필지, 무대 80㎡)	45	46	‘15.7.13 선승인
지역 역량 강화	교육	□ 리더교육, 주민교육, 선진지견학(국내,국외)	□ 리더교육, 주민교육, 선진지견학(국내,국외)	230	230	‘14.6.23 선승인
	컨설팅	□ 권역활성화컨설팅, 체험프로그램개발, 축제지원, 홈페이지구축 및 운영, 정보화기기 구축	□ 권역활성화컨설팅, 체험프로그램개발, 축제지원, 홈페이지구축 및 운영, 정보화기기 구축	102	102
	마을 경영 지원	□ 전문가 자문료, 추진위윈회 회의비	□ 전문가 자문료, 추진위윈회 회의비	24	24
제경비	부대비용	□ 설계비, 관리비 등	□ 설계비, 관리비 등	911	738

6. 기본계획/시행계획 사업비 변경비율   (2016년 3월 1일 시행)

(단위 : 백만원)

구 분	사업명		사업비(백만원)		증감 (△)	절대값	변경 비율
	기본계획	시행계획	기본계획	시행계획
합 계			6,790	6,790	-	1,390	20.5%
소 계			2,094	2,788	694	694	33.1%
기초 생활 기반 확충	□ 문화복지센터 리모델링	□ 문화복지센터 리모델링	1,231	1,446	215	215
	□ 체육관 리모델링	□ 체육관 리모델링	863	1,342	479	479
소 계			3,429	2,908	△521	523	15.3%
지역 경관 개선	□ 기풍로 가로경관	□ 기풍로 가로경관 및 포장공사	2,802	2,395	△407	407
	□ 경관조성	□ 경관조성	582	467	△115	115
	□ 무대경관조성	□ 무대경관조성	45	46	1	1
소 계			356	356	-	-	0.0%
지역 역량 강화	□ 교육	□ 교육	230	230	-	-
	□ 컨설팅	□ 컨설팅	102	102	-	-
	□ 마을경영지원	□ 마을경영지원	24	24	-	-
제경비	□ 부대비용	□ 부대비용	911	738	△173	173	19.0%

※ 지역개발사업 시설물 등 설치·운영 기준(2016.03.01.) 제1장 제3조 2항에 따라 (절대값 기준 60%미만 변경시) 시장·군수 승인

7. 시행계획 승인요청 내역

가. 사 업 량

사 업 명	기본계획	기승인	금회시행계획	비 고
합 계	6개사업	2개사업	4개사업
① 문화복지센터	1		1
② 체육관	1		1
③ 기풍로 가로경관 및 포장공사	1		1
④ 경관조성	1		1
⑤ 무대경관조성	1	1		‘15.7.13 선승인
⑥ 지역역량강화	1	1		‘14.6.23 선승인

나. 사 업 비

(단위 : 천원)

사 업 명	기본계획 (A)	기승인	금회시행계획 (B)	증△감	비 고
합 계	6,790,000	399,280	6,790,000	-
① 문화복지센터	1,231,000		1,446,362	215,362
② 체육관	863,000		1,341,640	478,640
③ 기풍로 가로경관 및 포장공사	2,802,000		2,394,844	△407,156
④ 경관조성	582,000		466,860	△115,140
⑤ 무대경관조성	45,000	43,280	45,843	2,563	‘15.7.13 선승인
⑥ 지역역량강화	356,000	356,000	356,000	-	‘14.6.23 선승인
⑦ 제경비	911,000		738,451	△172,549

8. 세부사업계획

사 업 명	기본계획	시행계획	비고
계	6개사업	6개사업
문화복지 센터	◦ 사업비 : 1,231 백만원 ◦ 위 치 : 창동리 396-3 구)봉평중고등학교 ◦ 사업량 - 리모델링 810㎡(3층까지 동일)	◦ 공사비 : 1,446 백만원 ◦ 위 치 : 창동리 396-3 구)봉평중고등학교 ◦ 사업량 - 리모델링 810㎡(3층까지 동일) - 동아리실 및 컨테이너 철거 - 건물 내외부 전체 리모델링 - 1층 목욕탕 - 2층 동아리실, 체력단련장 - 3층 소공연장, 회의실	실시설계 및 주민의견수렴
체육관	◦ 사업비 : 863 백만원 ◦ 위 치 : 창동리 396-3 구)봉평중고등학교 체육관 ◦ 사업량 - 건축면적 777.77㎡	◦ 사업비 : 1,342 백만원 ◦ 위 치 : 창동리 396-3 구)봉평중고등학교 체육관 ◦ 사업량 - 건축면적 777.77㎡ - 건물 내외부전체 리모델링 - 소방시설 및 부대시설 추가 반영	실시설계 및 주민의견수렴
기풍로 가로경관 및 포장공사	◦ 사업비 : 2,802 백만원 ◦ 위 치 : 창동리 기풍로 일대 ◦ 사업량 - L = 698m - 전기통신선로 지중화사업	◦ 사업비 : 2,395 백만원 ◦ 위 치 : 창동리 기풍로 일대 ◦ 사업량 - L = 628m - 시가지 환경정비, 도로 및 포장공사 628m	사업량 감소
경관조성	◦ 사업비 : 582 백만원 ◦ 위 치 : 원길리 965-9임 일원 ◦ 사업량 - 산책로 조성(L=260m) - 포토존	◦ 사업비 : 467 백만원 ◦ 위 치 : 창동리 396-3 ◦ 사업량 - 문화복지센터 및 생활체육관 주변 공원조성	주민의견 수렴에 따른 사업위치 변경 (축제 중심지)
무대경관조성	◦ 사업비 : 45 백만원 ◦ 위 치 : 창동리 281-1대 외 2필지 ◦ 사업량 - 공연시설 조성(104㎡)	◦ 사업비 : 46 백만원 ◦ 위 치 : 창동리 281-1대 외 2필지 ◦ 사업량 - 공연시설 조성(1식) - 전기공사 1식 (설계추가)	‘15.7.13 선승인
지역역량 강화	◦ 사업비 : 356 백만원 ◦ 사업량 - 주민교육, 리더교육, 선진지견학, 컨설팅 - 마을경영지원	◦ 사업비 : 356 백만원 ◦ 사업량 - 주민교육, 리더교육, 선진지견학, 컨설팅 - 마을경영지원	‘14.6.23 선승인

사 업 시 행 계 획 개 요

□ 대상지역의 범위

위    치 : 강원도 평창군 봉평면 창동리 일원

권역규모 : 법정리 1, 행정리 4

면    적 : 21,741ha (농경지 1,735ha, 임야 18,777ha, 기타 1,217ha)

가구·인구 : 663호(농가 173, 비농가 490), 1,508명(남 766, 여 742)

□ 사업기간 : 2014년 01월~2017년 12월(4년간)

□ 총사업비 : 6,790백만원(국비 4,690백만원, 지방비 2,100백만원)

▸자부담 : 6백만원 (총 사업비에는 미포함)

□ 연차별 사업투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	연차별 사업비 투자내역					비 고
	합 계	2014년	2015년	2016년	2017년
합 계	6,790	688	886	1,857	3,359	<>외서:자부담
◦ 국 비	4,690	482	620	1,300	2,288
◦ 지방비	2,100	206	266	557	1,071
◦ 민간부담	<6>	-	<6>	-	-

기 능 별 사 업 내 역

(단위 : 천원)

사 업 명	기본 계획		시행 계획		증감 내역		사유
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
합 계	1식	6,790,000	1식	6,790,000	-	-
○ 기초생활기반확충	1식	2,094,000	1식	2,788,002		694,002
문화복지센터	810㎡	1,231,000	810㎡	1,446,362	-	215,362
체육관	778㎡	863,000	778㎡	1,341,640	-	478,640
○ 지역경관개선사업	1식	3,429,000	1식	2,907,546		△521,453
기풍로 가로경관 및 포장공사	L=698m	2,802,000	L=698m	2,394,844	-	△407,156
경관조성	L=260m	582,000	1건	466,860	-	△115,140
무대경관조성	104㎡	45,000	1건	45,843 기승인(43,280)	-	2,563	2015.07.13. 선승인, 전기공사 추가시행
○ 지역역량강화사업	1식	356,000		356,000		-	2014.06.24 선승인
교육	1건	230,000	1건	230,000	-	-
컨설팅	1건	102,000	1건	102,000	-	-
마을경영지원	1건	24,000	1건	24,000	-	-
○ 제 경 비		911,000		738,451		△172,549
-기본계획,세부설계, 공사감리비등		911,000		738,451	-	△172,549

사 업 비 수 지 예 산 서

(수입)

(단위 : 천원)

구 분	기본계획	시행계획				비고
		시행계획	기승인	금회승인	향후계획
합 계	6,790,000	6,790,000	399,280	6,790,000	-
◦ 국 비	4,690,000	4,690,000	279,496	4,690,000	-
◦ 지방비	2,100,000	2,100,000	119,784	2,100,000	-
- 군 비	2,100,000	2,100,000	119,784	2,100,000	-

(지출)

(단위 : 천원)

구 분		기본계획	시행계획				비고
			시행계획	기승인	금회승인	향후계획
합 계		<7,000> 6,790,000	<7,000> 6,790,000	<7,000> 399,280	<6,000> 6,790,000		<>:외서: 자부담
H/W 사업	문화복지센터 조성	1,231,000	1,446,362		1,446,362	-
	체육관 리모델링	863,000	1,341,640		1,341,640	-
	기풍로 가로경관 및 포장공사	2,802,000	2,394,844		2,394,844
	경관조성	582,000	466,860		466,860	-
	무대경관조성	45,000	45,843	43,280	45,843	-
S/W 사업	지역역량강화	<7,000> 356,000	<7,000> 356,000	<7,000> 356,000	<6,000> 356,000	-
기타	제경비	911,000	738,451		738,451