평창군 고시 제 2016-40호

평창군 미탄면 농촌중심지활성화사업

기본계획 고시

미탄면 농촌중심지활성화사업 기본계획에 대하여 농어촌정비법 제58조 같은법 시행령 제82조 규정에 의거 다음과 같이 고시합니다.

2016년   4월  22일

평     창     군     수

1. 고시 내용 : 아래와 같음.

2. 관계서류 및 도서는 평창군청 도시주택과(☏ 033-330-2015) 및 미탄면

사무소 산업개발담당(☏ 033-330-2662)에 비치하여 일반인에게 보입니다.

3. 사업시행자 : 평창군(일괄위탁 : 한국농어촌공사 원주지사)

평창군 미탄면 농촌중심지활성화

□ 일반현황

○ 위    치 : 평창군 미탄면 창1~3리

○ 면    적 : 1,068.8 ha

○ 가구 및 인구 : 416호(농가 147,비농가 269), 884명(남 448,여 436)

○ 사 업 량 : 3개부문 8개사업 (H/W 6개사업, S/W 2개사업)

○ 사 업 비 : 5,900백만원(국비 4,100, 군비 1,800, 자부담 22)

○ 사업기간 : 2015년 ~ 2018년(4년)

□ 비전 및 목표

○ 비전

- 시대와 세대를 아우르는 길목의 쉼터, 미탄면

○ 목표

- 주민의견 수렴 통한 기초생활기반시설 확충으로 주민편의 개선

- 지역주민의 안식처가 되어줄 쉼터 제공으로 삶의 질 향상

- 안전한 거리경관조성과 오래전부터 이어온 5일장 장소제공

- 자치역량강화로 지역의 미래를 함께 만들어감으로써 지역유대 강화

□ 그간 추진경과

○ 기본계획수립 착수 보고회 : ’15. 3. 13.

○ 주민설명회 : ‘15. 4. 23.

○ 현장조사 : ‘15. 5. 21. ~ 22.

○ 3자(지자체, 추진위원회, 공사) 간담회 : ‘15. 8. 28.

○ 평창군 업무협의 : ‘15. 10. 20.

○ 추진위원회의 : ‘15. 11. 10.(1차), `15. 12. 3.(2차)

○ 강원도 기본계획 수립보고회 : ‘15. 12. 21.

□ 사업계획(총괄)

구 분	세부사업명	사업량	사업비(백만원)			비고
			계	보조	자부담
계			5,900 (22)	5,900	(22)
H/W	소 계		5,002 (12)	5,002	(12)
	평창아라리복합센터	1식	855	855	-
	전통시장 환경개선	1식	800	800	-
	주차공원	1식	703	703	-
	미탄아라리거리조성	1식	2,156	2,156
	간판정비사업	1식	48 (12)	48	(12)
	다목적광장조성	1식	440	440	-
S/W	소 계		309 (10)	309	(10)
	교육부분	1식	238 (10)	238	10
	홍보마케팅부분	1식	-	-	-
	마을경영지원	1식	71	71	-
제경비	소 계		589	589	-
	세부설계비	1식	112	112	-
	공사감리비	1식	251	251	-
	사업관리비	1식	74	74	-
	잡지출	1식	12	12	-
	기본 및 경관계획	1식	140	140	-

□ 세부사업내용

① 평창아라리 복합센터

○ 필 요 성

- 미탄면 내 주민단체들의 회의 및 커뮤니티 공간의 필요

- 미탄면 내 농촌관광시설의 홍보 및 안내 시설이 부족함

- 현재 미탄면 내 청소년, 노인을 대상으로 문화·복지 교육을 수행할 수 있는 공간필요

○ 위    치 : 미탄면 창리 719-8

○ 사 업 비 : 855백만원(보조 855백만원)

○ 사업기간 : 2017년

○ 주요 계획내용

- 신축공사(161.9[eqn: m ^{2}]/360백만원)

- 대체에너지 시설(태양열 6kw) (1식/30백만원)

- 대체에너지 시설(지열설비) (1식/50백만원)

- 쉼터조성(600㎡/230백만원)

- 식재공사(1식/79백만원)

- 파고라(10EA/100백만원)

- 벤치(20EA/6백만원)

○ 투자계획

구분	연차별 투자(백만원)
계	1년차	2년차	3년차	4년차
855	-	-	855	-

○ 활용 및 운영계획

- 미탄면 내 주민단체들의 회의공간, 권역사무실로 활용

- 미탄면 내 청소년․노인을 대상으로 문화·복지 교육을 수행할 수 있는 공간으로 활용

- 미탄주식회사에서 위탁 운영·관리 중인 농촌체험관광 시설의 안내 및 홍보

- 관리는 미탄면 추진위원회에서 관리

- 기타 운영 및 관리에 관한 사항은 추진위원회의 운영 규약에 따름

- 운영관리 비용의 경우 미탄면 번영회에서 50%, ㈜미탄주식회사에서 50%를 부담함

② 전통시장 환경개선

○ 필 요 성

- 5일장이 형성되어 있으나 기반시설이 열악하여 활성화되지 못함

- 아케이드 설치를 통해 이용객들의 편의성과 환경개선이 필요

○ 위    치 : 평창군 미탄면 창리 706-3

○ 사 업 비 : 800백만원(보조 800백만원)

○ 사업기간 : 2018년

○ 주요 계획내용

- 비가림막(500[eqn: m ^{2}]/750백만원)

- 보안등 설치(10EA/50백만원)

○ 투자계획

구분	연차별 투자(백만원)
계	1년차	2년차	3년차	4년차
800	-	-	-	800

○ 활용 및 운영계획

- 5일장 관련 문화행사 시 공연장으로 활용함으로써 외부관광객 유치효과 기대

- 관리는 미탄면 추진위원회와 상인회에서 공동으로 관리하고, 주민들이 상시 판매가 가능토록 운영함

- 기타 운영 및 관리에 관한 사항은 추진위원회의 운영 규약에 따름

③ 주차공원

○ 필 요 성

- 현재 미탄면의 경우 증가하는 차량에 비해 주차공간이 부족하여 노상주차가 빈번하여 안전사고가 증가

- 주차공원을 조성함으로써 인근 학교 행사시 주차난 해소와 외부 방문객 편의증대 및 거주민 휴식공간 제공

○ 위    치 : 평창군 미탄면 창리 277-1, 4, 5

○ 사 업 비 : 703백만원(보조 703백만원)

○ 사업기간 : 2017 ~ 2018년

○ 주요 계획내용

- 부지매입(1043[eqn: m ^{2}]/326백만원)

- 건물매입(1043[eqn: m ^{2}]/146백만원)

- 철거비(1043[eqn: m ^{2}]/68백만원)

- 포장공사(1043[eqn: m ^{2}]/110백만원)

- 조경식재(10주/3백만원)

- 벤치(4EA/2백만원)

- 보안등 설치(6주/48백만원)

○ 투자계획

구분	연차별 투자(백만원)
계	1년차	2년차	3년차	4년차
703	-	-	596	107

○ 활용 및 운영계획

- 주차시설 조성으로 주차난 해소 및 5일장 활성화

- 관리는 미탄면 추진위원회에서 공동으로 관리

- 기타 운영 및 관리에 관한 사항은 추진위원회의 운영 규약에 따름

④ 미탄아라리 거리조성

○ 필 요 성

- 미탄면 중심거리의 경관정비를 통해 중심지 경관향상 필요

- 가로경관정비를 통해 미탄면을 인식시킬 수 있는 기초 환경을 조성함으로써 지역 이미지 제고

- 중심지 내 보도정비를 통해 지역 주민 및 방문객의 접근성 및 편의성 향상

- 현재 중심가로 내 폐가옥이 소방도로 계획선을 침범하여 소방차의 진입이 어려움

- 주민들의 안전을 위해 폐가정비를 통한 소방도로 진입환경개선 필요

- 미탄면 진입부분의 환경개선을 통해 미탄면 중심지 경관개선 효과 기대 및 주민쉼터로 조성

○ 위    치 : 평창군 미탄면 중심가로

평창군 미탄면 창리 693-2, 3, 4, 9

평창군 미탄면 창리 700-2, 701-2, 5, 8

○ 사 업 비 : 2,156백만원(보조 2,156백만원)

○ 사업기간 : 2017년 ~ 2018년

○ 주요 계획내용

- 가로수 식재 (200주/150백만원)

- 포장공사 (2,140[eqn: m ^{2}]/224백만원)

- 보도제거 및 설치(740[eqn: m ^{2}]/220백만원)

- 가로등교체 및 전기공사(30주/240백만원)

- 아트타일(400[eqn: m ^{2}]/134백만원)

- 벽화조성(400[eqn: m ^{2}]/42백만원)

- 토지매입(800/[eqn: m ^{2}]248백만원)

- 건물매입(800[eqn: m ^{2}]/500백만원)

- 철거비(800[eqn: m ^{2}]/233백만원)

- 조경식재(1식/47백만원)

- 파고라(4EA/40백만원)

- 벤치(10EA/3백만원)

- 보안등 설치(10EA/75백만원)

○ 투자계획

구분	연차별 투자(백만원)
계	1년차	2년차	3년차	4년차
2,156	-	-	1,738	418

○ 관리 및 운영계획

- 관리는 미탄면 추진위원회에서 공동으로 관리

- 기타 운영 및 관리에 관한 사항은 추진위원회의 운영 규약에  따름

⑤ 간판정비사업

○ 필 요 성

- 미탄면 중심지 가로 내에 간판을 정비하여 중심지 가로에 대한 이미지 개선을 통해 미탄면 지역 활성화 및 경관개선

○ 위    치 : 평창군 미탄면 중심가로

○ 사 업 비 : 60백만원(보조금 48백만원, 자부담 12백만원)

○ 사업기간 : 2017년

○ 주요 계획내용

- 간판정비 (1식/60백만원)

○ 투자계획

구분	연차별 투자(백만원)
계	1년차	2년차	3년차	4년차
48 (12)	-	-	48 (12)	-

○ 관리 및 운영계획

- 관리는 미탄면 추진위원회에서 공동으로 관리

- 기타 운영 및 관리에 관한 사항은 추진위원회의 운영 규약에  따름

⑥ 다목적광장

○ 필 요 성

- 5일장 내 위치한 폐가를 정비하여 5일장 환경 및 경관 이미지 개선 필요

- 현재 5일장 공간이 협소하고 시장 활성화를 위한 문화공연 등의 행사가 이루어질 수 있는 공간이 부족함

○ 위    치 : 미탄면 창리 706-12, 13, 707-6, 7

○ 사 업 비 : 440백만원(보조금 440백만원)

○ 사업기간 : 2018년

○ 주요 계획내용

- 토지매입(305[eqn: m ^{2}]/140백만원)

- 건물매입(305[eqn: m ^{2}]/187백만원)

- 철거비(305[eqn: m ^{2}]/30백만원)

- 포장공사(305[eqn: m ^{2}]/24백만원)

- 무대설치(1식/59백만원)

○ 투자계획

구분	연차별 투자(백만원)
계	1년차	2년차	3년차	4년차
440	-	-	-	440

○ 활용 및 운영계획

- 다목적 광장조성으로 평상시 주민 휴식공간, 주차공간, 5일장 시 문화행사, 장터 등 다목적 활용

- 관리는 미탄면 추진위원회와 상인회에서 공동으로 관리

⑦ 지역역량강화(S/W)

○ 필 요 성

- 사업을 성공적으로 추진하기 위하여 주민의 참여의식 제고와          높은 역량이 필요.

- 각 시설의 활성화를 위한 운영 노하우 습득, 홍보, 마케팅 등          다양한 분야의 능력 배양 필수.

- 경쟁력 강화를 통하여 사업 완료 후에도 운영의 활성화 유지

○ 사 업 비 : 319백만원(보조 309백만원, 자부담 10백만원)

○ 사업기간 : 2015년 ~ 2018년(1∼4년차)

○ 주요 계획내용 : 1식 319백만원

* 교육부분(248백만원)

- 리더교육(84백만원): 리더육성교육

- 주민교육(42백만원): 전문가 초청, 주민워크숍

- 선진지견학(122백만원): 국내견학(1박 2일, 2박 3일, 해외)

* 마을경영지원(71백만원)

- 추진위원회의 지원(71백만원): 위원회 운영경비 지원