[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	기술지원과/환경농업부서	②담당자 (전화번호)	환경농업 선주혁 (330-1341)
③정책사업명	평창군 미생물배양센터 설치
④선정기준	30억 이상 예산 건설사업	⑤사업기간	2016년~2018년
⑥주요내용	□ 사업목적 ❍ 유용미생물을 이용한 친환경농업 확대 유도 및 농가 경영비 절감과 고품질 농산물 생산을 통한 농업경쟁력 강화 ❍ 친환경 유용미생물 공급으로 화학비료․농약사용 절감하여 자연 환경 보전 □ 사업개요 ❍ 사 업 명 : 평창군 미생물배양센터 설치 사업 ❍ 총사업비 : 3,133백만원(국비 1,644, 군비 1,469) * 한강수계기금 : 2741백만원(기금 1,644, 군비 1,097) ❍ 사업내용 : 미생물배양센터 신축(1동 526㎡) 및 배양설비설치 ❍ 사업장위치 : 용평면 백옥포리 181-4(1,974㎡) □ 추진현황 ❍ 사업 기본계획 수립 : 2016. 3월 ❍ 사업계획 제출(한강유역환경청) : 2016. 4월(4.28일 PPT발표) □ 향후 추진계획 ❍ 투융자심사 : 2016. 5월 ❍ 2017년도 지원계획 확정(한강유역환경청) : 2016. 8월 ❍ 2회추경 군비 반영 : 부지매입 및 건축설계비 : 2016. 8월 ❍ 공유재산(취득) 심의 : 2016. 8월 ❍ 미생물배양센터 및 배양설비 설치 : 2017. 2. ~ 9월 ❍ 미생물배양센터 시험운영 및 시제품생산 : 2017. 10. ~ 12월 ❍ 유용미생물 농가 공급 : 2018. 3월