[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

상하수도사업소/상수도

②담당자

(전화번호)

시설7급 민선기

(033-330-2441)

③정책사업명

상수관망 최적관리시스템 구축사업

④선정기준

30억 이상 예산 건설사업

⑤사업기간

2010년~2016년

(전년도 누락사업)

⑥주요내용

▢ 추진배경

❍ 블록체결, 관망정비 등 최적관리시스템을 구축하여 효율적인

수도시설 운영으로 유수율 제고 및 깨끗하고 안정적인 먹는 물 공급

▢ 사업개요

❍ 사업기간 : 2010년 ~ 2016년

❍ 위    치 : 평창군 일원(지방상수도 5개소)

❍ 사 업 량 : 블록 및 유지관리시스템 구축 1식, 관망정비 1식

❍ 사 업 비 : 38,297백만원【국비 19,149, 군비 19,148】

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기 투자액							2016년
		소 계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
합 계	38,297	37,240	5,990	4,688	9,273	8,361	5,990	2,938	1,057
국 비	19,149	19,120	3,895	1,888	5,054	3,319	2,995	1,969	29
군 비	19,148	18,120	2,095	2,800	4,219	5,042	2,995	969	1,028

※ 지원비율 : 국비(50%), 군비(50%)

❍ 수 탁 사 : 한국환경공

❍ 시 공 사 : ㈜태영건설 42.2%, 두산건설(주) 24.4%,

태백종합건설(주) 16.7%, (유)미래원토건 16.7%

❍ 공 정 률 : 85%

▢ 추진상황

❍ '10. 02. 23 : 위ㆍ수탁 협약체결(평창군 ↔ 한국환경공단)

❍ ‘12. 01. 31 : 지방상수도 통합운영사업 위·수탁 군의회 동의

❍ ‘12. 05. 30 : 시공업체 선정((주)태영건설 외 3개사)

❍ ‘15. 07. 26 : 성과판정위원회 개최(7명)

(성과판정기간 : ‘15. 07. 27 ~ ’16. 09. 26까지)

【사업추진사항】

❍ 총괄추진현황

구 분	공사기간	공정률(%)		비 고
		계 획	실 적
전체분	‘12. 06. 20 ~ ’16. 09. 26	85	85
1차분	‘12. 06. 20 ~ ’13. 04. 26	100	100	준 공
2차분	‘13. 04. 24 ~ ’14. 06. 23	100	100	준 공
3차분	‘13. 11. 11 ~ ’14. 12. 15	100	100	준 공
4차분	‘14. 05. 12 ~ ’15. 07. 03	100	100	준 공
5차분	‘15. 03. 11 ~ ’16. 09. 26	25	25	추진중

❍ 세부사업별 추진현황

- 단위블록구축 : 대블록 5, 중블록 6, 소블록 19, 단위블115 완료

- 관망정비 : 신설 4.1km, 교체 49km(공정률 85%)

- 유지관리시스템 : 통합센터 자동화 구축(공정률 85%)

- 유수율 : 85% 목표(현재 80.4%)

▢ 추진계획

❍ ‘15. 07. 26 ~ ’16. 09. 26 : 성과보증 검토 및 분석, 성과보증(14개월)

❍ ‘16. 09. 26 : 공사 준공(인수인계 및 시운전 포함)