[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

상하수도사업소/하수도

②담당자

(전화번호)

시설7급 박영미

(033-330-2448)

③정책사업명

삼양 농어촌마을하수도 설치공사

④선정기준

30억 이상 예산 건설사업

⑤사업기간

2015년~2017년

(전년도 누락사업)

⑥주요내용

▢ 추진배경

❍ 2018 평창 동계올림픽의 성공적 환경올림픽 개최와 동계올림픽

특구지구로 지정된 평창 건강올림픽 종합특구내 자연순응형

휴양·체감 지구의 개발촉진으로 지역사회의 발전을 도모하고,

송천의 수질오염 방지로 공공수역의 수질보전 및 지역사회의 건전한 발전과 공중위생 향상에 기여하고자 함.

▢ 사업개요

❍ 기    간 : 2015년∼2017년

❍ 위    치 : 평창군 대관령면 횡계2리 일원

❍ 사 업 량 : 소규모 공공하수처리장 신설 Q=300㎥/일

: 하수관로 L=2.863km 등

❍ 총사업비 : 3,957백만원 (국비 2,573, 기금 662, 군비 722)

(단위 : 백만원)

재원구분	총사업비	2015년	2016년	2017년
총사업비	3,957	280	429	3,248
국 비	2,573		300	2,273
기 금	662		77	585
군 비	722	280	52	390

※ 지원비율 : 국비(70%), 기금(18%), 군비(12%)

▢ 추진상황

❍ 평창군 하수도정비기본계획 전체변경(안) 승인 : 2014. 07. 25 (환경부)

- 승인내용 : 2015년(1단계) 계획시설

(시설용량 Q=300㎥/일, 하수관로 L=2.863km 등)

❍ 2016년 하수도분야 국고보조사업 예산안(신규) 가내시 : 2015. 09. 21

❍ 기본 및 실시설계용역 착수 추진 : 2015. 10. 21∼2016. 05. 17

❍ 지반조사용역 착수 추진 : 2015. 11. 06∼2016. 04. 03

❍ 시설예정부지 토지협의 : 2015. 12. 10 (동부지방산림청, 하늘목장)

❍ 공정률 : 45%(기본 및 실시설계)

▢ 추진계획

❍ 시설예정부지 협의 및 분할측량, 용지보상 등 : 2015. 12월∼2016. 01월

❍ 하수처리공법 선정 : 2016. 01월∼02월

❍ 기술검토, 재원협의 등 관계기관 협의 및 각종 인·허가 추진

: 2016. 03월∼05월

❍ 공사 발주 및 계약·착공 : 2016. 06월

❍ 전체공사 준공 및 운영·관리 : 2017. 12월