평창군 고시 제 2016-58호

평창군 평창읍 소재지종합정비사업

시행계획 변경 고시

평창읍 소재지종합정비사업 시행계획에 대하여 농어촌정비법 제59조, 제60조 같은법 시행령 제82조 규정에 의거 다음과 같이 변경 고시합니다.

2016년   5월  27일

평     창     군     수

1. 고시 내용 : 아래와 같음.

2. 관계서류 및 도서는 평창군청 도시주택과(☏ 033-330-2015) 및 평창읍

사무소 건설담당(☏ 033-330-2671)에 비치하여 일반인에게 보입니다.

3. 사업시행자 : 평창군(일괄위탁 : 한국농어촌공사 원주지사)

평창읍소재지 종합정비사업 시행계획서(1차변경)

(종부교 경관개선 변경)

2016. 05

	평창군

평창읍소재지 종합정비사업 시행계획서(1차변경)

1. 사업개요

❍ 위    치 : 평창군 평창읍 중리, 하리 일원

❍ 면    적 : 310㏊(농경지 39, 임야 33, 기타 238)

❍ 가구 및 인구 : 1,679호(농가 314, 비농가 1,365),  4,239명(남 2,143, 여 2,096)

❍ 사 업 량 : 3개부문 10개사업(H/W 5개사업, S/W 5개사업)

[H/W사업 기본계획]

- 지역주민 어울림공간(1차년도), 재래시장 명품거리(1차년도), 청소년 특화거리(1차년도)

- 청소년문화센터 및 다목적광장(2차년도), 종부교 경관개선(2차년도)

[S/W사업 기본계획]

- 교육부문(주민교육, 리더교육, 선진지견학), 컨설팅부문(읍면활성화, 브랜드)

- 홍보·마케팅(읍소재지 축제지원, 마을소식지 제작), 정보화(정보화기기 구축)

- 마을경영지원(전문가 자문료, 추진위원회 지원)

❍ 사 업 비 : 9,510백만원(국비 6,510, 지방비 3,000, 자부담 7)

▶ 자부담은 총 사업비에 미포함

❍ 사업기간 : 2014년 ~ 2017년(4개년)

2. 추진경위

❍ 기본계획수립 착수 : ’14. 03. 03

❍ 평창읍 기본계획협의(강원도청) : ‘14. 12. 18

❍ 평창읍 기본계획 승인(평창군) : ‘15. 03. 23

❍ 경관형성계획 용역시행(주경) : ‘15. 04. 23

❍ 세부설계 용역시행(청강) : ‘15. 05. 28

❍ 경관형성계획 용역준공(주경) : ‘15. 12. 18

❍ 세부설계 용역준공(청강) : ‘15. 12. 17

❍ 시행계획 1차 승인 : ‘16. 03. 25

❍ 시행계획 2차 승인요청 : ‘16. 05.

3. 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	연차별 사업비 투자내역					비 고
	합 계	2014년	2015년	2016년	2017년
합 계	9,510	957	886	3,046	4,621	<>외서:자부담
국 비	6,657	670	620	2,132	3,088
지 방 비	2,853	287	266	914	1,533
민간부담	<7>	<7>	-	-	-

4. 사업비 수지예산서

(수입)

(단위 : 천원)

구 분	기본계획	시행계획				비고
		합 계	기승인	금회승인	향후계획
합 계	<7,000> 9,510,000	<7,000> 9,510,000	<7,000> 3,397,277	1,300,000	4,812,723
국 비	6,657,000	6,657,000	2,378,094	910,000	3,368,906
지방비	2,853,000	2,853,000	1,019,183	390,000	1,443,817
- 군 비	2,853,000	2,853,000	1,019,183	390,000	1,443,817

(지출)

(단위 : 천원)

구 분		기본계획	시행계획				비고
			합 계	기승인	금회승인	향후계획
합 계		<7,000> 9,510,000	<7,000> 9,510,000	<7,000> 3,397,277	<-> 1,300,000	<-> 4,812,723	<>:외서: 자부담
기초생활기반확충	청소년문화센터 및 다목적광장	4,904,000	4,417,896			4,417,896
	지역주민 어울림공간	182,000	244,865	244,865		0
	재래시장 명품거리	530,000	589,430	589,430		0
지역경관개선	청소년특화거리	1,714,000	1,760,848	1,760,848		0
	종부교경관개선	731,000	1,147,961		1,147,961	0
역량강화	지역역량강화	<7,000> 371,000	<7,000> 371,000	<7,000> 371,000		0
기타	기본계획비	120,000	120,000	120,000		0
	세부설계비	189,000	189,000	63,659	34,031	91,310
	공사감리비	432,000	432,000	138,504	78,322	215,174
	사업관리비	108,000	108,000	34,626	14,224	59,150
	잡지출	49,000	49,000	15,710	14,479	18,811
	농어촌경관형성계획비	150,000	50,000	49,017	983	0
	일반농산어촌사업지원비	30,000	30,000	9,618	10,000	10,382

5. 세부사업계획

사 업 명	기 승인금액	금회시행계획	비고
계	4개 사업	1개 사업
청소년문화센터 및다목적광장	❍사업비: 4,417,896 ❍사업량 - 문화센터(1,089㎡) - 태양 광발전기(40kw) - 편의시설1식 - 부지조성(2,321㎡) 외	2016년 하반기설계
지역주민 어울림공간	❍사업비: 244,865 ❍사업량 - 부지조성(707㎡) - 부지포장(경계석281m, 인조화강블럭(435㎡), 태양 광블럭, 고무칩포장, 디딤석포장) - 편의시설1식(수목보호대,파고라,등의자외) - 조경식재(250㎡) 외 - 공원등5개소	-	기승인
재래시장 명품거리	❍사업비: 589,430 ❍사업량 - 부지조성및부대시설(2,340㎡) - 인조화강석블럭포장(2,920㎡) - 관문게이트1식,조형게이트2식 - 태양 광블럭22EA - 경계석910m	-	기승인
청소년 특화거리	❍사업비: 1,760,848 ❍사업량 - 도로정비및부대공사1식 - 포장(인조화강석블럭A=2,880㎡) - LED가로등14개소 - 안전휀스159경간 - 전선지중화(L=350m) - 경계석(516m)	-	기승인
종부교 경관개선	❍사업비: 561,857 ❍사업량 - 야경조명시설1식 - 교면포장 A=930㎡ - 편의시설5개소 - 캐노피 (시점L=15m,종점L=10m) - 조형물1식 외	❍사업비: 1,147,961 ❍사업량 - 조형물,게이트,파고라 제작설치 각2개소 - 눈꽃장식등 24개소 - 외장재 제작설치 392㎡ - 바닥재 설치 925㎡ - 교각 보수보강 1식 - 야경조명시설1식
지역역량 강화	❍사업비: 371,000 (7,000) ❍사업량 - 교육부분 - 홍보마케팅부분 - 정보화부분 - 컨설팅부분 - 마을경영지원	-	기승인

6. 기능별사업비 증감내역

(단위 : 천원)

사업명		당초시행계획	변경시행계획	증(△)감	절대값	변경비율
합계		<7,000> 9,510,000	<7,000> 9,510,000	-	-
기초 생활 기반	<소계>	5,616,000	5,252,191	△486,104	486,104	8.7%
	청소년문화센터 및다목적광장	4,904,000	4,417,896	△486,104	486,104
	지역주민 어울림공간	244,865	244,865	-	-
	재래시장 명품거리	589,430	589,430	-	-
지역 경관 개선	<소계>	2,322,705	2,908,809	586,104	586,104	25.2%
	청소년 특화거리	1,760,848	1,760,848	-	-
	종부교 경관개선	561,857	1,147,961	586,104	586,104
지역 역량 강화	<소계>	<7,000> 371,000	<7,000> 371,000	-	-	0.0%
	교육	<7,000> 253,000	<7,000> 253,000	-	-
	컨설팅	55,000	55,000	-	-
	홍보마케팅	22,000	22,000	-	-
	정보화	16,000	16,000	-	-
	마을경영	25,000	25,000	-	-
제경비	부대비용	1,078,000	978,000	△100,000	100,000	9.3%

7. 사업시행자 검토의견서

사업시행자 검토의견서

부 문 별	검 토 내 용
종부교 경관개선	< 사 업 개 요 > ⃞ 위 치 : 평창군 평창읍 중리 298-2대 외1필지 ⃞ 사업비 : 1,147,961천원 ⃞ 주요시설 ○ 토목공사 1식 - 조형물,게이트,파고라 제작설치 각2개소, - 눈꽃장식등 24개소 - 외장재 제작설치 392㎡, - 바닥재 설치 925㎡, - 교각 보수보강 1식 ○ 종부교 교각보수보강1식 - 보수 및 보강공사 1식, - 가도 및 축도공사, - 부대공사 ○ 부대공사 1식 - 야경조명시설1식 < 투 시 도 > < 검 토 사 항 > ⃞ 기본계획(금731,000천원) 대비 사업비 증감여부 (증416,961천원) ⃞ 금회승인신청금액(1차승인금액 금561,857천원＋경관형성수립비금100,000+ 청소년문화센터 및다목적광장 금486,104천원) (적합) ⃞ 단가산출서, 수량산출서, 공사비명세서의 적합성여부 (적합) ⃞ 추진위원회 의견 반영여부 (반영) ⃞ 인.허가 등 관련법 저촉여부 (하천점용허가-시행가능)

사 업 별 인 허 가 검 토 서

사업명	검 토 의 견
종부교 경관개선	▷ 하천법」 제33조제1항(제38조제1항), 같은 법 시행령 제34조제1항(제45조제1항) 및 같은 법 시행규칙 제17조제1항(제20조제1항)에 따라 하천점용허가(하천예정지/홍수관리구역 안에서의 행위허가) 대상임 하천점용허가 신청 : 종부교 경관개선 공사를 위한 종부교 하부 보수보강 공사에 필요한 가도 및 축도 개설을 위한 임시점용 ○ 주요공사내용 1) 하상정리 및 가물막이 설치 2) 물돌리기 후 물막이 내 물푸기(양수) 3) 종부교 보수보강 시행 4) 완료 후 가물막이 철거, 하상정리