[별지 8] 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

평창황병산 사냥민속 체험관 건립

담당자

문화관광과 황재국(☎330-2714)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2007년 강원도 무형문화재 제19호로 지정된 「평창황병산사냥민속」의 체계적 전승 보전을 위한 전수 공간 확보 및 사냥민속 도구 제작과정의 동계올림픽 문화관광콘텐츠 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1월 ~ 2016. 12월

○ 위 치 : 평창군 대관령면 차항리 125번지 일원

○ 규 모 : 연면적 989㎡(지상 2층 1동)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,100		1,000	1,100
국 비	840		400	440
시 도 비	378		180	198
시군구비	882		420	462
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   5%)

○ 평창황병산사냥민속 체험관 건립 기본계획 수립 : 2013. 10월

○ 지방재정 투·융자 승인(강원도) : 2014. 03월

○ 건축 및 전기 등 실시설계 용역 완료 : 2015. 08월

○ 체험관 신축공사 착공 및 감리용역 착수 : 2015. 10월

□ 향후계획

○ 건축공사 및 감리용역 준공 : 2016. 10월

○ 황병산 사냥민속놀이 체험관 개관 : 2016. 11월

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

월정사 전시관 건립

담당자

문화관광과 황재국(☎330-2714)

□ 사업목적 및 필요성

○ 역사적 의의와 문화적 가치를 가진 월정사 성보박물관의 문화재를 보존·전승함으로써 불교문화 향상에 이바지하며, 2018 평창동계올림픽 문화 및 관광산업 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 05월 ~ 2016. 12월

○ 위 치 : 평창군 진부면 동산리 17-5번지

○ 규 모 : 전시관 1동(건축연면적 6,268.52㎡ 지하2층/지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	19,400	12,000	6,000	1,400
국 비	5,820	3,600	1,800	420
시 도 비	6,790	4,200	2,100	490
시군구비	6,790	4,200	2,100	490
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  90%)

○ 월정사 전시관 건립공사 착공 및 감리용역 착수 : 2012. 12월

○ 월정사 전시관 전시분야 착공 : 2014. 06월

□ 향후계획

○ 건축공사 준공 및 월정사 전시관 개관 : 2016. 12월

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	현 재	세부내역
사업기간	2011∼2015.12	2011∼2016.12	지열시스템으로의 설계 변경 및 물가 변동에 따른 자재가격 인상
총사업비	18,000백만원	19,400백만원

사업명

전통민속 상설공연장 건립

담당자

문화관광과 황재국(☎330-2714)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2018평창동계올림픽 대비 한국의 전통문화를 알리고 문화올림픽 자원으로 활용

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 01월 ~ 2017. 12월

○ 위 치 : 평창군 용평면 장평리 380-2

○ 규 모 : 공연장(지상2층 1동 연면적 2,330㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  6,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	6,900	3,900	500	1,500	1,000
국 비	1,800	800	200	800
시 도 비	540	450	60	30
시군구비	4,560	2,650	240	670	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 공유재산관리계획 승인(대체부지) : 2013. 06. 25

○ 사업관련용역(4건) 추진 : 2013. 07. 01 ~ 2015. 10. 23

○ 지구단위계획 변경용역 등 관련 용역 일시중지 : 2014. 01. 07 ~ 2015. 07. 05

- 주민의견 수렴에 따른 계획(안) 확정 지연

○ 대체부지(축협) 소유권이전 및 보상금 지급 : 2014. 02. 12

○ 건축, 전기, 소방, 통신 설계 완료 : 2015. 10월

○ 건축허가 등 관련인허가 완료 : 2015. 12월

□ 향후계획

○ 건축 공사 등 사업 착공 : 2016. 04월

○ 전통민속 상설공연장 준공 : 2017. 12월

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	현 재	세부내역
사업규모(연면적)	2,182㎡	2,330㎡	대체부지 구입 및 사업 면적 증가
총사업비	4,500백만원	6,900백만원

사업명

오대산 자연명상 마을 조성

담당자

문화관광과 황재국(☎330-2714)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2018 평창동계올림픽 효과 극대화를 위한 배후 지역의 관광인프라 구축 및 현대인의 웰니스 트렌드 증가 추세에 대비한 명상산업 관광상품화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 05월 ~ 2016. 12월

○ 위 치 : 평창군 진부면 동산리 24번지 일원

○ 규 모 : 명상마을 조성 170,000㎡ (51,000평)

- 명상센터 등 총 20동【건축연면적 : 10,670㎡ (3,200평)】

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,525백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	29,525	3,000	10,000	8,300	8,225
국 비	9,000	1,500	5,000	2,500
시 도 비	2,700	450	1,500	750
시군구비	6,300	1,050	3,500	1,750
민간자본	11,525			3,300	8,225

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 오대산 자연명상마을 조성 추진계획수립 : 2012. 03월

○ 용역(2건) 추진 : 2013. 06. 10 ~ 2014. 06. 09

- 군관리계획(오대산 자연명상지구) 결정 용역

- 군관리계획결정에 따른 전략환경영향평가 용역

○ 기본구상 용역 준공 : 2013. 08. 23

○ 건축 및 기반시설 실시설계용역 착수 (절대공기: 300일) : 2014. 02월

○ 전략환경영향평가 관련 환경영향평가협의회 심의 실시 : 2014. 04월

○ 부지정비공사(오대산호텔 철거) 준공 : 2014. 05월

○ 군관리계획(오대산 자연명상지구) 결정(변경) 신청 : 2014. 05월

○ 군관리계획 결정(변경) 주민의견청취 공람·공고 : 2014. 09월

○ 군관리계획 결정(변경) 평창군의회 의견 청취안 『찬성』의결 : 2015. 01월

○ 평창군 군계획위원회(2015년 제1회 본위원회) 자문(심의) : 2015. 01월

○ 군관리계획 결정(변경) 강원도 입안 : 2015. 04월

○ 문화재지표조사 실시 : 2015. 05월

○ 군관리계획 결정 관련법 관련부서 협의 및 검토 : 2015. 07월

○ 평창동계올림픽 특구지정 중도위 심의 조건부 의결 : 2015. 07월

○ 문화재 발굴 조사 완료 : 2015. 10월

○ 명상마을 기반시설공사 착공 및 책임감리 착수 : 2015. 10월

사업명

올림픽도시 종합관광안내시스템 구축

담당자

문화관광과 강경순(☎330-2742)

□ 사업목적 및 필요성

○ 올림픽 개최도시의 주요 관광지 홍보·안내시스템을 선진 맞춤형으로 구축       하여 관광정보제공 기반강화 및 채널 다양화로 올림픽 성공 개최기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015~2017

○ 위 치 : 평창군 일원

○ 규 모 : 관광안내센터설치(증축1,신축1,교체1,이동형5), 관광안내서비스 기능개선

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,060백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,060		580	1,436	2,044
국 비	2,030		290	718	1,022
시 도 비	609		87	215	307
시군구비	1,421		203	503	715
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 11%)

○ 관광안내센터 설치 : 종합관광안내센터증축공사 설계용역 준공(20백만원)

○ 관광안내서비스기능개선

- 관광마켓팅 : 팸투어,홍보프로모션등(98백만원)

- 홍보물 제작․관광홍보 : 관광안내지도(국문,다국어)제작 등(294백만원)

- 문화관광 홈페이지 리뉴얼 용역(45백만원)

□ 향후계획

○ 관광안내센터 설치:  증축1, 신축1, 교체1, 이동형설치5

○ 관광안내서비스기능개선 : 관광안내표지판 정비, 관광홈페이지 제작(중,일),

관광객 유치체계지원사업, 관광홍보물 제작(영,일,중)

□ 사업변경 내역

○ 관광안내센터 신축 2동 → 1동으로 변경(평창읍관광안내센터 부지미확보)

사업명

평창윈터페스티벌

담당자

문화관광과 이기언(☎330-2466)

□ 사업목적 및 필요성

○ 올림픽 개최도시의 전통문화와 지리적 장점을 살린 체험관광 프로그램 운영

○ 올림픽을 전후로 방문 외래관광객에 대한 풍성한 볼거리 제공을 통해

개최도시 이미지 부각

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년~2018년 (4년간)

○ 위 치 : 평창군 일원(진부면, 대관령면)

○ 규 모 : 평창송어축제 및 대관령눈꽃축제 연계 추진 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,552백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,552		288	928	2,336
국 비	1,776		144	464	1,168
시 도 비	533		43	139	351
시군구비	1,243		101	325	817
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25 %)

○ 평창윈터판타지안 개최 (2015. 1. 9 ~ 1. 18)

□ 향후계획

○ 대관령눈꽃축제 개최 (2016. 1. 15 ~ 2. 7)

○ 평창윈터페스티벌 추진계획 수립 및 행사준비 : '15. 12월

○ 평창윈터페스티벌 개최 : '17년 1월 ~ 2월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업명 : (기존)평창윈터판타지아 → (변경)평창윈터페스티벌

○ 총사업비 : (기존)4,000백만원 → (변경)3,552백만원

사업명

노람뜰 녹색치유, 레포츠단지 조성

담당자

문화관광과 박경섭(☎330-2746)

□ 사업목적 및 필요성

○「수석테마&힐링공원」을 거점으로 인근 관광자원을(절개산, 패러글라이딩,      마하생태관광지 등) 연계한 다양한 관광상품 개발로 집중 체류형 관광산업      육성 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2017년(4년)

○ 위 치 : 평창군 평창읍 중리 15-3번지 일원

○ 내 용 : 평창 수석테마&힐링공원 조성(A=11,802㎡), 명사십리공원 정비(A=17,000㎡),

녹색휴양공원 조성(A=3,500㎡), 장암산 산책로 조성(L=2.0km)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,600백만원                                   (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	9,600	2,724	2,400	876	3,600
국 비	3,890	500	1,200	438	1,752
시 도 비	1,167	150	360	131.4	525.6
시군구비	4,543	2,074	840	306.6	1,322.4
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 부지조성 및 매입 : 2013. 4월 ~ 2014. 7월

○ 장암산 등산로 정비공사 추진중 : 2015. 8월 ~ 2016. 4월

○ 명사십리공원 정비사업 설계용역 완료 : 2015. 11월

○ 녹색휴양공원 조성사업 설계용역 : 2015. 10월 ~

○ 노람뜰 수석테마공원 설계용역(건축분야) 입찰공고 : 2015. 12월

□ 향후계획

○ 녹색휴양공원 및 명사십리(바위공원)공원 준공 : 2016. 6월까지

○ 노람뜰 수석테마공원 설계용역(건축분야) : 2016. 5월까지

○ 노람뜰 수석테마공원 전시설계 및 제작설치 추진 : 2016. 3월  ~ 2017. 7월

○ 노람뜰 수석테마공원 공사 추진 : 2016. 6월 ~ 2017. 10월

사업명

평창송어종합공연체험장 건립

담당자

문화관광과 박경섭(☎330-2746)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문화올림픽 실현을 위한 동계올림픽 배후도시 문화예술 인프라를 구축하고       송어축제와 연계한 문화관광시설 확충을 통해 지속가능한 새로운 관광산업       창출 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 :  2014년 ~ 2017년(4년)

○ 위 치 : 강원도 평창군 진부면 하진부리 337-2번지 일원

○ 규 모 : 다목적공연 체험관 1동(건축연면적 2,806㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	8,000	250	1,000	4,000	2,750
국 비	4,000	125	500	2,000	1,375
시 도 비	1,200	37.5	150	600	412.5
시군구비	2,800	87.5	350	1,400	962.5
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 공연장 건립 타당성 및 기본구상 용역 완료 : 2014. 1월

○ 사업부지 매입 완료 : 2014. 10월

○ 사업부지 현황측량 : 2015. 7월

○ 설계용역 계약심사 및 일상감사 : 2015. 8월

○ 사업계획 최종 주민의견수렴 간담회 : 2015. 10월

○ 건축설계 제안공모 진행 및 건축설계 용역 계약 : 2015. 10월 ~ 12월

□ 향후계획

○ 건축 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2015. 12월 ~ 2016. 4월

○ 건축사업 착공 및 준공 : 2016. 5월 ~ 2017. 10월

사업명

용평체육공원 조성사업

담당자

경제체육과 심성찬(☎330-2723)

□ 사업목적 및 필요성

○ 용평면은 평창군 교통의 중심지로써 접근성이 뛰어나 체육공원을 조성하여

각종 행사와 대회를 유치하여 평창군 전역의 경제 활성화를 기하고

○ 용평면 주민들의 체육시설 접근성을 개선하여 지역 주민의 체육활동 증진을

통한 삶의 질을 향상 시키고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1월 ~ 2016. 12월

○ 위 치 : 평창군 용평면 장평리 산266-2번지 일원

○ 규 모 : 부지 47,046㎡(축구장, 다목적구장, 파크골프장, 주차장 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	7,600	960	2,750	3,890
국 비	1,650		825	825
시 도 비	770		385	385
시군구비	5,180	960	1,540	2,680

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ‘15. 3월~10월 : 각종 설계 용역 시행 및 완료

○ ‘15. 12월 : 강원도 계약심사

○ ‘15. 12월 : 공사 계약

□ 향후계획

○ ‘16. 1월 : 공사 착공 및 동절기 공사중지

○ ‘16. 3월 : 공사중지 해제 및 공사 재착수

○ ‘16. 12월 : 공사 준공(예정)

사업명

도암댐 상류 비점오염저감사업

담당자

환경위생과 곽호식(☎330-2334)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우기시 고랭지 밭에서 유실되는 토사유출 방지로 흙탕물 발생을 저감하여 하천의 본래기능(수질 정화능력, 친수기능, 생태적 공간기능)을 살려 맑고 깨끗한 수질을 확보   ※ 관리목표 : 도암호 말단지점의 수질을 SS기준 5㎎/ℓ이하로 유지

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2016

○ 위 치 : 평창군 대관령면 차항리 96-1, 횡계리 143-2, 용산리 284-13

○ 규 모 : 침사지 3개소

- 차항리(12,483㎡), 횡계리(4,853㎡), 용산리(2,483㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :   11,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	11,300	3,870	4,515	2,915
국 비	7,910	2,709	3,160	2,041
시 도 비	508	174	203	131
시군구비	509	174	204	131
지 방 채
민간자본
기 타	2,373	813	948	612

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  70%)

○ 1단계 사업추진 : 2014. 1월~12월

-  침사지, 수로조성, 사면보호공 등 토사유출 저감시설)

○ 도암댐상류 비점오염저감사업 기본 및 실시설계 용역 착공 : 2014. 3. 17.

○ 사업대상부지 토지매입(침사지) : 2014. 11월~12월

○ 공사착공 : ‘15. 12월

□ 향후계획

○ 공사준공 : ‘16. 12월

○ 신규 대상지 선정을 통한 비점오염저감사업 지속적 추진

사업명

상수관망 선진화사업

담당자

상하수도사업소

민선기(☎330-2441)

□ 사업목적 및 필요성

○ 최적관리시스템 구축에 다른 유수율 제고 및 생산원가 절감으로

지자체간 수도요금 및 서비스수준 격차 완화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010.  ~ 2016.

○ 위 치 : 평창군 지방상수도 5개소

○ 규 모 : 블록시스템구축 및 관망정비 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 38,297백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	38,297	34,302	2,938	1,057
국 비	19,149	17,151	1,969	29
시 도 비
시군구비	19,148	17,151	969	1,028
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85 %)

○ 단위블록구축 : 대블록 5, 중블록 6, 소블록 19, 단위블록 115 완료

○ 관망정비 : 신설 4.1km, 교체 49km(공정률 85%)

- 유지관리시스템 : 통합센터 자동화 구축(공정률 85%)

- 유수율 : 85% 목표(현재 80.4%)

□ 향후계획

○ ‘15. 07. 26 ~ ’16. 09. 26 : 성과보증 검토 및 분석, 성과보증(14개월)

○ ‘16. 09. 26 : 공사 준공(인수인계 및 시운전 포함)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

평창동계올림픽 급수체계구축

담당자

상하수도사업소

민선기(☎330-2441)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2018 평창동계올림픽 개최 및 지역개발 수요증가로 상수도 수요량이 급

증하고 있으나 현재 운영중인 대관령상수도 취수량 부족으로 대체수원

개발이 시급하여,

◦ 대관령 식수전용 저수지 개발 및 상수도시설 확충으로 용수부족을 해결

하고 개발수요에 능동적으로 대처하여 성공적인 올림픽을 개최

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2017

○ 위 치 : 평창군 대관령면 일원

○ 규 모 : 대관령 식수전용저수지- 총저수량 194만톤(유효 159만톤)

상수도시설 확충 - 정수장 Q=7,000㎥/일, 관로 L=16.9km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :   60,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	60,000	16,920	13,500	20,580	9,000
국 비	36,000	9,000	8,100	13,500	5,400
시 도 비	12,000	3,000	2,700	4,500	1,800
시군구비	12,000	4,920	2,700	2,580	1,800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 식수전용저수지 : 복통 80m 시공, 벌개제근 및 암 터파기

○ 상수도시설 : 송수관로 6km 시공, 정수장 벌개제근 및 암 터파기

□ 향후계획

○ 2017. 07 ~ 09월 : 저수지 담수 및 정수장 시운전

○ 2017. 10월 : 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

기화1교 재가설공사

담당자

안전건설과 김복기(☎330-2484)

□ 사업목적 및 필요성

○ ‘14년 노후교량 정밀안전진단결과, 안전등급 “D”급으로 판정 받음에 따라

재난위험교량 조기 해소로 안전사고 방지 및 주민교통 편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1. ~ 2017. 3.

○ 위 치 : 미탄면 기화리(군도 5호선)

○ 규 모 : 교량 L=68m(B:9.5m), 터널 L=50m(B:8.3m), 접속도로 L=392m(B:8.5m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,120백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,120		1,400	1,400	1,320
국 비	0
시 도 비	395		300	95
시군구비	3,725		1,100	1,305	1,320
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 정밀안전진단 / 재난위험시설 “D급” 지정 고시  : ‘14. 7월 / ‘14. 8월

○ 공사착공 : ‘15. 9. 14[교량 하부(교각1, 교대2), 빔제작, 접속도로 토공 추진]

□ 향후계획

○ 2016년 12월 : 교량, 터널, 접속도로 완료

○ 2017년 03월 : 부대공 추진 후 시설공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 변경 : 4,600백만원 → 4,120백만원, 감)480백만원

- 교량 및 터널 연장 축소 및 계약금액 반영

사업명

평창동계올림픽 홍보관 건립

담당자

올림픽추진단

안옥진 (☎330-2835)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2018평창동계올림픽 Host City로서 올림픽 홍보 극대화 도모 및 남부권

관광자원 활용 방문객유치를 통한 지역경기 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 6월 ~ 2016. 3월

○ 위 치 : 평창군 평창읍 군청길 77 의회 옆

○ 규 모 : 160.70㎡ 내외(지상2층, 연면적 205.04㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 630백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	630		370	260
국 비
시 도 비
시군구비	630		370	260

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 동계올림픽 홍보관 신축공사 계약, 일상감사 완료 : ‘15.2.24

○ 건축, 전기, 통신, 기계설비공사 완료 : ‘15.4.13 ~ ’15.9

○ 건축공사 감리용역 완료 : ‘15.4.21 ~ ’15.9.9

○ 전시설계 및 전시물 제작ㆍ설치 제안공모 공고 : ‘15.4.28 ~ ’15.5.8

○ 홍보관 내부전시설계 및 전시물 제작설치공사 계약 및 착수 : ‘15.7.16

○ 전시설계 기본(안) 중간보고 실시 : ‘15.8.13.

○ 민간전문가 자문 실시 : ‘15.8.25 ~ ’15.9.2  .

○ 전시관 내부시안 검토 및 브랜드사용 관련 협의 : ‘15.4. ~’15.12.31

□ 향후계획

○ 전시물 제작설치 공사 준공 : ‘16. 3. 11.

○ 동계올림픽 홍보관 개관 : ‘16. 3. 25.

○ 주중 상시운영(기간제 근로자 1명) : ‘16. 3. 28. ~ 대회 개최 시

사업명

효석문화예술촌 조성

담당자

올림픽운영과 김남수(☎330-2082)

□ 사업목적 및 필요성

○ 올림픽 개최도시이자 우리나라 현대 단편문학의 백미인 소설 ‘메밀꽃 필 무렵’의

배경지인 봉평에 소설 속 배경을 모티브로 한 효석문화예술촌 조성

○ 세계 속에 한국 문학을 알리고 문학적 감성을 향유할 수 있는 4계절 테마

관광지로 조성

□ 사업개요

○ 기    간 : 2015년 ~ 2017년

○ 위    치 : 강원도 평창군 봉평면 창동리 일원(봉평문화창작지구내)

○ 대상면적 : 24,675㎡(생가마을 17,985㎡, 효석광장 6,690㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	10,000		467	5,565	3,968
국 비	5,000		234	2,782	1,984
시 도 비	1,500		70	835	595
시군구비	3,500		163	1,948	1,389

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 효석문화예술촌 실시계획(기본컨셉) 용역 : 2015. 5. ~ 7.

○ 효석광장 조성을 위한 경관저해 건축물 등 철거 : 2015. 7. ~ 8.

○ 효석광장 조성 설계용역 : 2015. 7. ~ 12.

○ 효석문화예술촌 건축설계공모 : 2015. 9. ~ 2016. 1.

□ 향후계획

○ 효석광장 조성공사 착공 및 준공 : 2016. 2. ~ 7.

○ 효석문화예술촌 조성 설계용역 : 2016. 3. ~ 6.

○ 효석광장 상징조형물 제작‧설치 : 2016. 3. ~ 7.

○ 건축허가 및 공사착공/준공 : 2016. 6. ~ 2017. 8.

사업명

동계올림픽 특구 도시경관 지원사업

담당자

올림픽시설과 강석원

(☎330-2417)

□ 사업목적 및 필요성

○ 올림픽게이트웨이 지구 내 경기장 주변과 주요 진입도로변의 경관개선을

통하여 개최지 위상에 부합되는 주거 및 가로환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015.1월 ~ 2017.12월(3년)

○ 위 치 : 평창군 대관령면 횡계리 일원

○ 규 모 : 올림픽 상징가로 조성 및 시가지 정비 6개 사업

- 지중화(한전, 통신)공사(횡계 시가지 일원)

- 진·출입 관문 경관조성(횡계 IC ~ 대관령로 입구, L=1.1km)

- 올림픽상징도로 조성(올림픽로 ~ 수하삼거리, L=3.12km)

- 횡계 시가지 환경정비(대관령로 1,140m, 횡계길 120m, 장선길 150m,

축제길 130m)

- 노후불량건축 및 시설 정비(100동)

- 올림픽 랜드마크(눈꽃광장) 조성사업(야간경관연출, 2,512㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 24,118백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	24,118	200	9,109	3,790	11,019
국 비	12,059		3,930	1,895	6,234
시 도 비	3,618		1,179	569	1,870
시군구비	4,441	200		1,326	2,915
지 방 채	4,000		4,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 실시설계 용역 착수(2개사업) : 2014.12월 ∼

- 올림픽 상징가로 조성 및 진출입 관문 경관조성

○ 지중화(한전, 통신) 협약서 작성 및 체결 : 2015.1월 ∼ 5월

○ 평창동계올림픽특구 도시경관 지원사업 기본계획(마스터플랜수립)

: 2015.10월 ∼

□ 향후계획

○ 지중화(한전,통신)공사 추진 : 2016.4월 ~ 12월

○ 올림픽 상징가로 조성 및 진출입 관문 경관조성사업추진 : 2016.9월 ~  2017.11월

사업명

면온 공공하수처리장 증설 및

하수관거 설치공사

담당자

상하수도사업소

홍성군(☎330-2163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 면온 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사를 통하여 봉평면 무이리 지역의 미처리 생활하수를 적정 처리 후 방류하여 2018 평창 동계올림픽 경기장 인근 면온천의 수질오염 방지로 공공수역의 수질보전 및 지역사회의 건전한 발전과 공중위생 향상에 기여하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년∼2016년

○ 위 치 : 평창군 봉평면 면온리, 무이리 일원

○ 규 모 : 공공하수처리장 증설 Q=820㎥/일(Q=480㎥/일⇒Q=1,300㎥/일)

: 하수관로 L=7.666km, 배수설비 157가구 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,939백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	10,939	8,045	2,894
국 비	7,657	5,631	2,026
시 도 비
시군구비	1,287.2	940	347.2
지 방 채
민간자본
기타(기금)	1,994.8	1,474	520.8

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공사중, 68%)

○ 기본 및 실시설계용역 완료 : 2011. 09. 05∼2013. 12. 19

○ 총사업비 변경(사업기간 변경) 승인 : 2013. 12. 24 (원주지방환경청)

○ 하수처리공법 관련 민사소송사건 종결 : 2014. 06. 12 (평창군 승소)

○ 기술검토 및 재원협의 승인 : 2014. 07. 08 (강원도, 원주지방환경청)

○ 공사 착공 : 2014. 10. 17

○ 전기 및 계측제어공사 착공 : 2014. 11. 11

□ 향후계획

○ 무이리 하수관로 매설 및 가정 배수설비 설치공사 : 2016. 03월∼11월

○ 증설시설 종합시운전 : 2016. 06월∼09월

○ 공사 준공 : 2016. 12월

○ 전기 및 계측제어공사 준공 : 2016. 12월

□ 사업변경 내역

○ 해당사항없음

사업명

봉평 공공하수처리장 증설 및

하수관거 설치공사

담당자

상하수도사업소

홍성군(☎330-2163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 확장공사를 통하여 봉평면 흥정리 지역의 미처리 생활하수를 적정 처리 후 방류하여 흥정천의 수질오염 방지로 흥정계곡의 깨끗한 수질보전 및 쾌적한 주거환경을 조성하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년∼2015년

○ 위 치 : 평창군 봉평면 창동리, 흥정리 일원

○ 규 모 : 공공하수처리장 증설 Q=200㎥/일(Q=1,000㎥/일⇒Q=1,200㎥/일)

: 하수관로 L=8.246km, 배수설비 121가구 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,248백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	8,248	6,848	1,400
국 비	5,773	4,793	980
시 도 비
시군구비	972.8	804.8	168
지 방 채
민간자본
기타(기금)	1,502.2	1,250.2	252

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 준공, 100%)

○ 기본 및 실시설계용역 완료 : 2012. 04. 05∼2013. 06. 10

○ 기술검토 및 재원협의 승인 : 2013. 06. 20 (강원도, 원주지방환경청)

○ 총액 및 1차분공사 착공 : 2013. 09. 25

○ 총사업비 변경(총사업비 및 사업기간) 승인 : 2013. 12. 24 (원주지방환경청)

○ 전기 및 계측제어공사 착공 : 2014. 02. 18

○ 1차분공사 준공 : 2014. 09. 02

○ 전기 및 계측제어공사 준공 : 2015. 08. 11

○ 총액 및 2차분 준공 : 2015. 12. 09

□ 향후계획

○ 해당사항없음

□ 사업변경 내역

○ 해당사항없음

사업명

운교리농어촌마을하수도 설치사업

담당자

상하수도사업소

전지연(☎330-2448)

□ 사업목적 및 필요성

○ 방림면 운교리 농어촌마을하수도 설치사업을 통하여 운교1리 지역의 기존 가옥 및 펜션에서 배출되는 생활하수를 적정 처리 후 방류하여 인근 계촌천의 수질오염 방지로 공공수역의 수질보전 및 지역사회의 건전한 발전과 공중위생 향상에 기여하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년∼2016년

○ 위 치 : 평창군 방림면 운교1리 일원

○ 규 모 : 소규모 공공하수처리장 신설 Q=80㎥/일

: 하수관로 L=5.205km, 배수설비 177가구 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,047백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,047	1,966	1,796	285
국 비	2,833	1,376	1,257	200
시 도 비
시군구비	485.6	236	215.6	34
지 방 채
민간자본
기타(기금)	728.4	354	323.4	51

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공사중, 95%)

○ 실시설계용역 완료 : 2012. 11. 30∼2013. 12. 20

○ 하수도정비기본계획 부분변경 승인 : 2013. 07. 08 (원주지방환경청)

○ 사업기간 변경 승인 : 2013. 12. 24 (원주지방환경청)

○ 기술검토 및 재원협의 승인 : 2014. 07. 07 (강원도, 원주지방환경청)

○ 전기 및 계측제어공사 착공 : 2014. 08. 22

○ 총액 및 1차분공사 착공 : 2014. 09. 11

○ 총사업비 변경 승인 : 2014. 10. 14 (원주지방환경청)

○ 1차분공사 준공 : 2015. 09. 11

○ 전기 및 계측제어공사 준공 : 2015. 12. 04

○ 2차분공사 준공 : 2015. 12. 28

□ 향후계획

○ 3차분공사 착공 : 2016. 02월

○ 총액 및 3차분공사 준공 : 2016. 06월

□ 사업변경 내역

○ 해당사항없음

사업명

2018 평창 동계올림픽 관련

하수도시설 확충사업

담당자

상하수도사업소

홍성군(☎330-2163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2018 평창 동계올림픽 개최지 관련시설과 경기장 관광객 및 주변개발에 따른 인구 증가로 인한 하수 발생량 증가에 대비하여 하수도시설 확충사업을 추진하여 동계올림픽 성공 개최와 지역사회의 건전한 발전, 공중위생의 향상 및 공공수역의 수질보전에 기여하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년∼2017년

○ 위 치 : 평창군 진부면, 대관령면 일원

○ 규 모 : 진부 공공하수처리장 증설 Q=900㎥/일(Q=4,100㎥/일⇒Q=5,000㎥/일)

: 진부 총인처리시설 증설 Q=900㎥/일 (Q=4,100㎥/일⇒Q=5,000㎥/일)

: 대관령 공공하수처리장 하수저류시설 신설 Q=2,000㎥

: 대관령 총인처리시설 신설 Q=5,000㎥/일

: 하수관로 L=14.850㎞(진부 L=7.659km, 대관령 L=7.191km)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 23,211백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	23,211	428	11,248	11,535
국 비	16,248	300	7,874	8,074
시 도 비
시군구비	2,785.8	51.2	1,349.6	1,385
지 방 채
민간자본
기타(기금)	4,177.2	76.8	2,024.4	2,076

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공사중, 35%)

○ 평창군 하수도정비기본계획 전체변경 승인 : 2014. 07. 25 (원주지방환경청)

○ 기본 및 실시설계용역 완료 : 2013. 06. 24∼2015. 02. 17

○ 기술검토 및 재원협의 승인 : 2015. 05. 06 (강원도, 원주지방환경청)

○ 진부, 대관령 공공하수도 설치(변경)인가 : 2015. 05. 15 (강원도)

○ 통합 건설사업관리용역 착수 : 2015. 06. 15

○ 전기 및 계측제어공사 착공 : 2015. 07. 13

○ 총액 및 1차분공사 착공 : 2015. 07. 30

□ 향후계획

○ 2차분공사 착공 : 2016. 01월

○ 1차분공사 준공 : 2016. 10월

○ 공공하수도시설 종합시운전 : 2016. 09월∼2017. 02월

○ 총액 및 2차분공사 준공 : 2017. 07월

□ 사업변경 내역

○ 해당사항없음

사업명

장애인복지관 건립공사

담당자

주민생활지원과

김영옥(☎330-2341)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역에 산재되어 있는 소규모 장애인 시설을 일원화하여 접근성 제고 및

종합적이고 체계적인 복지서비스 제공

○ 장애인 대상 서비스의 획기적 개선을 통한 자립․자활 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2017년

○ 위 치 : 강원도 평창군 진부면 상진부리 245-23

○ 규 모 : 연면적 1,423(지하1층, 지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,500	131	184	500	2,685
국 비
시 도 비
시군구비	3,500	131	184	500	2,685
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 7%)

○ 2013. 3. 21 : 지방재정 투·융자 심사(평창군 자체) 적정 승인

○ 2013. 4. 26 : 공유재산관리계획 승인 및 기본계획안 확정

○ 2014.12. 30 : 총액공사 발주

○ 2015.01.13 : 동절기 공사중지

○ 2015.09.15 : 장애인종합복지관 건축계획 변경(장애인복지센터로 전환)

○ 2015.04.30 : 동절기 공사해지 및 1차분 공사착공

○ 2015.05.22 : 공사중지(건축업체 건설업 등록말소)

○ 2015.06.03 : 계약해지통보 (평창군→태산종합건설(주) 대표 김선태)

○ 2015.06.22 : 계약해지무효확인 민사소송 제기 (피고:평창군)

○ 2015.07.03 : 장애인복지관 건축공사 노무비 지급

→ 태산 / 24,560,000원

사업명

창리천 생태하천 복원사업

담당자

환경위생과 김용필(☎330-2331)

□ 사업목적 및 필요성

○ 건천화 방지 및 다양한 생물 서식이 가능한 하천 환경 조성

○ 수질오염 방지 및 하천 자정능력 증대를 통한 수질개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 5월 ~ 2018. 12월

○ 위 치 : 미탄면 평안보 ~ 마하리 동강 합류지점

○ 규 모 : 하천 건천화 방지 등 여울 조성(12.6km)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,866백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	8,866	255	642	2,982	4,987
국 비	4,433	93	321	1,600	2,419
시 도 비
시군구비	1,330	154	-	262	914
지 방 채
민간자본
기 타	3,103	8	321	1,120	1,654

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 기본 및 실시설계 기술검토 요청(원주지방환경청)

□ 향후계획

○ 강원도 하천기본계획(변경) 심의

○ 계약심사 및 일상감사

○ 공사계약 및 착공

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

오대천 생태하천 복원사업

담당자

환경위생과 김용필(☎330-2331)

□ 사업목적 및 필요성

○ 오대천 생태하천 복원으로 수질개선 및 친수공간 조성

○ 비오점물질에 대한 저감과 생태복원을 통하여 오대천을 생태명소로 되살려    동강, 남한강 등 하류수계 수질개선에 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2009년 ~ 2016년

○ 사업위치 : 평창군 진부면 동산리 ~ 진부교 일원

○ 사업규모 : L=33.2㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	16,800	16,800
국 비	11,760	11,760
기 금	3,528	3,528
시 도 비	0	0
시군구비	1,512	1,512

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 위·수탁 협약 체결 (평창군 ↔ 한국환경공단) : 2008. 8. 5

○ 기본 및 실시설계 용역 준공 : 2011. 4. 28

○ 전체 및 1차 공사 계약 : 2011. 12. 23

○ 1차 공사 (여울 4개소 준공) : 2012. 1. 6 ~ 8. 27

○ 2차 공사 (생태습지 일부공사 준공) : 2012. 8. 28 ~ 2013. 7. 13

○ 3차 공사 (가동보, 어도 3개소, 징검여울 1개소) : 2013. 4. 1 ~ 2014. 6. 4

○ 4차 공사 (친수공간 및 산책로 조성,제6여울 조성) : 2014.3.20~2016.6.30

□ 향후계획

○ 산책로 포장, 제6여울 설치, 월정천 합류지점 스톤 메트리스 공사

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

평창도시계획도로 중로2-4호, 소로1-6호 개설공사

담당자

도시주택과 신상대 (☎330-2418)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 도심지 혼잡도로개선을 통한 주민불편해소 및 주거환경정비

◦ 기반시설확충으로 지역관광 경쟁력확보 및 주민 삶의 질 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 1. ～ 2017. 12.

○ 위 치 : 평창군 평창읍 종부리(평창의료원 앞) 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=789m, B=10~15m

-중로2-4호 L=497m, B=15.0m, 소로1-6호 L=292m, B=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,100	588	500	2,012
국 비
시 도 비
시군구비	3,100	588	500	2,012

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 실시설계용역 완료 : 2013. 3. 25.

○ 평창군계획시설사업 실시계획인가고시 : 2013. 7. 16.

○ 분할측량 및 보상완료 : 2013. 3. ~ 2014. 12.

□ 향후계획

○ 공사착공 및 준공 : 2016. 9. ~ 2017. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

봉평도시계획도로 소로2-7호 개설공사

담당자

도시주택과 신상대 (☎330-2418)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 도심지 혼잡도로개선을 통한 주민불편해소 및 주거환경정비

◦ 기반시설확충으로 지역관광 경쟁력확보 및 주민 삶의 질 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 1. ～ 2017. 12.

○ 위 치 : 평창군 봉평면 창동리(뚱뚱슈퍼 뒤) 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=260m, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,200	1,140	25	1,035
국 비
시 도 비
시군구비	2,200	1,140	25	1,035

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 실시설계완료 : 2013. 2. ~ 4.

○ 평창군계획시설사업 실시계획인가고시 : 2013. 7. 26.

○ 분할측량 및 보상완료 : 2013. 3. ~ 2015. 12.

□ 향후계획

○ 보상협의 완료 및 공사착공, 준공 : 2016. 1. ~ 2017. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

지역전략식품산업육성

(기능성약선두유)사업

담당자

농축산과

원광식(☎330-1371)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산·학·연·관이 연계하여 지역의 특화된 우수한 자원(콩, 약선소재)을 활용한 기능성 약선두유 및 가공품 개발로 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2018(5년)

○ 위 치 : 대화면 신리 서울대 그린바이오 과학기술원 산학협력단지

○ 규 모 : 건축연건평 1,116㎡(공장 1,063㎡, 2층 116㎡사무실) 부지면적 5,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,004.4백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	5,004.4	1,340.4	1,690	914	1,060
국 비	2,202.2	370.2	845	457	530
시 도 비	660.7	111.1	253.5	137.1	159
시군구비	1,541.5	259.1	591.5	319.9	371
지 방 채
민간자본	600	600
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 54%)

○지방제정투융자심사 : ’14.3.11

○기능성약선두유 제품개발용역(4건) 추진 : ‘15. 3 ~ 8월

※100%약콩두유, 갱년기용 엄마두유, 환자식, 다이어트두유 4종 개발

○ 두유제조공장 건축 실시설계 및 인허가 신청 : ‘15. 10월

○ 두유제조공장 건축 실시설계 및 인허가  : ‘16. 1. 29.

○ 두유제조 시공, 감리업체 선정 및 계약 체결(나라장터입찰): ’16. 2. 25.

□ 향후계획

○ 두유제조공장 착공 : ’16. 3. 30.

※ 건축연건평 1,116㎡(공장 1,063㎡, 2층 116㎡사무실) 부지면적 5,000㎡

○ 두유공장 완공 : ’16. 9월 말 준공 예정(1개월 시험 운전 후 제품 생산)

□ 사업변경 내역

○ 2017년 사업계획 변경 추진 중