건설공사 사후평가 시행지침

제정 2001.05.10 건관 58824-318

개정 ’06.06.13 건설교통부고시 제2006-163호

’08.01.03 건설교통부고시 제2007-694호

’08.04.23 국토해양부고시 제2008- 72호

’09.08.24 국토해양부고시 제2009-759호

’10.01.15 국토해양부고시  제2010-14호

제1조(목적) 이 지침은 건설기술관리법시행령(이하 “시행령”이라고 한다) 제38조의18에 따라 발주청이 시행한 건설공사의 사후평가를 실시함에 있어  평가시점 및 방법 등에 관하여 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 지침은 건설기술관리법(이하 “법”이라고 한다) 제2조제5호의 규정에 따른 발주청이 발주하는 총공사비 500억원 이상의 건설공사를 대상으로 한다.

제3조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. “사후평가”란 향후 건설공사 시행의 효율성을 도모하기 위해 타당성 조사 등 건설공사를 계획하는 과정과 공사완료후의 공사비, 공사기간, 수요, 효과 등에 대한 예측치와 실제치를 종합적으로 분석․평가하는 것을 말한다.

2. “사후평가서”란 시행령 제38조의18제2항에서 명시하고 있는 평가내용을 수록한 사후평가결과보고서와 사후평가표를 말한다.

3. “평가지표”란 건설공사 사후평가를 수행함에 있어 다음과 같은 평가분야에 대한 평가항목을 측정하기 위한 기준을 말한다.

가. 사업수행성과 : 건설사업 추진기간, 비용 등의 효율성과 적절성을 평가하는 것으로 사업비, 사업기간, 안전, 변경, 재시공 부분의 성과를 평가

나. 사업효율 : 건설공사 시행 전후의 수요와 기대효과의 비교를 통해 사업 전반의 효율성을 평가

다. 파급효과 : 건설사업 수행이 해당 지역의 경제․사회와 주민 생활에 미친 영향 등을 평가

제4조(사후평가의 내용) 발주청은 사후평가를 실시하는 경우 다음 각 호의 내용이 포함되도록 하여야 한다.

1. 예상 공사비 및 공사기간과 실제 소요된 공사비 및 공사기간의 비교․분석

2. 공사기획시 예측한 수요 및 기대효과와 공사 완료후의 실제 수요 및 공사효과의 비교․분석

3. 당해 건설공사의 문제점과 개선방안

4. 주민의 호응도 및 사용자 만족도

5. 건설공사 시행단계별 발생되는 건설정보의 내용 및  조치계획

6. 공사비, 공사기간, 효과 등 당해 건설공사에 대한 전반적인 평가, 당해 건설공사에 따른 주변환경의 변화 및 영향, 재원조달의 타당성 등 기타 발주청에서 필요하다고 인정하는 사항

제5조(건설사업 시행단계별 사업수행성과 평가)  ①발주청은 법 제21조의3에 따른 건설공사의 시행과정에 따라 건설공사를 시행한 경우 다음 각 호의 시행단계별 자료의 수집․관리와 사업수행성과를 평가하여야 한다.

1. 타당성조사단계

가. 시행령 제38조의6의 규정에 따른 타당성조사 결과

나. [별표1]의 단계별 사후평가표 중 타당성조사단계 부분

2. 설계단계

가. 시행령 제38조의9 내지 제38조의11 규정에 따른 기본설계․실시설계의 설계도서 및 공사비 증가 등에 대한 조치관련 자료

나. 법 제36조 및 시행규칙 제45조제8항과 제9항의 규정에 의한 설계용역평가 결과

다. [별표1]의 단계별 사후평가표 중 설계단계 부분

3. 시공단계

가. 법 제36조 및 시행규칙 제45조제3항의 시공평가 결과 및 시행령 제38조의16제1항의 규정에 따른 준공보고서

나. 법 제36조 및 시행규칙 제45조제10항의 규정에 따른 책임감리용역평가 결과

다. [별표1]의 단계별 사후평가표 중 시공단계 부분

② 발주청은 제1항 각 호의 항목 중 별표1의 단계별 사후평가표는 단계별 용역 또는 시공 등이 완료된 후 60일 이내에 작성하고, 시행령 제29조에 따라 구축된 건설공사지원통합정보체계(건설CALS포탈시스템) 내의 □건설공사 사후평가시스템□에 입력하여야 한다.

제6조(평가시기 및 방법)  ①제2조에 규정된 건설공사의 사후평가는 전체공사의 준공 이후 3년 이내에 실시하여야 하되 건설공사의 특성에 따라 기간 내에 사후평가가 곤란한 경우 5년 이내에 실시할 수 있다.

②발주청은 사후평가를 실시함에 있어서 다음 각호의 건설공사는 별표2의 종합 사후평가표의 양식을 활용하여 사후평가를 실시하여야 한다.

1. 개량사업, 유지보수사업, 확장‧증설사업 등 기존 시설의 효용증진을 위한 건설공사

2. 공공청사, 공동주택, 교정시설, 초‧중등 교육시설의 신‧증축사업 등 사업효과가 국지적이고 정형화된 건설공사

③발주청은 제2항 각호의 건설공사를 제외한 건설공사는 별표3의 종합 사후평가표의 양식을 활용하여 사후평가를 실시하여야 한다.

④분할발주공사의 사후평가가 필요하다고 인정하는 경우에는 제1항의 규정에도 불구하고 분할발주공사별로 실시할 수 있다.

⑤발주청이 필요하다고 인정하는 경우 제1항 또는 제4항에 따른 사후평가 이외에도 적기로 판단되는 시점에 추가로 사후평가를 실시할 수 있다.

제7조(평가 수행주체 및 평가결과 작성․관리)   ①발주청은 제5조의 평가를 위한 자료를 활용하여 사후평가를 실시하도록 하여야 한다. 다만, 사후평가를 수행함에 있어 전문인력 부족 등 발주청이 직접 사후평가를 수행하기 곤란한 경우에는 외부전문기관에 사후평가업무의 전부 또는 일부를 수행토록 할 수 있다.

②제1항의 □외부전문기관□이라 함은 건설공사 사후평가 대상 사업과 이해관계가 없는 다음 각 호의 기관을 말한다.

1. 국가 및 지방자치단체의 출연연구기관 또는 출연연구원

2. 엔지니어링기술진흥법 제4조의 규정에 따라서 지식경제부장관에게 관련부문의 엔지니어링 활동주체로 신고한 업체

3. 기술사법 제6조의 규정에 따라서 등록한 기술사사무소

4. 기타 건설공사 사후평가 업무의 수행경력이 있거나, 이와 유사한 업무를 수행한 경력이 있는 기관으로서 발주청이 인정하는 기관

③발주청은 사후평가를 실시한 경우 “사후평가결과보고서” 및 별표1의 단계별 사후평가표․별표2 또는 별표3의 종합 사후평가표가 포함된□사후평가서□를 작성․관리하여야 한다.

④제3항에 따른 사후평가결과보고서에는 제4조 각호의 항목에 대한 평가결과가 포함되어야 한다.

제8조(사후평가위원회) ①제7조제3항에 따른 사후평가서의 적정성에 관한 발주청의 자문에 응하기 위하여 발주청에 사후평가위원회를 둔다.

②사후평가위원회의 위원은 중앙위원회, 지방위원회, 특별위원회, 다른 발주청의 사후평가위원회 또는 관계 시민단체가 추천하는 자 및 해당 분야의 전문가 중에서 발주청이 임명 또는 위촉한다.

③발주청은 사후평가위원회를 구성함에 있어 당해 건설공사와 관련된 용역(하도급 포함), 자문, 연구, 건설공사를 시행한 기관 등 당해 건설공사와  이해관계가 있는 자를 배제하여야 한다.

④발주청은 사후평가위원회의 자문을 받은 때에는 특별한 사유가 없는 한 그 결과를 제1항에 따른 사후평가서에 반영하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

⑤사후평가위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 제4조에 따른 조사ㆍ분석의 결과에 관한 사항

2. 제4조에 따른 조사ㆍ분석에 필요한 객관적이고 투명한 평가지표 및 측정방법에 관한 사항

3.그 밖에 시행령 제38조의18 제1항에 따른 사후평가서의 적정성에 관하여 발주청이 요청하는 사항

⑥제2항부터 제5항까지의 규정 외에 사후평가위원회의 구성 및 운영 등에 관하여 필요한 사항은 발주청이 정한다.

제9조(사후평가서 결과 입력) 발주청은 제7조제3항의□사후평가서□를 시행령 제29조에 의해 구축된 건설공사지원통합정보체계(건설CALS포탈시스템) 내의 □건설공사 사후평가시스템□에 다음 년도 2월말까지 입력하여야 한다.

제10조(사후평가결과 활용) ①발주청은 건설공사를 시행하고자 하는 경우에는 제9조제2항에 따른 □건설공사 사후평가시스템□에 접속하여 유사한 공사가 있는지 확인하여야 한다.

②제1항에 따른 유사한 공사가 있는 경우 발주청은 사후평가결과보고서의 관련내용을 참고하여 시행하고자 하는 건설공사의 타당성조사 등에 활용될 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다.

③국토해양부장관은 제7조제3항의 사후평가서를 축적․분석하여 건설공사의 시행과정별 표준적인 소요기간 및 비용의 기준을 정할 수 있다.

제11조(세부시행기준) 이 지침을 운영함에 있어 필요한 세부사항은 발주청이 그 기준을 정할 수 있다.

제12조(재검토기한)「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 8월23일까지로 한다.

부   칙〈2001.5.10〉

제1조(시행일) 이 지침은 2001. 7. 1.부터 시행한다.

제2조(시행중인 건설공사에 대한 적용례) 이 지침 시행당시 건설공사가 시행중인 경우의 사후평가는 이 지침에 의한다. 다만, 시행중인 건설공사가 타당성조사를 실시하지 않은 경우 적용여부를 발주청이 결정할 수 있다.

부   칙〈2006.6.13〉

제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(사후평가 자료 입력에 대한 특례) 제6조제2항 및 제9조제2항에 의한 자료 입력의 시행일 및 자료입력 방법 등에 대하여는 건설교통부장관이 “건설공사지원통합정보시스템(건설CALS)” 구축 이후 따로 고시한다.

제3조(경과조치) 건설공사 사후평가와 관련하여 이 지침 시행당시 종전의 규정에 의하여 사후평가가 시행중에 있거나, 외부전문기관에 사후평가의 전부 또는 일부를 의뢰한 경우에는 종전 지침(건설교통부 건관58824-318, ‘01.5.10)에 의한다.

부   칙〈2008.1.3〉

제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 건설공사 사후평가와 관련하여 이 지침 시행당시 종전의 규정에 의하여 사후평가가 시행중에 있거나, 외부전문기관에 사후평가의 전부 또는 일부를 의뢰한 경우에는 종전 지침(건설교통부고시 제2006-163호)에 의한다.

부  칙〈2008.4.23〉

이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

부  칙〈2009.8.24〉

이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

부  칙〈2010.1.15〉

제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 건설공사 사후평가와 관련하여 이 지침 시행당시 종전의 규정에 따라 사후평가가 시행중에 있거나, 외부전문기관에 사후평가의 전부 또는 일부를 의뢰한 경우에는 종전 지침(국토해양부고시 제2009-759호)에 따른다.

[별표1]

단계별 사후평가표

(1) 타당성조사 단계

① 일반사항

타당성조사 용역명	용역기간 (개월)	용역비 (백만원)	타당성조사 용역회사명 (대표자 성명)	발주관서명
	년 월 일 ~ 년 월 일 ( 개월)

② 비용-편익분석 결과

구 분	편 익(단위: 백만원)		비 용(단위: 백만원)
도로부문	통행시간 감소편익		공사비용
	차량운행비용 절감편익		용지보상비
	교통사고 감소편익		유지관리비
	환경개선 편익		기타( )
	지역개발 등 편익
	기타( )
계	편익 총합		비용 총합
철도부문	통행시간 절감		공사비용
	차량운행비 절감		차량구입비
	교통사고 비용 절감		용지보상비
	환경개선 편익: 대기오염, 소음절감		운영비
	지역개발 등 효과		기타( )
	기타( )
계	편익 총합		비용 총합
공항부문	통행시간 감소		투자비(혹은 건설비)
	운행비용 감소		연구개발비
	지역개발 등 효과		운영 및 유지보수비
	기타( )		기타( )
계	편익 총합		비용 총합
항만부문	대기비용 절감효과		투자비
	선석이용 절감효과		운영 및 유지보수비
	내륙운송비용 절감효과		기타( )
	기타( )
계	편익 총합		비용 총합

구 분		편 익(단위: 백만원)		비 용(단위: 백만원)
수자원부문	다목적댐	홍수조절편익		공사비
		용수공급편익		보상비
		전력공급편익		기타비용
		관개용수공급편익		운영비
		기타( )		기타( )
	치수사업	홍수조절편익		공사비
				보상비
				기타( )
		기타( )		공사관리비 및 기타비용
				운영 및 유지보수비
				기타( )
	광역상수도 사업	용수공급편익		공사비
				보상비
				기타( )
		기타( )		공사관리비 및 기타비용
				운영 및 유지보수비
				기타( )
계		편익 총합		비용 총합
기타 부문				투자비(혹은 건설비)
				보상비
				운영 및 유지보수비
				기타( )
계		편익 총합		비용 총합

③ 예측수요

부문	기준년도 예측수요	공용개시년도 예측수요	목표연도 예측수요	작성항목
도로부문				교통량(OD)
철도부문				여객통행량, 물동량
공항부문				여객수, 물동량
항만부문				물동량 (컨테이너물동량, 비컨테이너물동량)
수자원부문				용수수요량
기타부문

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

주) 타당성조사용역 완료후, ‘타당성조사용역업체’가 해당되는 사업부문만 작성하되 기타 시설물의 경우 양식에 준해서 편익과 비용 기재

④ 타당성조사 완료후 사업수행성과

※ 건설기술관리법 시행령 제38조의6 제3항에 의거 기본설계를 포함한 타당성조사를 실시한 경우 기본설계 완료후 작성함(발주청 작성)

예비타당성조사단계		타당성조사단계			사업수행성과
총 공사비 (백만원)	추정 공사기간	총 공사비 (백만원)	추정 공사기간	공사비 증가한도액 (백만원)	공사비 증감율	공사기간 증감율	비고
	○년 ○○개월		○년 ○○개월

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

주) ① 예비타당성조사를 실시하지 않은 경우 ‘예비타당성조사단계’ 부분과 ‘사업수행성과’ 부분 작성 제외

② ‘총공사비’는 설계용역비, 감리비, 용지비, 보상비 등이 포함되지 않은 금액이며, 총공사비가 확정되지 아니한 경우에는 추정된 공사비의 총액을 말함

③ 사업수행성과 산출식

- 공사비(기간) 증감율 = [eqn: {타당성조사단계에서`추정공사비(기간)-예비타당성조사단계에서`추정한`공사비(기간)} over {예비타당성조사단계에서`추정한`공사비(기간)}]

④ ‘비고’란 작성은 비용이나 기간의 증가 또는 감소 등 변동이 있을 경우 그 사유를 기재

(2) 설계 단계

① 기본설계 완료후 사업수행성과

※ 건설기술관리법 시행령 제38조의9 제1항에 의거 기본설계를 실시하지 않을 경우에는 작성하지 않음

사업명	기본설계				공사비 증가시 재검증		사업수행성과
	용역비 (백만원)	수행기간	추 정 공사비 (백만원)	추 정 공사기간	실시여부 (○, ×)	미실시時 사유	기본 설계비 증감율	기본 설계기간 증감율	공사비 증감율	공사기간 증감율	비고
		년 월 일 - 년 월 일		○년 ○○개월

② 실시설계 완료후 사업수행성과

사업명	실시설계				공사비 증가시 재검증		사업수행성과
	용역비 (백만원)	수행기간	추 정 공사비 (백만원)	추 정 공사기간	실시여부 (○, ×)	미실시時 사유	실시 설계비 증감율	실시 설계기간 증감율	공사비 증감율	공사기간 증감율	비고
		년 월 일 - 년 월 일		○년 ○○개월

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

주) ① 기본설계 및 실시설계 수행기간은 관계기간 협의, 환경영향평가, 교통영향 평가 등에 소요된 기간을 제외한 기간임

② ‘공사비 증가시 재검증 실시여부 및 미실시時 사유’ 작성은 기본 또는 실시설계 단계에서 추정공사비가 타당성조사단계에서 명시한 공사비 증가한도액을 초과하였을 경우에만 작성함(근거조항: 건설기술관리법 시행령 제38조의10 및 제38조의11제4항)

③  사업수행성과 산출식

- 기본(실시)설계비 증감율 = [eqn: {기본(실시)설계용역```준공금액-기본(실시)설계용역```계약금액} over {기본(실시)설계용역```계약금액}]

- 기본(실시)설계기간 증감율 = [eqn: {기본(실시)설계용역```실제`수행기간-기본(실시)설계용역```계약당시`수행기간} over {기본(실시)설계용역```계약당시`수행기간}]

- 기본설계완료후 공사비(기간) 증감율 =

[eqn: {기본설계단계에서`추정공사비(기간)-타당성조사단계에서`추정한`공사비(기간)} over {타당성조사단계에서`추정한`공사비(기간)}]

- 실시설계완료후 공사비(기간) 증감율 =

[eqn: {실시설계단계에서`추정공사비(기간)-기본설계단계에서`추정한`공사비(기간)} over {기본설계단계에서`추정한`공사비(기간)}]

④ ‘비고’란 작성은 비용이나 기간의 증가 또는 감소 등 변동이 있을 경우 그 사유를 기재

(3) 시공 단계

① 시공 완료후 사업수행성과(안전, 변경, 재시공, 공사기간, 공사비 증감율)

사업명	일반사항		사업수행성과
	공사비 (계약시점)	공사기간 (계약시점)	안전		변경	재시공		공사비 증감율	공사기간 증감율	비고
			강도율	재해율	설계변경 공사비 계수	총재시공 비용계수	재시공 시간계수
	백만원	년 월 일 - 년 월 일

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

주) ① 사업수행성과 산출식

- 안전(강도율) = [eqn: {근로손실일수} over {연간근로시간수} TIMES 1,000]

- 안전(재해율) = [eqn: {재해건수} over {연간근로자수} TIMES 100]

- 변경(설계변경 공사비 계수) = [eqn: {설계변경을```통해```증가된```비용} over {실제``총공사비}](물가변동에 의한 계약금액 조정에 따른 증감액 제외)

- 재시공(총재시공 비용계수) = [eqn: {재시공```비용} over {실제``총공사비}]

- 재시공(재시공 시간계수) = [eqn: {재시공에```소요된```기간} over {실제``총공사기간}]

- 공사비 증감율 = [eqn: {건설공사(시공)```준공금액-건설공사(시공)```계약금액} over {건설공사(시공)```계약금액}](물가변동에 의한 계약금액 조정에 따른 증감액 제외)

- 공사기간 증감율 = [eqn: {실제`공사기간-계약당시`공사기간} over {계약당시`공사기간}]

② ‘비고’란 작성은 비용이나 기간의 증가 또는 감소 등 변동이 있을 경우 그 사유를 기재

- ‘공사기간 증감 사유’는 ① 관급자재 지급 지연 등 관련, ② 보상 지연 등 관련, ③ 천재지변 등 불가항력, ④ 설계변경, ⑤ 현장조건 변경, ⑥ 시공자의 귀책사유, ⑦ 사업예산 부족 등 관련, ⑧ 기타 사유로 구분하여 해당되는 사유의 번호를 기재(특징적이고 주요한 사유 3가지씩 기재)함

- ‘공사비 증감 사유’는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제64조의 ‘물가변동에 의한 계약금액의 조정’에 따른 증감은 제외하되, 물가변동에 의한 계약금액 조정 금액은 명시할 것

- 공사비(기간) 증감 사유에 대해 필요한 경우 별도로 세부적인 현황, 사유 및 조치내용 등을 수록하여 향후 공사 수행에 참고가 될 수 있도록 함

[별표2]

종합 사후평가표

				관리번호
				준 공 일							평 가 일
공사개요(공구별 또는 공종별 분할발주된 경우 각각의 공사)
공 사 명
공사규모
공사성격		□신규 □개보수․현대화 □확장․증설 □기타
공사비지급방식		□총액계약 □단가계약 □실비정산 □기타
발주기관
		평가담당자(부서/직위/성명)
위 치
공사개요
입찰․계약 방식
도급방법		□단독 □공동도급(공동이행방식, 분담이행방식, 주계약자관리방식)
계약성질		□장기계속공사 □장기계속공사→계속비 전환공사(전환시점 : ) □기타공사( )
입찰방식		□적격심사 □최저가 □턴키 □대안 □기타( )
계약방식		□제한 □일반경쟁 □지명경쟁 □수의 □기타( )
사업 참여자
구 분		건설(용역)업체명					대 표			발주청				비 고
										부서		담당자
예비타당성조사
타당성조사
기본설계
실시설계
시 공
감 리
기 타
※ 공동수급자 및 하도급자도 명시할 것
사업 수행평가
설계용역평가	점		시공평가		점				책임감리 용역평가				점

건설사업의 정량적 성과평가
사업단계 평가항목		예비타당성조사	타당성 조사	기본설계	실시설계	보상※	시공
용역비 및 공사비 (단위:백만원)	계약금액
	추정공사비					-	-
	추정공사기간	0년 00개월	0년 00개월	0년 00개월	0년 00개월	-	-
	준공금액
공 정	계약공기	0년 00개월	0년 00개월	0년 00개월	0년 00개월	년 월 일	년 월 일 - 년 월 일 (0년 00개월)
	실제공기	-	-	-	-	년 월 일	년 월 일 - 년 월 일 (0년 00개월)
설계변경 (물가변동금액 제외)	건 수	-	-	-	-	-
	증 감 액	-	-	-	-	-
	계약자 귀책금액	-	-	-	-	-
재시공 금액		-	-	-	-	-
※ 보상란의 ‘계약금액’에는 ‘당초 보상추정금액’을 ‘준공금액’에는 ‘실집행보상비‘를 기재, ‘계약공기’에는 ‘보상시작시점’을, ‘실제공기’에는 ‘보상완료시점’을 기재 ※ 시공란의 ‘계약공기’에는 계약상의 최초 착공일과 계약상의 최후 착공일을 기재하고, 실제공기는 계약상의 최초 착공일과 실제 공사준공일을 기재

종합평가표
평가분야	평가항목	평가지표		평가결과
사업효율	수 요	수요		계획 : → 실제 :
	기대효과	편익(3개항목 이상)	00편익	계획 : → 실제 :
			00편익	계획 : → 실제 :
			00편익	계획 : → 실제 :
사업 수행성과	사 업 비	사업비 증감율
		보상비 증감율
	사업기간	사업기간 증감율
파급효과	주민의 호응도 및 사용자 만족도	설문조사 방식 (필요시 [별표3]의 파급효과 방식으로 시행)
사후평가 추가 실시의 필요성과 실시시기				유( ) ; 년도
				무( )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

주) ① 평가분야 중, ‘사업효율’의 ‘편익’에 대한 측정은 [별표1] 단계별 사후평가표의 (1)타당성조사 단계의 편익항목을 참고하여 해당 시설물의 대표적인 편익 3개이상을 선정하여 건설공사 시행전후를 비교(비용환산 불필요)

예시) 통행시간 감소 :  계획 :  3시간 → 실제 :  2시간 30분

②  평가분야 중, ‘파급효과 ’ 분석은 주민 및 시설물 사용자에 대해 호응도 및 만족도를 설문조사 방식이나 [별표3]의 종합 사후평가표의 평가방법 중 택일하여 실시

주요 사항 기타

※당해 건설공사 시행과정이나 유지관리 업무를 시행하면서 발생되는 문제점 등을 기술할 것

※특히 사업효과, 공사비 혹은 공사기간이 계획과 상이한 경우 그 원인을 기술할 것

※신기술 적용, 우수사례 등 차후 유사사업에 참고할 수 있는 중요사항을 기술할 것

[별표3]

종합 사후평가표

				관리번호
				준 공 일							평 가 일
공사개요(공구별 또는 공종별 분할발주된 경우 각각의 공사)
공 사 명
공사규모
공사성격		□신규 □개보수․현대화 □확장․증설 □기타
공사비지급방식		□총액계약 □단가계약 □실비정산 □기타
발주기관
		평가담당자(부서/직위/성명)
위 치
공사개요
입찰․계약 방식
도급방법		□단독 □공동도급(공동이행방식, 분담이행방식, 주계약자관리방식)
계약성질		□장기계속공사 □장기계속공사→계속비 전환공사(전환시점 : ) □기타공사( )
입찰방식		□적격심사 □최저가 □턴키 □대안 □기타( )
계약방식		□제한 □일반경쟁 □지명경쟁 □수의 □기타( )
사업 참여자
구 분		건설(용역)업체명					대 표			발주청				비 고
										부서		담당자
예비타당성조사
타당성조사
기본설계
실시설계
시 공
감 리
기 타
※ 공동수급자 및 하도급자도 명시할 것
사업 수행평가
설계용역평가	점		시공평가		점				책임감리 용역평가				점

건설사업의 정량적 성과평가
사업단계 평가항목		예비타당성조사	타당성 조사	기본설계	실시설계	보상※	시공
용역비 및 공사비 (단위:백만원)	계약금액
	추정공사비					-	-
	추정공사기간	0년 00개월	0년 00개월	0년 00개월	0년 00개월	-	-
	준공금액
공 정	계약공기	0년 00개월	0년 00개월	0년 00개월	0년 00개월	년 월 일	년 월 일 - 년 월 일 (0년 00개월)
	실제공기	-	-	-	-	년 월 일	년 월 일 - 년 월 일 (0년 00개월)
설계변경 (물가변동금액 제외)	건 수	-	-	-	-	-
	증 감 액	-	-	-	-	-
	계약자 귀책금액	-	-	-	-	-
재시공 금액		-	-	-	-	-
※ 보상란의 ‘계약금액’에는 ‘당초 보상추정금액’을 ‘준공금액’에는 ‘실집행보상비‘를 기재, ‘계약공기’에는 ‘보상시작시점’을, ‘실제공기’에는 ‘보상완료시점’을 기재 ※ 시공란의 ‘계약공기’에는 계약상의 최초 착공일과 계약상의 최후 착공일을 기재하고, 실제공기는 계약상의 최초 착공일과 실제 공사준공일을 기재

종합평가표
평가분야	평가항목	평가지표		평가결과
사업효율	수 요	수요		계획 : → 실제 :
	기대효과	B/C 비율		계획 : → 실제 :
사업 수행성과	사 업 비	사업비 증감율
		보상비 증감율
	사업기간	사업기간 증감율
파급효과	주민의 호응도 및 사용자 만족도	민원	다수민원 발생 건수
			다수민원 처리 건수
		하자	하자 발생 건수
			하자 처리 건수
		지역경제	인구 수
			종사자 수
			지역 총 생산
			지가 상승율
		지역사회	지역 낙후도
		환경	-
사후평가 추가 실시의 필요성과 실시시기				유( ) ; 년도
				무( )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

주) ① 평가분야 중, ‘파급효과’ 부분의 제시한 평가지표에 대해서는 기본적으로 측정하되, 발주청에서 필요하다고 판단시에는 세부적인 평가항목을 추가하여 측정할 수 있음

② ‘다수민원’은 민원사무처리에 관한 법률 시행령 제22조 제1항에서 명시한 ‘다수인관련민원’을 말함

③ ‘환경’에 대한 측정은 환경영향평가법 시행령 [별표2]에서 제시한 환경영향평가 항목을 참고하여 시설물 유형별로 대표적인 항목 3개 이상을 발주청에서 자율적으로 선정하여 측정하거나, 설문조사 방식으로 수행함

주요 사항 기타

※당해 건설공사 시행과정이나 유지관리 업무를 시행하면서 발생되는 문제점 등을 기술할 것

※특히 사업효과, 공사비 혹은 공사기간이 계획과 상이한 경우 그 원인을 기술할 것

※신기술 적용, 우수사례 등 차후 유사사업에 참고할 수 있는 중요사항을 기술할 것