평창군 고시 제 2017–191 호

평창군 대화면 농촌중심지활성화사업

시행계획 변경(1차) 고시

대화면 농촌중심지활성화사업 시행계획에 대하여 농어촌정비법 제59조, 제60조 같은법 시행령 제82조 규정에 의거 다음과 같이 변경 고시합니다.

2017년   12월  22일

평     창     군     수

1. 고시 내용 : 아래와 같음.

2. 관계서류 및 도서는 평창군청 도시주택과(☏ 033-330-2015) 및 대화면

사무소 총무담당(☏ 033-330-2604)에 비치하여 일반인에게 보입니다.

3. 사업시행자 : 평창군(일괄위탁 : 한국농어촌공사 원주지사)

대화면 농촌중심지활성화사업 시행계획 변경(1차)

2017. 12

	평창군

대화면소재지 농촌중심지활성화사업 시행변경(1차)

1. 사업개요

○ 위    치 : 강원도 평창군 대화면 대화리 일원

○ 사업기간 : 2013 ~ 2016년(4년간)

○ 주요사업내용

- 기초생활기반확충 : 주민문화센터, 땀띠교, 공용주차장

- 지역경관개선부문 : 다목적광장, 시장로정비, 산소길조성

○ 소요사업비 : 7,000백만원(국비: 4,900, 지방비: 2,100)

▸ 자부담 : 7백만원(총 사업비에는 미포함)

2. 추진경위

2013. 03. 09 : 일반농산어촌개발사업(읍면소재지종합정비)확정

2013. 03. 25 : 기본계획 착수

2013. 12. 30 : 기본계획 승인(강원도)

2014. 02. 17 : 실시설계 대비 주민설명회 실시

2014. 03. 12 : 경관형성계획 및 실시설계 착수

2014. 11. 20 : 경관형성계획 및 실시설계 최종설명회 실시

2015. 04. 14 : 1차 시행계획 승인(시장로정비, 산소길조성)

2015. 09. 08 : 1차 여건변동 승인(주민문화센타 건축 변경 등)

2015. 11. 17 : 2차 시행계획 승인(땀띠교)

2015. 12. 02 : 2차 여건변동 승인(시장로정비, 산소길조성 변경)

2016. 05. 23 : 3차 시행계획 승인(주민문화센터, 공용주차장, 다목적광                장, 시장로정비 2차)

2016. 06. 27 : 3차 여건변동 승인(시장로정비, 산소길조성 변경)

2016. 09. 29 : 4차 여건변동 승인(시장로정비, 산소길조성 변경)

2016. 11. 23 : 5차 여건변동 승인(땀띠교, 주민문화센터 외 3건 변경)

2017. 03. 08 : 6차 여건변동 승인(땀띠교, 주민문화센터 외 3건 변경)

3. 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	연차별 사업비 투자내역					비 고
	합 계	2013년	2014년	2015년	2016년
합 계	<8> 7,000	956	1,511	<8> 1,511	3,022	<>:외서: 자부담
◦ 국 비	4,900	669	1,058	1,058	2,115
◦ 지방비	2,100	287	453	453	907
◦ 민간부담	<8>			<8>

1. 시행계획 변경 승인요청 내역

가. 사 업 비

(단위 : 천원)

사 업 명		기본계획 (A)	승인금액	금회변경 신청금액	증△감	비 고
합 계		<8,000> 7,000,000	<8,000> 7,000,000	<6,974> 7,097,981	<△1,026> 97,981
① 주민문화센터		1,625,000	1,996,063	1,904,681	△91,382
② 땀띠교량		998,000	1,403,747	1,319,104	△84,643
③ 공용주차장		959,000	229,019	297,810	68,791
④ 다목적광장		903,000	700,449	717,295	16,846
⑤ 시장로정비	1차	689,000	494,012	562,466	68,454
	2차	-	799,704	685,785	△113,919
	계	689,000	1,293,716	1,248,251	△45,465
⑥ 산소길조성		602,000	167,207	374,003	206,796
⑦ 지역역량강화		<8,000> 336,000	<8,000> 336,000	<6,974> 287,297	<△1,026> △48,703
⑧ 제경비		888,000	873,799	949,540	75,741

※ 평창군 도시주택과 - 18636(2017.03.06.)보조금 이자 사용 승인 통보(97,981천원)

사 업 비 수 지 예 산 서

(수입)

(단위 : 천원)

구 분	기본계획	시행계획				비고
		합 계	승인액	변경신청	향후계획
합 계	7,000,000	7,097,981	7,000,000	97,981	-
◦ 국 비	4,900,000	4,900,000	490,000	-	-
◦ 지방비	2,100,000	2,197,981	210,000	97,981	-
- 군 비	2,100,000	2,100,000	210,000	-	-
- 이 자	-	97,981	-	97,981	-

(지출)

(단위 : 천원)

구 분			기본계획	시행계획				비고
				합 계	승인액	변경신청	향후계획
합 계			<8,000> 7,000,000	<6,974> 7,097,981	<8,000> 7,000,000	<△1,026> 97,981	-	<>:외서: 자부담
H/W 사업	주민문화센터		1,625,000	1,904,681	1,996,063	△91,382	-
	땀띠교량		998,000	1,319,104	1,403,747	△84,643	-
	공용주차장		959,000	297,810	229,019	68,791	-
	다목적광장		903,000	717,295	700,449	16,846	-
	시장로정비	1차	689,000	562,466	494,012	68,454	-
		2차	-	685,785	799,704	△113,919	-
		계	689,000	1,248,251	1,293,716	△45,465	-
	산소길조성		602,000	374,003	167,207	206,796	-
S/W 사업	지역역량강화		<8,000> 336,000	<6,974> 287,297	<8,000> 336,000	<△1,026> △48,703	-
기타	제경비		888,000	949,540	873,799	75,741	-

기능별 사업비(량) 증감사유서

(단위 : 천원)

사 업 명	승인액(A)	시행계획	증△감 (B-A)	증 감 사 유
		변경승인(B)
합 계	<8,000> 7,000,000	<6,974> 7,097,981	<△1,026> 97,981	도시주택과-18236호로 보조금 이자 사용 통보
○ 기초생활기반확충	3,628,829	3,521,595	△107,234
- 주민문화센터	1,996,063	1,904,681	△91,382	현지여건 반영
- 땀띠교량	1,403,747	1,319,104	△84,643	현지여건 반영
- 공용주차장	229,019	297,810	68,791	현지여건 반영
○ 지역경관개선사업	2,161,372	2,339,549	178,177
- 다목적광장	700,449	717,295	16,846	현지여건 반영
- 시장로정비 1차	494,012	562,466	68,454	현지여건 반영
- 시장로정비 2차	799,704	685,785	△113,919	현지여건 반영
- 산소길조성	167,207	374,003	206,796	현지여건 반영
○ 지역역량강화	<8,000> 336,000	<6,974> 287,297	<△1,026> △48,703	현지여건 반영
-교육	<8,000> 206,000	<6,974> 176,326	<△1,026> △29,674
-컨설팅·홍보·정보화	106,000	79,967	△26,033
-마을경영	24,000	31,004	7,004
○ 제경비	873,799	949,540	75,741
기본계획,세부설계비,공사감리비 등	873,799	949,540	75,741

사 업 비 수 지 예 산 서

구분			기본계획	승인액	변경 신청액	증 감	증감사유	비고
합 계			<8,000> 7,000,000	<8,000> 7,000,000	<6,974> 7,097,981	<△1,026> 97,981	-
H / W 사 업	주민문화센터		1,625,000	1,996,063	1,904,681	△91,382	여건변동 반영에 의한 감
	땀띠교량		998,000	1,403,747	1,319,104	△84,643	여건변동 반영에 의한 감
	공용주차장 및 다목적광장		1,862,000	929,468	1,015,105	85,637	여건변동 반영에 의한 증
	시장로정비	1차	689,000	494,012	562,466	68,454
		2차	-	799,704	685,785	△113,919
		계	689,000	1,293,716	1,248,251	△45,465	여건변동 반영에 의한 감
	산소길조성		602,000	167,207	374,003	206,796	여건변동 반영에 의한 증
	소계		5,776,000	5,790,201	5,861,144	70,943
S/W 사업			<8,000> 336,000	<8,000> 336,000	<6,974> 287,297	<△9,826> △48,703	여건변동 반영에 의한 감
제경비	기본계획비		120,000	120,000	120,000	-	변동없음
	세부설계비		143,000	136,975	136,975	-	변동없음
	공사감리비		325,000	328,166	310,372	△17,794	실정산액 반영
	사업관리비		80,000	79,776	82,570	2,794	실정산액 반영
	잡 지 출		40,000	107,247	227,988	120,741	여건변동 반영에 의한 증
	경관형성계획비		150,000	71,635	71,635	-	변동없음
	일반농산어촌 지원비		30,000	30,000	-	△30,000	잡지출 반영
	소계		888,000	873,799	949,540	75,741