평창군 고시 제 2017– 192 호

평창군 봉평면 농촌중심지활성화사업

시행계획 변경(1차) 고시

봉평면 농촌중심지활성화사업 시행계획에 대하여 농어촌정비법 제59조, 제60조 같은법 시행령 제82조 규정에 의거 다음과 같이 변경 고시합니다.

2017년   12월  22일

평     창     군     수

1. 고시 내용 : 아래와 같음.

2. 관계서류 및 도서는 평창군청 도시주택과(☏ 033-330-2015) 및 봉평면

사무소 총무담당(☏ 033-330-2605)에 비치하여 일반인에게 보입니다.

3. 사업시행자 : 평창군(일괄위탁 : 한국농어촌공사 원주지사)

봉평면소재지 종합정비사업 시행계획변경(1차)

2017. 12.

	평창군

봉평면 소재지 종합정비사업 시행계획변경(1차)

1. 사업개요

○ 위    치 : 강원도 평창군 창동리 일원

○ 사업기간 : 당초 2014 ~ 2017년(4년간)

변경 2014 ~ 2018년(5년간)

○ 주요사업내용

- 기초생활기반확충 : 문화복지센터, 체육관 리모델링

- 지역경관개선 : 기풍로 가로경관 및 포장공사, 경관조성, 무대경관조성

○ 소요사업비 : 6,790백만원(국비: 4,690, 지방비: 2,100)

2. 추진경위

2014. 03. 11 : 기본계획 착수

2016. 06. 23 : 지역역량강화사업 승인

2014. 03. ~ 09.(6회) : 봉평면소재지 추진위원회 회의

2014. 10. 22 : 봉평면 소재지 중간 설명회 개최

2015. 01. 04 : 봉평면 소재지 최종 설명회 개최

2015. 02. 10 : 봉평면소재지 기본계획 승인

2015. 05. 11 : 경관형성계획 및 실시설계 착수

2015. 07. 13 : 무대경관조성 선실행

2015. 12. 21 : 경관형성계획 및 실시설계 준공

2016. 02. 11 : 시행계획승인신청

2016. 03. 28 : 시행계획승인

2016. 12. 02 : 1차 여건변동보고 승인

2017. 09. 06 : 문화복지센터 및 체육관 사용승인

3. 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	연차별 사업비 투자내역					비 고
	합 계	2014년	2015년	2016년	2017년
합 계	6,790	688	886	1,857	3,359	<>외서:자부담
◦ 국 비	4,690	482	620	1,300	2,288
◦ 지방비	2,100	206	266	557	1,071
◦ 민간부담	<6>	-	<6>	-	-

1. 시행계획 승인요청 내역

가. 사 업 비

(단위 : 천원)

사 업 명	기본계획 (A)	승인금액	금 회 변 경 신청금액(1차)	증△감	비 고
합 계	6,790,000	6,790,000	6,790,000	-
① 문화복지센터 리모델링	1,231,000	1,446,362	1,520,972	74,610
② 체육관 리모델링	863,000	1,341,640	1,314,013	△27,627
③ 기풍로 가로경관	2,802,000	2,394,844	2,327,774	△67,070
④ 경관조성	582,000	466,860	355,017	△111,843
⑤ 무대경관조성	45,000	45,843	45,843	-
⑥ 지역역량강화	356,000	356,000	259,239	△96,761
⑦ 제경비	911,000	738,451	967,142	228,691

사 업 비 수 지 예 산 서

(수입)

(단위 : 천원)

구 분	기본계획	시행계획				비고
		시행계획	승인금액	변경금액	향후계획
합 계	6,790,000	6,790,000	6,790,000	6,790,000	-
◦ 국 비	4,690,000	4,690,000	4,690,000	4,690,000	-
◦ 지방비	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	-
- 군 비	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	-

(지출)

(단위 : 천원)

구 분		기본계획	승 인 금 액			비고
			승인금액	변경금액(1차)	향후계획
합 계		<7,000> 6,790,000	<6,000> 6,790,000	<6,000> 6,790,000		<>:외서: 자부담
H/W 사업	문화복지센터 조성	1,231,000	1,446,362	1,520,972	-
	체육관 리모델링	863,000	1,341,640	1,314,013	-
	기풍로 가로경관	2,802,000	2,394,844	2,327,774
	경관조성	582,000	466,860	355,017	-
	무대경관조성	45,000	45,843	45,843	-
S/W 사업	지역역량강화	<7,000> 356,000	<7,000> 356,000	<6,000> 259,239	-
기타	제경비	911,000	738,451	967,142

기능별 사업비(량) 사유서

(단위 : 천원)

사 업 명		기본계획	시행계획	시행계획	증△감 (B-A)	증 감 사 유
			승인(A)	변경(B)
합 계		6,790,000	6,790,000	6,790,000	-	1차여건변동보고 평차군 도시주택과-90144 (2016.12.02.)
기초 생활 기반 확충	문화복지센터 리모델링	1,231,000	1,446,362	1,520,972	74,610	복지관후문 캐노피설치 기계실 창호 설치 헬스장 탈의실 락카룸 설치 등
	생활체육관 리모델링	863,000	1,341,640	1,314,013	△27,627	4대보험료 정산
소 계		2,094,000	2,788,002	2,834,985	46,983
지역 경관 개선	기풍로 가로경관 및 포장공사	2,802,000	2,394,844	2,327,774	△67,070	한전 및 통신공사 사업비정산 보도교체공사추가, 이면도로 포장연장, 경계석 일부 교체 등
	경관조성	582,000	466,860	355,017	△111,843	소공원 나무식재 제외 투수콘포장 제외
	무대경관조성	45,000	45,843	45,843	-
소 계		3,429,000	2,907,547	2,728,634	△178,913
지역역량강화	지역역량강화	356,000	356,000 (7,000)	259,239 (6,000)	△96,761	시행계획변경 평창군 도시주택과-110362 (2017.11.29.)
제경비	기본계획수립비	120,000	120,000	120,000	-
	세부설계비	175,000	110,300	110,300	-
	공사감리비	401,000	267,019	267,019	-
	사업관리비	75,000	77,247	77,247	-
	잡지출	10,000	46,885	60,261	13,376	사업비 정산
	농어촌경관형성계획	100,000	87,000	87,000	-
	일반농산어촌지원비	30,000	30,000	30,000	-
	기타부대비			215,315	215,315	정산에 따른 예비비
소 계		911,000	738,451	967,142

사 업 비 수 지 예 산 서

구분		기본계획	승인액	변경금액 (1차)	증(△)감	증감사유	비고
합 계		<7,000> 6,790,000	<7,000> 6,790,000	<6,000> 6,790,000	-	1차여건변동보고 평차군 도시주택과-90144 (2016.12.02.)
H / W 사 업	문화복지센터 리모델링	1,231,000	1,446,362	1,520,972	74,610	복지관후문 캐노피설치 기계실 창호 설치 헬스장 탈의실 락카룸 설치 등
	생활체육관 리모델링	863,000	1,341,640	1,314,013	△27,627	4대보험료 정산
	계		2,788,002	2,834,985	46,983
	기풍로가로경관 및포장공사	2,802,000	2,394,844	2,327,774	△67,070	한전 및 통신공사 사업비정산 보도교체공사추가, 이면도로 포장연장, 경계석 일부 교체 등
	경관조성(주차장)	582,000	466,860	355,017	△111,843	소공원 나무식재 제외 투수콘포장 제외
	무대경관조성	45,000	45,843	45,843	-
	계		2,907,547	2,728,634	△178,913
S/W 사업		<6,000> 356,000	<7,000> 356,000	<6,000> 259,239	△96,761	시행계획변경 평창군 도시주택과-110362 (2017.11.29.)
제경비	기본계획비	120,000	120,000	120,000	-
	세부설계비	175,000	110,300	110,300	-
	공사감리비	401,000	267,019	267,019	-
	사업관리비	75,000	77,247	77,247	-
	잡 지 출	10,000	46,885	60,261	13,376	사업비 정산
	경관형성계획비	100,000	87,000	87,000	-
	일반농산어촌사업 지원비	30,000	30,000	30,000	-
	기타부대비	-		215,315	215,315	정산에 따른 예비비
계			738,451	967,142	228,691

지중화사업 사업비 정산에 따른 예비비 사용으로 사업기간 연장

구 분	당초 (A)	변경 (B)	증감 (B-A)	비 고 (증감사유)
공사기간	2014 ～ 2017.12	2014 ～ 2018.12	1년	사업비정산으로 남은 사업비 사용에 따른 기간연장

절대 증감 비율 비교표

구분		기본계획	승 인 액	1차 변경 신 청 액	절 대 증△감	비 율	비고
합 계		<7,000> 6,790,000	<7,000> 6,790,000	<6,000> 6,790,000	-	-
H / W 사 업	문화복지센터 리모델링	1,231,000	1,446,362	1,520,972	74,610
	생활체육관 리모델링	863,000	1,341,640	1,314,013	△27,627
	계		2,788,002	2,834,985	102,237	3.67%
	기풍로가로경관 및 포장공사	2,802,000	2,394,844	2,327,774	△67,070
	경관조성 (주차장)	582,000	466,860	355,017	△111,843
	무대경관조성	45,000	45,843	45,843
	계		2,907,547	2,728,634	△178,913	6.15%
S/W 사업		<7,000> 356,000	<7,000> 356,000	<6,974> 259,239	△96,761	27.18%