강원도공고 제2018-551호

2018 평창 동계올림픽 특별구역 변경 지정

『2018 평창 동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회 지원 등에 관한 특별법』제40조에 따라 2018 평창 동계올림픽 특별구역 변경 지정을 확정하고, 이를 동법 시행령 제21조의 규정에 의하여 다음과 같이 공고합니다.

2018년  4월 13일

강   원   도   지   사

<변경사유>

○ 특구개발사업의 사업비 및 사업기간 변경을 반영하여 특구의 합리적인 개발을 통해 지속 가능한 지역 발전 여건 조성

1. 특구의 명칭·위치 및 면적(변경 없음)

○ 명 칭 : 2018 평창 동계올림픽 특별구역

○ 위 치 : 강원도 평창군, 강릉시, 정선군 일원

○ 면 적:  총 26.54㎢(5개 특구, 13개 지구)
(평창권역 20.06㎢ : 2개 특구, 7개 지구,   강릉권역 3.65㎢ : 2개 특구, 5개 지구,
정선권역 2.83㎢ : 1개 특구, 1개 지구)

2. 특구의 지정 목적(변경 없음)

○ 동계올림픽대회 개최를 계기로 해당지역을 동계올림픽도시 기능과 관광·문화·연구·주거·산업기능이 융·복합된『아시아 동계스포츠 메카도시』로 육성

○ 동계올림픽이라는 메가스포츠 이벤트 개최지의 발전 잠재력을 토대로 대회 개최이후 지속적인 지역발전 계기로 활용

3. 특구개발사업 시행지역의 위치·면적 및 특구개발사업의 시행예정자 또는 특구사업 시행자(변경 없음)

4. 특구개발사업의 시행기간(변경), 재원조달방법(변경) 및 시행방법(변경 없음)

○ 특구종합계획 시행기간(변경 없음)

- 특구종합계획 시행기간은 2013년부터 2032년까지 20년간으로 단계별 추진 계획

(단계별 개발 → 1단계 : 2013년∼2018년 / 2단계 : 2019년∼2032년)

○ 특구개발사업 사업기간(변경)

- 지구명 및 사업명 : 녹색비즈니스․해양휴양지구, 경포지구 관광숙박 빌리지 조성

․ 사업기간 - 기정 : 2013년∼2017년, 변경 : 2013년∼2018년

- 지구명 및 사업명 : 정선생태체험지구, 정선알파인 경기장 숙소 조성

․ 사업기간 - 기정 : 2015년∼2017년, 변경 : 2015년∼2018년

- 지구명 및 사업명 : 문화창작지구, 효석문학예술촌 조성

․ 사업기간 - 기정 : 2015년∼2017년, 변경 : 2015년∼2018년

○ 재원조달방법(변경)

- 기정 : 평창 동계올림픽 특구 조성사업비는 총 2조 7,623억원이 소요될 것으로 전망되며,

재원조달 방안은 중앙정부, 지방자치단체 및 민자 등으로 충당 계획

- 변경 : 평창 동계올림픽 특구 조성사업비는 총 2조 7,660억원이 소요될 것으로 전망되며,

재원조달 방안은 중앙정부, 지방자치단체 및 민자 등으로 충당 계획

․ 사업비 변경 상세내역

(단위 : 백만원)
구 분	세부 사업내용	사업규모	사 업 비						비고
			계		국 비	지방비	민 자
			기정	변경			기정	변경
합 계	2개사업	-	73,844	77,544	-	-	73,844	77,544
정선 생태체험지구	알파인경기장 대체숙소건립사업	숙박시설 (204실)	50,544	50,544	-	-	50,544	50,544
	가리왕산호텔 건립사업	숙박시설 (107실)	23,300	27,000	-	-	23,300	27,000

○ 시행방법(변경 없음)

- 시행방법은 수용 및 사용방식을 원칙으로 하되, 사업지구별 기능ㆍ특성을 감안하여 별도 사업방식도 병행하여 시행

5. 토지이용계획과 주요 기반시설계획(변경 없음)

6. 인구수용계획과 주거시설 조성계획(변경 없음)

7. 외국인의 투자유치와 정주를 위한 환경조성계획(변경 없음)

8. 관련 도서의 열람방법

○ 『2018 평창 동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회 지원 등에 관한 특별법』제40조의 규정에 의한 관련 도서는 문화체육관광부 동계올림픽 특구기획단(044-203-3194), 강원도 경관과(033-249-3934), 정선군 동계올림픽지원단(033-560-2085)에서 열람 가능