평창군 고시 제 2019–5 호

평창군 봉평면 농촌중심지활성화사업

시행계획 변경(2차) 고시

봉평면 농촌중심지활성화사업 시행계획에 대하여 농어촌정비법 제59조, 제60조 같은법 시행령 제82조 규정에 의거 다음과 같이 변경 고시합니다.

2019년   1월  7일

평     창     군     수

1. 고시 내용 : 아래와 같음.

2. 관계서류 및 도서는 평창군청 도시주택과(☏ 033-330-2015) 및 봉평면

사무소 총무담당(☏ 033-330-2605)에 비치하여 일반인에게 보입니다.

3. 사업시행자 : 평창군(일괄위탁 : 한국농어촌공사 원주지사)

봉평면 농촌중심지활성화사업 시행계획변경(2차)

2019. 01.

	평창군

봉평면 농촌중심지활성화사업 시행계획변경

1. 사업개요

○ 위    치 : 강원도 평창군 창동리 일원

○ 사업기간 : 당초 2014 ~ 2018년(5년간)

변경 2014 ~ 2019년(6년간)

○ 주요사업내용

- 기초생활기반확충 : 문화복지센터, 체육관 리모델링

- 지역경관개선 : 기풍로 가로경관 및 포장공사, 경관조성, 무대경관조성

○ 소요사업비 : 6,790백만원(국비: 4,690, 지방비: 2,100)

2. 추진경위

2014. 03. 11 : 기본계획 착수

2016. 06. 23 : 지역역량강화사업 승인

2014. 03. ~ 09.(6회) : 봉평면소재지 추진위원회 회의

2014. 10. 22 : 봉평면 소재지 중간 설명회 개최

2015. 01. 04 : 봉평면 소재지 최종 설명회 개최

2015. 02. 10 : 봉평면소재지 기본계획 승인

2015. 05. 11 : 경관형성계획 및 실시설계 착수

2015. 07. 13 : 무대경관조성 선실행

2015. 12. 21 : 경관형성계획 및 실시설계 준공

2016. 02. 11 : 시행계획승인신청

2016. 03. 28 : 시행계획승인

2016. 12. 02 : 1차 여건변동보고 승인

2017. 09. 06 : 문화복지센터 및 체육관 사용승인

2018. 01. 03 : 생활체육관 평창군 인수인계 완료

2018. 07. 03 : 여건변동(1차) 승인

2018. 12. 13 : 여건변동(2차) 승인

3. 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	연차별 사업비 투자내역							비 고
	합 계	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
합 계	6,790	688	886	1,857	3,359	-	-	<>외서:자부담
◦ 국 비	4,690	482	620	1,300	2,288	-	-
◦ 지방비	2,100	206	266	557	1,071	-	-
◦ 민간부담	<6>	-	<6>	-	-	-	-

1. 시행계획 승인요청 내역

가. 사 업 비

(단위 : 천원)

사 업 명	기본계획 (A)	승인금액	금 회 변 경 신청금액	증△감	비 고
합 계	6,790,000	6,790,000	6,790,000	-
① 문화복지센터 리모델링	1,231,000	1,520,972	1,735,606	214,634
② 체육관 리모델링	863,000	1,314,013	1,313,990	△23
③ 기풍로 가로경관	2,802,000	2,327,774	2,255,226	△72,548
④ 경관조성	582,000	355,017	371,263	16,246
⑤ 무대경관조성	45,000	45,843	45,843	-
⑥ 지역역량강화	356,000	259,239	288,071	28,832
⑦ 제경비	911,000	967,142	780,001	△187,141

사 업 비 수 지 예 산 서

(수입)

(단위 : 천원)

구 분	기본계획	시행계획				비고
		시행계획	승인금액	변경금액	증△감
합 계	6,790,000	6,790,000	6,790,000	6,790,000	-
◦ 국 비	4,690,000	4,690,000	4,690,000	4,690,000	-
◦ 지방비	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	-
- 군 비	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	-

(지출)

(단위 : 천원)

구 분		기본계획	승 인 금 액			비고
			승인금액	변경금액	증△감
합 계		<7,000> 6,790,000	<6,000> 6,790,000	<6,000> 6,790,000	-	<>:외서: 자부담
H/W 사업	문화복지센터 조성	1,231,000	1,520,972	1,735,606	214,634
	체육관 리모델링	863,000	1,314,013	1,313,990	△23
	기풍로 가로경관	2,802,000	2,327,774	2,255,226	△72,548
	경관조성	582,000	355,017	371,263	16,246
	무대경관조성	45,000	45,843	45,843	-
S/W 사업	지역역량강화	<7,000> 356,000	<6,000> 259,239	<6,000> 288,071	28,832
기타	제경비	911,000	967,142	780,001	△187,141

기능별 사업비(량) 증감 사유서

(단위 : 천원)

사 업 명		기본계획	시행계획	시행계획	증△감 (B-A)	증 감 사 유
			승인(A)	변경(B)
합 계		6,790,000	6,790,000	6,790,000	-	여건변동(1차,2차) 승인 평창군 도시주택과-61863(2018.07.03.) 평창군 도시주택과-122299(2018.12.13.)
기초 생활 기반 확충	문화복지센터 리모델링	1,231,000	1,520,972	1,735,606	214,634	2층 헬스기구 추가 및 바닥 마루마감 3층 바닥 마루마감 및 거울 설치 증축구간(창고) 신설 등
	생활체육관 리모델링	863,000	1,314,013	1,313,990	△23	한전납입금 정산
소 계		2,094,000	2,834,985	3,049,596	214,611
지역 경관 개선	기풍로 가로경관 및 포장공사	2,802,000	2,327,774	2,255,226	△72,548	통신공사(지중화) 사업비 정산 기풍로 가로등 정비공사 추가 포장공사 물량 조정 등
	경관조성	582,000	355,017	371,263	16,246	태양광 발전장치 기초공사 추가 폐기물 물량 조정 등
	무대경관조성	45,000	45,843	45,843
소 계		3,429,000	2,728,634	2,672,332	56,302
지역역량강화	지역역량강화	356,000	259,239 (6,000)	288,071 (6,000)	28,832	누들축제 지원 및 리플릿 제작 추가 사무장 채용기간 연장 등
제경비	기본계획수립비	120,000	120,000	120,000
	세부설계비	175,000	110,300	110,300
	공사감리비	401,000	267,019	327,159	60,140	사업비 정산
	사업관리비	75,000	77,247	82,720	5,473	사업비 정산
	잡지출	10,000	60,261	52,822	△7,439	부지매입(359-34) 및 사업비 정산
	농어촌경관형성계획	100,000	87,000	87,000
	일반농산어촌지원비	30,000	30,000	-	△30,000	사업비 정산
	기타부대비		215,315	-	△215,315	사업비 정산
소 계		911,000	967,142	780,001	△187,141

사 업 비 수 지 예 산 서

구분		기본계획	승인액	변경금액	증(△)감	증감사유	비고
합 계		<7,000> 6,790,000	<6,000> 6,790,000	<6,000> 6,790,000	-	여건변동(1차,2차) 승인 평창군 도시주택과-61863(2018.07.03.) 평창군 도시주택과-122299(2018.12.13.)
H / W 사 업	문화복지센터 리모델링	1,231,000	1,520,972	1,735,606	214,634	2층 헬스기구 추가 및 바닥 마루마감 3층 바닥 마루마감 및 거울 설치 증축구간(창고) 신설 등
	생활체육관 리모델링	863,000	1,314,013	1,313,990	△23	한전납입금 정산
	계		2,834,985	3,049,596	214,611
	기풍로가로경관 및포장공사	2,802,000	2,327,774	2,255,226	△72,548	통신공사(지중화) 사업비 정산 기풍로 가로등 정비공사 추가 포장공사 물량 조정 등
	경관조성(주차장)	582,000	355,017	371,263	16,246	태양광 발전장치 기초공사 추가 폐기물 물량 조정 등
	무대경관조성	45,000	45,843	45,843
	계		2,728,634	2,672,332	56,302
S/W 사업		<6,000> 356,000	<6,000> 259,239	<6,000> 288,071	28,832	누들축제 지원 및 리플릿 제작 추가 사무장 채용기간 연장 등
제경비	기본계획비	120,000	120,000	120,000
	세부설계비	175,000	110,300	110,300
	공사감리비	401,000	267,019	327,159	60,140	사업비 정산
	사업관리비	75,000	77,247	82,720	5,473	사업비 정산
	잡 지 출	10,000	60,261	52,822	△7,439	부지매입(359-34) 및 사업비 정산
	경관형성계획비	100,000	87,000	87,000
	일반농산어촌사업 지원비	30,000	30,000	-	△30,000	사업비 정산
	기타부대비	-	215,315	-	△215,315	사업비 정산
계			967,142	780,001	△187,141

지중화공사 사업비 정산(한국전력 정산분)을 위한 사업기간 연장

구 분	당초 (A)	변경 (B)	증감 (B-A)	비 고 (증감사유)
공사기간	2014 ～ 2018.12	2014 ～ 2019.12	1년	봉평면 지중화공사 완료에 따른 사업비 정산(한국전력 정산분)을 위한 사업기간 연장

지중화공사 사업비 정산(통신사 정산분)

(단위:원)

구 분	당초 (A)	변경 (B)	증감 (B-A)	비 고 (증감사유)
사업비	489,382,650	455,513,887	감 33,868,763	정산에 따른 사업비 증액

* 보조금 이자사용 금액을 통신사 정산분과 당초 사업비를 합산한 금액으로 대체

(통신사 정산분: 도시주택과-118257(2018.12.04.), 도시주택과-116507(2018.11.29.), 도시주택과-108961(2018.11.12.), 도시주택과-107995(2018.11.07.), 도시주택과-104053(2018.10.29.)

보조금 이자사용 승인: 도시주택과-122299(2018.12.13.))

절대 증감 비율 비교표

구분		기본계획	승 인 액	변경 신 청 액	절 대 증△감	비 율	비고
합 계		<7,000> 6,790,000	<6,000> 6,790,000	<6,000> 6,790,000	-	-
H / W 사 업	문화복지센터 리모델링	1,231,000	1,520,972	1,735,606	214,634
	생활체육관 리모델링	863,000	1,314,013	1,313,990	△23
	계		2,834,985	3,049,596	214,657	7.57%
	기풍로가로경관 및 포장공사	2,802,000	2,327,774	2,255,226	△72,548
	경관조성 (주차장)	582,000	355,017	371,263	16,246
	무대경관조성	45,000	45,843	45,843
	계		2,728,634	2,672,332	88,794	3.25%
S/W 사업		<7,000> 356,000	<6,974> 259,239	<6,000> 288,071	28,832	11.12%